문서번호	방재시설부-2277
결재일자	2015.2.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	02/23 임춘근
협조	공원개발팀장		오대근
	주무관		고소영

「경의선숲길, 경춘선 폐선부지 공원조성공사 통합 전면책임감리용역」

건설기술자 추가투입 및 배치계획 변경 검토

2015. 02.

도시기반시설본부

방재시설부

『경의선숲길, 경춘선 폐선부지 공원조성공사 통합 전면책임감리용역』

건설기술자 추가투입 및 배치계획 변경 검토

「경의선숲길, 경춘선 폐선부지 공원조성공사 통합 전면책임감리용역」의

건설기술자 추가투입 및 배치계획 변경 실정보고에 대한 검토보고임.   ▶ 관련근거 : 경의경춘(감) 제2015 –86(2015.02.09.)호

Ⅰ

용역개요

□ 용 역 명 : 경의선숲길,경춘선 폐선부지 공원조성공사 통합 전면책임감리용역

□ 과업위치 : 경의선 – 용산구 용산문화체육센터 ~ 마포구 가좌역

경춘선 – 노원구 공릉동 공덕제2철도건널목 ~ 육사삼거리

□ 내    용 : 공원조성(조경/토목/전기/통신/폐기물처리용역 등)

□ 용역기간 : 2013.11.27~2016.5.14

□ 용 역 비 : 1,310,200,000원

□ 용 역 사 : ㈜유신, ㈜건일엠이씨

Ⅱ

감리단 보고내용

□ 건설기술자 추가투입 및 배치계획 변경 검토

○『경의선숲길 공원조성공사』와『경춘선 폐선부지 공원조성공사』는  통합 책임건설사업관리용역으로, 이격된(시내거리 20㎞이상) 현장에 대해 건설기술자 부족으로 품질 및 안전관리 등 전반적인 건설사업관리 업무 수행에 어려움을 겪고 있으며,

○ 2015년 5월 준공 예정인『경춘선 폐선부지 공원조성공사(1단계)』및『경의선숲길 공원조성공사』2차공사구간 보완설계 검토 및 공사의 원활한 추진을 위하여 건설기술자 추가투입 및 배치계획 변경으로 원활한 건설사업관리 업무를 수행하고자 함.

□ 조정방안

○ 조경분야 건설기술자 추가투입

- 2015년 5월 준공예정인 『경춘선 폐선부지 공원조성공사(1단계)』와『경의선숲길 공원조성공사』2차 공사구간 보완설계 검토 및 공사 추진을  고려하여 조경분야 건설기술자 한시적 추가투입 (15.02.23~15.05.24)

○ 토목분야 건설기술자 배치계획 변경

- 토목분야 건설기술자에 대하여 『경춘선 폐선부지 공원조성공사』준공 일정과『경의선숲길 공원조성공사』현장여건[(성산천 가도교 보수·보강 지연) 및 포장 공사 추진계획]에 맞추어 2015년 배치 계획 변경

· 당 초 : 2015.03.01. ~ 2015.08.31.(6개월)

· 변 경 : 2015.02.23. ~ 2015.05.31.

2015.10.01. ~ 2015.12.24.

○ 계약금액(도급액)변경

구분	당 초	변 경	증·감	비고
전 체	1,310,200천원	1,355,600천원	증) 45,400천원
금 회(2차)	997,600천원	1,043,000천원	증) 45,400천원

Ⅲ

건설사업관리단 검토의견

○ 상기와 같이 『경의선숲길, 경춘선 폐선부지 공원조성공사 통합 전면책임감리용역』과 관련하여 건설기술자 추가투입 및 배치계획 변경에 대하여 검토한 결과 이격된 현장에 대하여 원활한 건설사업관리업무 수행을 위해 한시적 건설기술자 추가투입(조경분야 4개월)은 적정한 것으로 사료되며,

○ 현장 공사추진 계획 및 일정을 고려하여 건설기술자 배치계획 변경(토목분야)은 타당한 것으로 판단됨.

Ⅳ

보고자 의견

○『경춘선 폐선부지 공원조성공사』와『경의선숲길 공원조성공사』는 통합 감리용역으로 두 공사장의 이격거리가 20km 이상이며, 경의선숲길 공원 및 경춘선 폐선부지 공원은 연장이 긴 선형공원으로,

○ 두 공사장의 준공이 2015.4~5월로 공사 마무리 공정인 조경분야 초화류 및 수목 식재 일정이 3~4월로 집중되어 식재 반입이 동시에 일어날 경우 조경분야 건설기술자 1인으로는 두 공사 현장의 식재 검수 및 품질 관리에 차질이 예상되며,

○ 경의선숲길 공원조성공사 2차구간 현장확인 및 보완설계 검토도 병행해야 함에 따라 두 공사장 품질확보 및 안전관리를 위하여 조경분야 건설기술자 한시적 추가투입이 필요한 실정이며,

○『경의선숲길 공원조성공사』현장여건을 고려한 2015년 토목분야 건설기술자 배치계획 변경은 타당하다고 판단됨.

○ 상기와 같은 사유로 조경분야 건설기술자 한시적 투가투입 및 토목분야 건설기술자 배치조정에 대한 건설사업관리단 실정보고 사항을   승인하여 원활한 사업 추진이 될 수 있도록, 향후 설계변경 시

반영하도록 통보하고자 함.

붙  임 : 건설사업관리단 실정보고서 1부.  끝.