방화대교 남단 접속도로 공사 사고관련 조치계획

1		사고경위

□ 발생개요

○ 일    시 : 2013. 7. 30(화) 13:04

○ 장    소 : 방화대교 남단 공사현장(강서구 방화동)

○ 사고원인

- 교량확장부분 콘크리트 타설면 미장 작업중 STEEL BOX 전도(L=45m)

- 편심에 의한 교량바닥구조물 전도 낙하로 추정(원인 조사 중)

○ 당시상황

- 사고는 슬래브 방호벽 콘크리트 타설 작업 중 발생

- 인부 4명 작업중, 1명은 장비(크레인)에 탑승중 장비 전복으로 사망,

2명은 방호벽 미장작업 중 1명은 사망하고 1명은 부상

- 현장관계자들은 점심시간인 관계로 식사 후 현장으로 이동중

○ 피 해 자 : 중국 국적 근로자 3인

연번	구 분	성 명	생년월일	국적	거주지	가족	유족수	비고
1	사망자	최창희	63.6.22	중국	미상	처, 아들1, 딸1, 친척 4	7	이대목동병원
2	사망자	허동길	62.11.13	중국	미상	처, 딸1,형2 누나1	5	이대목동병원
3	부상자	김경태	54.11.19	중국	미상	처, 아들1, 동생1	3	고양시 명지병원

□ 사고원인 등 조사

○ 도시기반시설본부에서 자체적으로 유사사례 재발방지를 위해  설계부터 시공까지 원인을 면밀하게 파악 할 예정

○ 시청 감사실에서 사고원인 등에 대해 조사할 예정임

2		조치사항

□ 사망자 및 부상자 지원

○ 사망자 및 부상자 가족 요청사항 파악 지원 : 전담직원 7명 배치

- 영안실 및 유가족 대기실, 생활 편의용품 등 유가족과 협의하여 지원 예정

※ 분향소(이대목동병원 장례식장)설치 : 최창희(6호), 허동길(13호)

○ 중국거주 유가족 입국 지원 - 현재 유가족 파악 중

- 국제협력과 통해 외교통상부에 비자발급신청 요청 완료

- 공항입국 pick up에서 병원까지 동행 등 지원

○ 유가족 심리상담지원팀 운영 : 전문상담원 6명 배치 상시근무

□ 현장복구

○ 현장 감식 등으로 출입통제 중에 있어 경찰과 협의하여 복구 추진

3		향후계획

□ 대형공사장 ‘전문가-공무원’ 합동 특별안전점검

○ 점검기간 : '13. 7. 31 ~ 8. 7 (8일간)

○ 점검대상

- 월드컵대교 등 서울시 시행 대형 공사장 49개소 대상 특별합동점검

- 그 외 시, 자치구, 공사․공단 발주 공사장 자체 안전점검 실시

- 인․허가를 득한 민간공사는 시행자(건축주)가 자체 안전점검토록 계도

□ 장례에 대해서는 유족 등과 협의하여 결정

○ 장례절차, 장례물품, 영안실(합동분향소) 설치, 운구인력 지원 등

□ 시공사와 유족간 원만한 보상협상 적극 중재

○ 유족의 요구를 수용하여 서울시가 배석하여 원만히 협상토록 노력

※ 필요시 시 차원의 장례․보상 지원단 구성 운영

[별첨]

방화대교 남단 접속도로 공사 현황

올림픽대로와 방화동을 연결하는 도로 건설로 간선도로체계 확충을 통한 강서지역의 교통 소통 증진과 도시의 균형적 발전 도모

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 방화대교 남단 접속도로 건설공사

○ 공사기간 : 2005. 10 ～ 2014.06

○ 공사규모 : 도로개설 L=3,021m, B=5.75m~18.0m

(교량 756m, 터널 949m, 토공도로 1,316m)

○ 총사업비 : 109,807백만원 (도급비 : 66,092백만원)

○ 시 공 사 : 원도급사 : 금광기업(주), 흥륭종합건설

하도급사 : 한백건설

○ 감 리 사 : ㈜삼보기술단

□ 추진사항(공정률 83%)

○ '05.10.05        : 공사착공

○ '06.03.23        : 도시계획시설 변경결정(서고시 제2006-101호)

○ '08.10.24  : 광명~서울 고속도로 방화터널 통과(행정2부시장방침)

○ '08.09~'09.11  : 터널 확장 실시설계 완료 (Fast-Track 방식 시행)

○ '12.07.04       : 마곡지구 광역교통개선대책 변경 승인(국토해양부)

○ '13.07 현재       : 임시개통을 위한 공사 추진중(포장, 부대시설설치)

□ 현안사항

○ '13. 8월 : 방화동 ↔ 올림픽대로간 양방향 1개차로씩 임시개통 예정

□ 향후 추진계획

○ '14.06.   : 공용 개시

< 공기지연사유 >

서울~광명간 민자고속도로 건설과 관련한 협의('08.10월) 및 국토해양부의 마곡

지구 광역교통개선대책 변경('12.7월)에 따른 사업계획 반영으로 인해 공사 지연

위  치  도

도로개설:

3.02km

조 감 도