문서번호	시설과-1838
결재일자	2014.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
한상길	공헌구	정상택	04/03 안영노
협 조
	동물원장		노정래
	동물기획과장		김태원
	동물복지과장		이달주
	주무관		유종태
	주무관		유미진
	주무관		이상국

「어린이동물원 , 동물한마당 , 낙타사」

시설물 점검 지적사항 정비계획 수립 보고

2014. 3.

서울대공원

시설과

「 어린이동물원, 동물한마당, 낙타사 」

시설물 점검 지적사항 정비계획 수립 보고

어린이동물원, 동물한마당, 낙타사의 시설물에 대하여 자체 점검 및 특별감사시 지적된 사항에 대하여 정비 계획을 수립 시행코자 함.

추진배경

호랑이 탈출 사육사 사망 사고 발생 (‘13.11.24) ⇒ 서울동물원 안전관리 대두

긴급 각 동물사 안전점검 (‘13.11.26~29) 지적사항 처리

조사담당관 서울대공원 운영실태 특별감사( ‘13.12.16~’14.1.8) 지적사항 처리

현황 및 지적사항

어린이 동물원 및 동물한마당은 평소 어린이들이 즐겨찾는 공간임.

기존 울타리 등 시설물의 노후화로 안전사고 위험 상존(자체점검 및 특별감사 지적사항)

지적사항 내역

- 총지적사항 : 32건 (동물한마당 5건, 어린이 동물원 20건, 낙타사 7건)

· 정비완료 15건

· 정비중 – 17건 (토목9건: 발주 / 건축7건 : 연간단가5건, 발주2건 / 전기1건)

토목분야 정비계획

동물사명	지적사항	개요	정비계획	비고
동믈한마당	말우리,흑염소,양울타리교체	H=1.1~1.8m, L=148m	기존 P.E휀스 → 목책 변경	공사발주 시행
	흑염소,양우리,먹이주기체험장 이중문 필요	B=2.3m, H=1.1m	동물기획과 필요성 재 검토중
	양몰이 공연장 관람로 휀스높이조정 및 간격조절(특별감사지적사항 중복)	H=1.1m, L=157m	간격 넒은곳 추가 목책 설치
	흑염소,양우리,견사 펜스높이조정	H=1~1.8m, L=173m	기존 P.E휀스 → 목책 변경
어린이동물원	포니, 나귀 배수로 시설미비	L=170m	방사장 구배조정 및 배수로설치
	노후 휀스 교체	H=1.2m, L=198m	H=1.2로 전면 재정비
	포니 나귀 휀스 높이 보완 (특별감사지적사항 중복)	H=1.2m, L=98m	H=1.2로 전면 재정비
	포니 쉘터 문 설치 필요	3x2m, 3mx3m, 3.6mx2.3m 3개	동물기획과 필요성 재 검토중
낙타사	낙타방사장 관람객 안전장치 필요	L=200m	안전휀스 높이 상향 조정

상기 지적사항은 관람객(어린이)과 사육사들의 안전 및 동물복지 차원에서 조속 정비시행

동물한마당, 어린이동물원, 낙타사의 지적사항 중 토목분야(9건)에 대하여는 별도 발주 시행

- 소요예산 : 200백만원

- 정비개요 : 어린이동물원 등 목재안전난간 설치 524m, 낙타사 안전난간 보수 200m

- 예산과목 : 공원이용시민 만족도 향상, 공원관리 시민참여 확대와 이용활성화, 동물의 건강증진 및 종보전, 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전, 공원안전 시설 보수 및 정비, 시설비 (동물사 및 방사장 안전시설 설치)

향 후 계 획

‘14. 4. 1     :   정비계획수립

‘14. 4. 4     :   설계 및 공사발주

‘14. 5. ~ 6.  :   정비공사 시행

첨부 : 현황사진 1부.  끝.