문서번호	조경과-2139
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	조경과장	관리부장		서울대공원장
이옥하	이성주	정상택		04/18 안영노
협 조
	총무과장		이경로

「담비 스라소니 전시장 조성공사」 관련

준공기한 연기 검토 보고

2014. 4.

서울대공원

( 조 경 과 )

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

「담비 스라소니 전시장 조성공사」 관련

준공기한 연기 검토 보고

명에 의거 『 담비·스라소니 전시장 조성공사 』 감독업무 수행 중 준공기한 연기 사유가 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

Ⅰ		공사개요

○ 공사기간 : 2013.4.16. ~ 2014.4.20.

○ 공사내용 : 담비, 스라소니 야외전시장, 관람시설 등 조성

○ 계약금액 : 금367,790,500원

○ 도급업체 : ㈜매일 대표 조현철

Ⅱ		현안사항

○ 대공원 간부 합동순찰(4.14) 지시사항 보완에 따른 설계변경과 그에 따른 공기 확보

☞ 담비, 스라소니 전시장 숲 조성을 위한 식재 보완 : 동물기획과-(메모보고, 2014.4.15.)

○ 인접 동물사 및 주관람동선 포장 미실시에 따른 스라소니 관람대 포장 마감 높이 결정 지연에 따른 공기 부족

Ⅲ		조치의견

○ 위 현안사항과 같이 준공기간 연장이 불가피하므로 아래와 같이 공사 기간을 연장하여 본 사업의 효과를 극대화하고 관련 업무에 만전을 기하고자 함.

구 분	변 경 사 항		비 고
	당 초	변 경 후
공사기간	2013.4.16. ~ 2014.4.20.	2013.4.16. ~ 2014.4.30.

○ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.