문서번호	녹색에너지과-4402
결재일자	2015.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		에너지정책팀장	녹색에너지과장
이재복		박숙희	03/04 권민
협조

스마트그리드 시범사업 관련 에너지 자립마을 실태조사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

기 후 환 경 본 부

녹색에너지과

스마트그리드 시범사업 관련 에너지 자립마을 실태조사 계획

서울 에너지 자립마을의 전력 에너지 생산 및 소비에 대한 실태조사를 수행하여 에너지 자립마을에 적합한 스마트그리드 시범 구축 방안을 제시 하고자 함.

□  관련문서

○ 녹색에너지과-23416(2014.11.27.) 서울 도심형 스마트그리드 시범사업 시행계획

□  에너지 자립마을 조성 현황

○ 단독주택 : 강동구 천호동 십자성마을 등 8개소

○ 공동주택 : 동작구 대방동 현대 푸르미 마을 등 7개소

□  실태조사 범위

○ 에너지 자립마을 실태조사 및 스마트그리드 청사진 정립

○ 에너지 자립마을 스마트그리드 시범사업 설계

○ 시범사업 이후 확산을 위한 중장기 추진 전략 수립

□  추진계획

○ 소요예산 : 11,000천원

○ 과업기간 : 계약일로부터 30일 이내

○  예산과목 : 기후환경본부 녹색에너지과, 에너지절약과 생산으로 원전하나줄이기, 신재생에너지 보급, 서울도시형 스마트그리드 시범사업, 사무관리비

○ 계약방법 : 수의계약

- 근거법령 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

○ 계약대상업체 및 선정 사유 : (주)루트에너지

- 서울시 에너지 자립마을 컨설팅을 수행한 경험이 있는 녹색 사회적 기업

□ 활용방안

○ 전문가의 생산․절감 실적 등 평가를 거쳐 적정 자립 방향 모델 제시

○ 에너지 자립마을을 지역단위 스마트그리드 거점 지역으로 육성

○ 서울의 특성에 맞는 서울형 미래 산업으로 신 비즈니스 모델 창출

□  향후 추진일정

○ ’15. 3. : 스마트그리드 시범사업 관련 에너지 자립마을 실태조사

- 대상지역(에너지 자립마을) 2개소 선정

○ ’15. 4. : 자치구 스마트그리드 사업비(보조금) 지원계획 통보

○ ’15. 4. : 에너지 다소비 공공건물 대상 스마트그리드 구축 실시설계 용역

○ ’15. 5. : 서울 도심형 스마트그리드 구축 방안 자문회의 실시

○ ’15. 6.~10 : 서울 도심형 스마트그리드 시범사업 발주

- 에너지 자립마을 2개소 : 380,000천원

- 에너지 다소비 공공건물 1개소 : 320,000천원

○ ’15. 6.~10 : 에너지 다소비 공공건물 대상 스마트그리드 구축 감리 용역

○ ’15.10. : 서울 도심형 스마트그리드 시험 운영

○ ’15.11. : 서울 도심형 스마트그리드 시범 구축 완료

○ ’15.12. : 서울 도심형 스마트그리드 확산 방안 자문회의 실시

	<서울 도심형 스마트그리드 시범사업>
▣ 사업목적 : 공급자, 소비자 양방향 실시간 전력 정보 교환, 지역 에너지 생산·효율 최적화 시스템 구축으로 전력위기 대비 및 에너지 자립 모델 제시 ▣ 사업대상 : 에너지 자립마을 2개소 및 에너지 다소비 공공 건물 1개소 ▣ 사 업 비 : 800,000천원 ▣ 사업내용 : 스마트그리드 구성 요소 중, 서울 도심형 스마트그리드 시범 구축에 필요한 시스템 선별 설치 - TOC(Total Operation Center, 통합운영센터) - AMI(Advanced Metering Infrastructure, 지능형 검침인프라) - ESS(Energy Storage System, 에너지 저장장치) - EV(Electric Vehicle, 전기차)충전시스템 - EMS(Energy Management System, 에너지관리 시스템) - 태양광, 연료전지 등 신재생에너지

첨부 : 과업지시서 1부(별첨). 끝.