문서번호	공동주택과-3556
결재일자	2015.3.6.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		공동주택관리팀장	공동주택과장
김광식		안남선	03/06 박경서
협조

공동주택 통합정보마당 고도화 및 유지보수 월간보고(2월)

2015. 3. 6.

공동주택과

(공동주택관리팀)

공동주택 통합정보마당 고도화 및 유지보수 월간보고(2월)

사업개요

○ 사업기간 : 2014. 3.28 ~ 2015. 2.28

- ‘14. 3. ~    10. : 고도화사업 추진

- ‘14. 3. ~ ’15. 2. : 통합정보마당 시스템 유지보수

○ 과업내용

-  위치기반의 GIS 지도서비스 구축 등 홈페이지 리뉴얼

- 정보시스템 연계, 모바일서비스, 공동주택 현황관리 등

- 유지보수(통합정보마당 시스템 운영 및 관리)

○ 용역수행업체 : 하이퍼테크

월간 추진일정

월	단계	계획 및 실적	진척률	비고
4월	착수 분석	- 기존 DB 분석 및 재설계 k아파트 연계항목 정의 단지정보 기본항목 정의 관리소장 이력관리 항목 설정	100%
5월	분석 개발	지도서비스 연계 및 표출정보 메뉴재구성 및 항목설정 문서유통, 장기수선계획 분석	100%
6.∼11.	개발 테스트	메인화면 디자인 시안 콘텐츠 개발 관리비 통계 및 표출방안 개발 모바일 서비스 개발 시험운영 및 기능별 테스트	100%
‘14. 12. ∼ ‘15. 1.	오류수정 유지보수	프로그램 오류수정 콘텐츠 추가 및 유지관리	100%
‘15. 1. ~ 2.28	유지보수	사업완료 및 유지관리	100%

주요 추진내용

○ 기  간 : 2015. 2. 1 ~ 2. 28

○ 고도화사업 분야

- 통합정보마당 고도화 사업 완료 및 홈페이지 개설

- 콘텐츠 추가 및 개인정보필터링 기능추가 등

○ 유지보수 분야

- 데이터 업로드, 사용자 문의 등 95건 처리(붙임 보고서 참조)

구 분	메뉴	처리 내용	비고
관리비 등 업로드	정보마당 > 관리비	이지웹 등 6개 회계업체 자료 업로드 및 모니터링 오류사항 처리
프로그램 오류수정	모바일 웹 관리자 페이지	PC버전 링크에러 수정 office 커뮤니티 관리기능 수정
사용문의, 운영지원	메인홈페이지, 단지별 홈페이지	시스템 문의 및 오류수정, 회원가입, 공사용역 등록방법, 문서유통 사용방법
콘텐츠 추가	메인홈페이지	아파트관리 주민학교 수강신청 접수 및 관리창구 추가
시스템 점검 및 기능 추가	홈페이지	웹취약점 및 접근성 점검 개인정보필터링 추가

붙임 : 월간업무 보고서(하이퍼테크) 1부.  끝.