노을공원 연료전지사업 설명회 개최

□ 일    시 : 2015. 3. 11(수) 15:00~16:00

□ 장    소 : 서부공원녹지사업소 소회의실

□ 참    석 : 약 20명

- 서부공원녹지사업소 : 소장님, 운영과장, 공원여가과장, 시설과장, 환경보전과장 및 관련팀장 및 직원

- 기후환경본부 : 녹색에너지과 신재생에너지팀장, 담당주무관

- 사업추진기관 : 노을그린에너지, 한국수력원자력, 포스코에너지, 한국지역난방공사, 서울도시가스 사업추진 담당부장 및 직원

□ 진    행

- 사업설명 : 노을그린에너지㈜

· 필요시 사업 추진 참여 EPC사(설계·조달·시공) 및 관계사 보완 설명

- 질의응답 : 사업 주관사 설명과 병행 또는 보고후 별도 질의응답

□ 보고내용

- 노을연료전지 사업부지 현황 및 부지 경계 확정

- 시립미술관 난지창작스튜디오 진출입 도로 개설 계획

- 노을주차장 차량 진·출입 노선 변경 및 관리시설 배치안

- 태양광 발전설비, 컨테이너 등 지장물 이설 계획

- 기타 굴착 및 공사중 공원 이용객 불편사항 관리대책

□ 붙임자료 : 사업추진 현황 1부. 끝.

노을그린에너지 사업추진 현황

<2015년 3월 현재>

추진현황

❍ ´12.09.28 : 신재생에너지 사업개발 투자 양해각서 체결(한수원/서울시)

❍ ´13.03.21 : 연료전지 발전시설 설치방침 (시장방침 제70호)

❍ ´14.05.20 : 노을그린에너지㈜ 주주협약 체결 (총사업비 1,070억원)

❍ ´14.07.25 : 노을그린에너지㈜ 법인 설립

❍ ´14.12.23 : 발전사업 허가

❍ ´15.02.25 : 연료전지 사업설명회 개최 (마포구청, 시립미술관)

시설배치(안)

※ 연료전지 사업부지 배치(안) 및 난지창작스튜디오 진·출입 도로 신설(안)

향후계획(안)

❍ ´15.03~05월 : 송전철탑 이전 설치(점용허가) 및 관련인허가 추진

❍ ´15.06월 : 착공 (사업관련 도시계획 등 인허가 완료 후 추진)

※ 연료전지 발전시설 준공 : 시설 착공일로부터 13개월 이내 준공

작성자	녹색에너지과장 : 권 민 ☎ 2133-3550 신재생에너지팀장 : 임병욱 ☎ 3571 담당 : 이경택 ☎ 3573