문서번호	공원녹지정책과-3865
결재일자	2015.3.11.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장	푸른도시국장
고희경	김현경	최윤종	03/11 오해영

2015년도 무장애 친화공원 조성사업 추진계획

2015. 3.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년도 무장애 친화공원 조성사업 추진계획

누구든지 안전하고 편리하게 공원을 이용할 수 있도록 공원의 장애  요소를 최소화하는 무장애 친화공원 조성사업과 관련 2015년도 월드컵공원 평화의공원 일대에 아래와 같이 사업을 추진하고자 함.

Ⅰ		추진 방향

□ 장애인, 노약자, 임산부 등 교통약자를 비롯해 어린이, 외국인 등           보다 광범위한, 더 많은 공원이용자의 편의를 고려한 공원정비

□ 공원접근 및 이용상 장애요소를 최소화하여 공원을 안전하고 편리하게       이용할 수 있도록 추진(장애를 일으키는 시설들을 제거하거나 위치 조정 등         공간을 비우고 정리)

□ 꼭 필요한 시설들은 공원환경을 고려, 주변과 조화되게 자연친화적으로       도입 설치(인위적이고 과도한 변경은 지양)

Ⅱ		추진경위 및 근거

□ 추진경위

○ 2012. 1~ 2013. 2. : 여의도공원 무장애공원 시범조성

(’13. 7월 무장애 예비인증 및 ’14. 7월 본인증 취득)

○ 2013. 1~ 2014. 6. : 보라매공원 무장애 친화공원 조성

○ 2014. 1~ 2015. 3. : 무장애 친화공원 조성 사전조사 및 기본계획                             용역추진(시직영공원 17개소 대상)

□ 추진근거

○ 교통약자의 이동편의 증진법

○ 장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙

○ 장애인 차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 등

Ⅲ		2015 사업계획

□ 대 상 지 : 월드컵공원 평화의공원 일대(마포구 상암동 1563)

- 기본계획 용역에 따른 직영공원 17개소에 대한 접근성, 이용성, 노후도, 사업효과성        등 전반적 검토결과, 기반이 잘 갖추어져 있고 공원이용률이 높으며 공원주변          장애인관련 시설도 비교적 많은 월드컵공원 평화의공원 일대를 우선사업지로 선정

□ 규    모 : 368,510㎡

□ 사업내용

○ 장애시설 철거 및 이설(자전거도로, 플랜터, 쓰레기통, 수목 등)

○ 무장애보행로 조성(포장, 경사로, 배수로 정비)

○ 휴게 및 놀이공간 조성정비(의자, 놀이시설, 라인마킹, 점자블럭 등)

○ 안내체계 강화(안내사인 및 음향안내시설 설치정비)

○ 건축물 진입부 동선개선, 주차장 정비 등

※ 추후 서울형 무장애 친화공원 조성 가이드라인(지침)을 반영, 기본 및 실시설계를          추진하고, 설계를 진행하면서 무장애 인증가능 예상 시 인증절차 추진

□ 사업기간 : 2015. 3~12월

일 시	추 진 절 차	추 진 부 서
’15. 3월	사업계획 수립시달	공원녹지정책과⇒서부공원녹지사업소
’15. 3월	기술용역 타당성 심사요청	서부공원녹지사업소⇒기술심사담당관
’15. 3월	설계용역비 요청 및 예산재배정	서부공원녹지사업소⇒공원녹지정책과 ⇒서부공원녹지사업소
’15. 4월	설계용역 발주 및 착수	서부공원녹지사업소
’15. 6월	설계심의 요청	서부공원녹지사업소⇒기술심사담당관
’15. 7월	계약심사 요청, 용역준공	서부공원녹지사업소⇒계약심사과
’15. 8월	공사비 재배정요청 및 예산재배정	서부공원녹지사업소⇒공원녹지정책과 ⇒서부공원녹지사업소
’15. 8월	공사발주	서부공원녹지사업소
’15. 9월	공사착공	서부공원녹지사업소
’15. 12월	공사준공	서부공원녹지사업소

□ 추진방법 : 사업소에 예산재배정 시행

- 사업성과 제고를 위하여 설계용역 및 공사시행 시 장애인, 유니버설         디자인, 공원분야 등 관련전문가 자문추진

□ 사 업 비 : 1,100백만원

- 예산과목 : 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책 개발 및 만족도          개선, 공원이용서비스 만족도 향상, 시민참여 프로그램 운영, 무장애            친화공원 조성 (100-401-01)시설비 1,096백만원/ (100-401-03)시설부대비 4백만원

덧붙임 : 1. 무장애 친화공원 조성 기본계획(안) 1부.

2. 무장애 친화공원 조성관련 설문조사결과 1부. 끝.