문서번호	설비부-3014
결재일자	2015.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
김원태		임현근	03/12 박기형
협조

『동부간선도로확장(3공구) 전기공사』

노원교연결램프 및 수락고가확장 지장물이설 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 03.

서울시도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『동부간선도로확장(3공구) 전기공사』

노원교연결램프 및 수락고가확장 지장물이설 실정보고

「동부간선도로확장 전기공사(3공구)」시행중 감리단에서 노원교연결램프 철거 및 수락고가차도 확장구간 지장물이설(가로등, ITS시설 등) 실정보고가 있어 검토하고 보고드림

Ⅰ. 관련근거

□ 동삼감 제2015-4(2015.01.12) : 노원교연결램프 철거설치관련 지장물이설 협의내용 보고

□ 동삼감 제2015-17(2015.02.13) : 수락고가 확장공사 저촉시설(가로등, ITS시설 등) 이설 실정보고 승인요청

Ⅱ. 공사개요

□ 공 사 명 : 동부간선도로확장(3공구) 전기공사

□ 공사규모 : 지하차도(상도,장암) 전기설비 1식, 가로등주 125본

□ 공사기간 : 2008. 06. 26 ～ 2015. 12. 31

□ 도 급 액 : 2,802백만원(도급비 1,734, 관급비 1,052, 이전비16)

□ 시 공 사 : ㈜정등전력 대표 김병갑

□ 감 리 사 : 동부ENG(주)

Ⅲ. 추진경위

□ 2015.01.12 : 노원교연결램프 철거관련 관리기관 업무협조요청

※ 감리단 → 노원구청, 도봉구청, 시설관리공단

□ 2015.02.13 : 수락고가확장에 따른 노원교연결램프 지장물이설 실정보고

Ⅳ. 확장구간 지장물현황 검토

□ 지장물 현황

∙ 확장구간 : 수락고가 300m 및 노원교연결램프 143m구간 : “조감도참고”

∙ 지장물대상

1) 기존 노원교연결램프 가로등 12본 : 철거(설계 기반영)

2) ITS(교통정보시스템) 배관배선 1,130m : 철거 및 재설치

3) 수위관측분전함 1면(배관신설 95m) : 이설

□ 이설작업 내역

품 명	규 격	단위	수 량	비 고
전선관 철거 및 재사용	ST 28C	m	770	재설치710m
	ST 54C	m	360	재설치330m
케이블 철거 및 재사용	F-CV 1C*10㎟	m	876	재설치816m
광케이블 철거 및 재사용	SM 16C	m	388	재설치
	SM 4C	m	90	〃
	SM 2C	m	15	〃
광접속함 철거 및 재설치	48Core	개	1	〃
	24Core	개	1	〃
수위계분전함 철거 및 재설치	900×500×1200	면	1	〃

※ 단가적용 : 증감물량 → 계약단가적용, 신규물량 → 신규조사단가×낙찰률(86.746%)적용

□ 변경내역

구 분	당 초	변 경	비 고
도급비	1,734,560,000원	1,857,976,000원	증 123,416,000원

□ 감리단 검토의견

∙동부간선도로 확장3공구 수락고가확장에 따른 ITS시설 이설 및 노원교연결램프 확장에 따른 지장물이설 등은 자동차 전용도로의 안전 운전을 위하여 지속적인 교통정보를 제공하는 시설로써 토목공정에 맞춰 현재 시행중인 전기공사에 포함하여 시행함이 타당한 것으로 사료됨.

Ⅵ. 보고자 의견

감리단의 검토의견과 같이 지장물(가로등, ITS시설, 수위분전함)의 이설을 토목공정에 맞춰 추진하되 5천만원 이상 증액이 되므로 향후 설계변경자문 후 반영코자 합니다.

따로붙임  1. 감리단 검토의견서.  1부.

2. 변경설계도서.   1부.    끝.