서부간선지하도로 민간투자사업

사업개요

❍ 사업위치 : 영등포구 양평동(성산대교 남단) ~ 금천구 독산동(금천IC)

❍ 사업규모 : 왕복 4차로, 연장 10.33km(소형차 전용)

❍ 사업기간 : 2010. ~ 2020.

❍ 총사업비 : 5,200억원(민간 3,820억원, 시 재정지원 1,380억원)

❍ 우선협상대상자 : 서서울고속도로(주)(현대건설 등 8개사)

추진경위

❍ '07.12.20	: 민간제안서 제출

❍ '08.12.08	: 사업제안서 타당성조사 완료(KDI PIMAC)

❍ '09.06.29	: 민간투자사업심의위원회 심의(기재부)

❍ '09.12.31	: 제3자 제안공고

❍ '10.06.14	: 우선협상대상자 선정  /  9.2	: 실시협약 협상 착수

❍ '12.05.22	: 재정지원금 축소 등 개선방안 검토요청(시→우선협상대상자)

❍ '13.04.25	: 서남부지역발전구상 보고

❍ '13.06.03	: 서부간선도로 지하화 추진계획 수립

❍ '13.09.13	: 변경 제안서 제출(우선협상대상자→시)

❍ '14.02.27	: 도시계획시설(도로) 결정

❍ '14.05.13	: 민자적격성 재검증 완료(PIMAC)

❍ '14.08.13	: 실무협상 완료

❍ '14.10.30	: 市 재정계획심의위원회 심의

❍ '14.12.18	: 기획재정부 민간투자심의

❍ '15.03.11	: 실시협약 체결

❍ '15.03.현재	: 실시설계 및 환경영향평가 추진중

향후 계획

❍ '15.08.이후 : 공사착공(공사기간 60개월)

위치도