문서번호	마곡조성담당관-8660
결재일자	2013.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	개발계획팀장	마곡조성담당관		마곡사업추진단장
김찬모	임대운	하종현		11/11 서노원
협 조	토목계획팀장		서귀동
	건축계획팀장		김명수

마곡개발 현안업무 검토회의(28차)결과보고

2013. 11.

마곡사업추진단

(마곡조성담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	SH공사	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

마곡개발 현안업무 검토회의(28차) 결과보고

Ⅰ		회의개요

□ 일  시 : 2013.  11.  6(수) 15:00 ~ 16:00

□ 장  소 : 서소문별관 1동 12층 마곡사업추진단 회의실

□ 참석자 : 서울시	- 마곡조성담당관(과장, 팀장, 담당)
SH공사 - 마곡사업처(팀장, 담당)

Ⅱ		주요 회의결과

□ 개발계획 및 실시계획 변경인가 추진

○ 구역변경, 개발 및 실시계획 변경인가 추진 철저

- 개발계획 변경(안) 및 지구단위계획 변경사항 조속 확정

- 강서구 경유 및 제 영향평가 추진 철저

□ 중앙공원 기본(실시) 설계 및 기반시설 조성 관련

○ 설계 추진을 위하여 과업내용 확정 및 용역설계변경 조속 추진필요

○ 3차 MP주관회의 추진을 위한 논의안건 정리 및 자료준비

- 2차 회의결과를 바탕으로 식물원 조성방향 등 자료 준비 철저

- 설계 추진을 위해 용역설계변경 조속 추진 필요

○ 수처리시스템 도입관련 현안 검토

- 비상시 한강수 도입방안 및 수질관리시스템 적정성 여부, 목표수질등급 제시 등

- 1차 자문회의시 지적사항을 보완하여 2차 자문회의 준비 철저

○ 지하철용출수 활용을 위한 설계 및 활용협약 조속 추진

- 이중굴착으로 시민불편 및 예산낭비 등이 발생하지 않도록 지하철용출수
유입방안과 관로매설 계획 등을 마련하여 조속히 설계 및 시공 추진

- 지하철 용출수 활용협약(도시철도공사, 공항철도) 필요

○ 3지구 수방시설 등 기반시설 공사발주계획 수립필요

- 하수 및 우수암거, 연결통로 등 발주방법 및 세부 추진계획 보고 필요

○ 1,2지구 공원 및 녹지조성 기본계획 자문회의 준비 철저

- 자문 및 보고회 결과를 바탕으로 기본계획 최종안 작성 및 자문회의 준비

○ 3지구 공원설계시 유시티 설계·시공업체와 긴밀히 협의하여 CCTV 등 유시티 시설물 계획 반영

□ 공항로 구조개선 공사 관련

○ 5호선 마곡역 공항로 횡단통로 공사는 공사 시공순서 등 사전 공정관리 철저로 중복투자 및 이중공사가 발생되지 않도록 관리 필요

□ 물순환체계 관련 자문회의 관련

○ 2차 전문가 자문회의 관련자료 준비 철저

- 1차 자문회의시 제기된 의견에 대한 검토·보완 필요
(건축물·가로경관가이드라인, 지구단위계획에 내용 포함 및 확대방안 강구 등)

- 관련 전문가의 충분한 검토를 위해서 회의자료는 최소 3일전 사전배포 요망

□ 성평등 도시 조성 관련

○ 성평등요소 분야별 추진사항을 세부적으로 검토 및 작성 제출

- 제 29차 현안회의시 추진실적을 검토할 수 있도록 각 팀별 추진현황 보고

- 단지조성공사, 공동주택공사, 공원(녹지)조성공사 등 각 사업별 성평등요소는 지속적으로 추진

□ 공사장 안전관리 철저

○ 안전관리요원 배치, 안전교육 실시 등 공사장 안전관리 철저

- 안전시설 설치, 교육 등 안전관리대책을 수립하고 시행 현황에 대한 보고 요망

□ 마곡조성자문단 건축계획 자문 관련

○ 건축계획 자문회의가 매월 2,4주 금요일 개최됨에 따른 안내 철저

- 토지분양자의 건축계획에 대한 자문절차 및 개최일, 제공되는 관련자료 등은 구체적이고 자세한 안내 필요

- 원스톱센터를 통하여 전반적인 사항이 충분히 안내될 수 있도록 조치 필요

○ 건축물 · 가로경관 가이드라인 수립 조속 완료 추진

- MA팀 자문의견은 조속히 보완하여 자문단 자문 등 절차이행 준비 철저

□ 기타 현안사항

○ 신방화역 환승주차장 설치 및 국도6호선 교통개선사업 등은 관련기관과 적극적인 협의 및 사업추진이 필요

- 사업추진 현황을 파악하기 위하여 상시 보고요망

○ 유시티 시설물은 가로등 및 신호등과 같은 기반시설에 통합설치될 수 있도록 관련부서와 긴밀한 협의필요

○ CPDP관련 마곡지구 내 공공과 민간필지에 발생되는 CO2발생량에 대한 각 요소 파악 및 저감방안 검토보고(공원, 가로시설 등 기반시설과 공동주택)

- 현재까지 건축물에 대한 로드맵이 전무하므로 이에 대한 자료 제출

○ 개발(실시)계획 변경사항 등의 자료는 홈페이지 업데이트 철저

Ⅲ		향후 계획

□ 2013. 11. 27(수) : 제 29차 현안업무 검토회의 개최.  끝.