문서번호	건설총괄부-24241
결재일자	2013.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	건설정보관리과장	건설총괄부장	시설국장		도시기반시설본부장
조선휘	이예림	이비오	이광세		12/17 조성일
협 조

One-PMIS 운영 활성화 계획

2013.12

도시기반시설본부

(건설총괄부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

One-PMIS 운영 활성화 계획

그동안 One-PMIS내 사업 등록을 독려해온 결과, 도기본 등록률은 100%수준으로 제고되었으나 아직도 도기본 외 시(市) 본청, 자치구 사업소 등록률이 매우 저조한 바,
운영 실태를 분석하고 이를 토대로 체계적인 운영 활성화 방안을 마련코자 함.

추진현황

❍ One-PMIS 등록사업 수 변화 추이

구분	2001~2011년도 (pmis,cpmis,tpmis)	2012년도 (One-PMIS)	2013년 12월 현재
등록사업수	연120건/연간총 1,216건중(추정)	615건/연간1,107건중(추정)	1,283건/2566건중(추정)
등록률	10%	20%	50%

❍ One-PMIS 진행중인 사업 등록률 (‘13.12.13 현재)

구 분		총 계	도 기 본	시 본청	사업소
5억 이상	대상	274	100	10	164
	등록	126 (46%)	100 (100%)	5 (50%)	21 (13%)

실태 및 문제점

❍ 공문, 전자우편, 현장 방문 및 교육 만으로는 체계적인 시스템 활성화에 한계가 있음

❍ G2B를 통하여 계약된 사업을 계약관계자가 수동등록 하는 체제에서는 등록대상 사업의 정확성 파악에 한계

❍ 민자 및 수의계약사업 등 전체 대상사업 파악 어려움

❍ 부서장 및 기관장의 관심부족(사업소, 자치구 등)

❍ 별도 시스템 사용 기관(상수도사업본부, 서울메트로, SH공사 등)의 이중업무 부담으로 인한 등록률 저하

개선계획

	추진방향
‣ 시(市) 발주사업 전체 등록률 100% ‣ 사용자의 편의성·업무효율 향상을 통한 시스템 활성화

❍ 지속적인 현장방문 및 1:1 멘토링을 통해 등록률 제고

- 사업별 공정관리 최적 방법(공정산정기초, 작업 분류 등) 제시, 절차 안내 등
1:1 멘토링을 통해 One-PMIS의 필요성과 활용방법 미인지로 인한 미등록 예방

- 멘토링 대상(시공․감리․감독관) 메일, 연락처를 계약 시 우선 확보한 후 상담실시

<‘13년 사업등록 및 자료입력 현행화 독려실적>

구분	계	공문	전자우편	문자메시지	현장방문	교육
건수	11,170	10	6,000	4,000	60	1,100
내용	등록독려 자료입력철저 보고철저	수시	월600건 이상	주간 약100건	분기별 20개현장	50명/월, 수시150명/회

❍ One-PMIS 관리대상 사업 자동 등록 추진

- 기존에 사용자가 직접 수동입력 하던 방식에서 G2B 계약데이터를 이용한
자동입력 방식으로 전환함으로써 G2B 계약사업 자동 관리

- 서울시 클린재정 ↔ One-PMIS간 자료 연계는 합의(‘13.12)

❍ 국토교통부 키스콘(kiscon)시스템 연계를 통해 민자·수의계약사업 파악

- 국토교통부 키스콘과 One-PMIS 간 연계를 통해 민자·수의계약사업 파악

- 키스콘 내「공공발주기관 정보제공시스템」의 주요자료를 업무에 활용

※「공공발주기관 정보제공시스템」자료 : 공사대장, 업체 정보(벌점, 신뢰도, 실적 등)

- 키스콘과 One-PMIS 간 연계대상과 절차 협의 진행중(‘13.11 ~ ’14.1)

❍ 자치구 맞춤 건설알림이 서비스를 통한 자치구 관심도 제고

- 자치구별 관내 건설정보만 표출하는 맞춤형 건설알림이 개발을 통해 등록률이 저조한 자치구의 관심도․등록율을 제고하고 시민 서비스 활성화 도모

- 자치구 맞춤 건설알림이 서비스 시범 운영(강동구) 실시 : ‘13.11

- ‘14년에는 전체 자치구로 맞춤형 건설알림이 개발 확대 추진

❍ 타 기관 건설사업관리시스템(PMIS)과의 연계 지속추진

- 타 기관 PMIS와 One-PMIS와의 연계를 통해 사용자의 이중업무 부담
최소화 및 One-PMIS 등록률 제고

※ 대상기관 : 상수도사업본부, 서울메트로, SH공사

- 타 기관 PMIS 현황 조사 및 협의 회의 개최(3회, ‘13.11 ~ 12)

- 현황 조사 및 협의 지속, 시스템 간 연계 개발 추진

향후일정

❍ ‘14.1 ~  : 지속적인 현장방문 및 1:1 멘토링

❍ ‘14.2 ~ ’14.4 : 자치구 맞춤 건설알림이 서비스

❍ ‘14.2 ~ ’14.6 : One-PMIS 관리대상 사업 자동 등록 추진

❍ ‘14.3 ~ ’14.7 : 키스콘과 One-PMIS간 연계 개발

❍ ‘14.1 ~ ’15.3 : 타 기관 건설사업관리시스템(PMIS)과의 연계

행정사항

❍ 공사담당부서 : 멘토링을 위한 현장 방문시 안내 등 협조

❍ 연계기관 : 시스템 연계 관련 협조

❍ 자치구 : 자치구 홈페이지별 맞춤형 건설알림이 개발 협조.  끝