투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	하도급 계약 변경 사항 알림(강남순환도시고속도로 8공구 건설공사)

1. 동기강 제2015-141호(2015.3.27.)와 관련입니다.

2. 우리 부에서 시행 중인『강남순환도시고속도로 8공구 건설공사』관련하여 하도급 계약 사항이 변경되어 아래와 같이 알려드리오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 하도급 계약(변경) 현황

하도급사	공 종	공 사 비				공사기간
		구분	원도급액	하도급액	비율 (%)
신한엔비텍(주)	상수도이설공사	당초	739,200,000	739,200,000	94.31	2015.01.31.~ 2015.02.28.
		변경	697,175,182	697,175,182	94.31	2015.01.31.~ 2015.12.31.

붙임 : 건설공사 하도급 변경계약 통보서 1부.(별도 송부)  끝.

	토목부장
주무관	김구		도시고속도로과장	홍숭희		토목부장	03/31 노우성
협조자	주무관	유근평
시행	토목부-6381	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8667	/전송	02-3708-2599	/	neuf@seoul.go.kr	/	대시민공개