투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	백두산호랑이숲 조성공사 설계변경(제2회) 및 준공기한 연기 시행

1. 조경과-5724(2013.10.25)호와 관련입니다.

2. 노후된 호랑이사를 서식지 생태환경으로 정비하는 『백두산호랑이숲 조성공사』의 설계변경(제2회)을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 백두산호랑이숲 조성공사(장기계속공사)

나. 공사내용 : 호랑이방사장 확장, 내실보수, 기반시설 정비 등

다. 공사기간 : 2012.12.27 ~ 2013.12.31

라. 도 급 액 : 총1,866,308,000원 (1차분 806,540,910원, 2차분 1,059,767,090원)

마. 도 급 사 : 미래종합조경(주) 주정수, ㈜신영그린시스 심재홍

바. 변경내역

1) 총차(2회)

구 분		금 액		증 감
		당 초	변 경
총공사비		1,979,590,510	2,446,640,330	467,049,820
도급액	공급가액	1,696,643,636	2,161,102,727	464,459,091
	부가가치세	169,664,364	216,110,273	46,445,909
	계	1,866,308,000	2,377,213,000	510,905,000
관급자재비		113,282,510	69,427,330	-43,855,180

2) 1차(2회)

구 분		금 액		증 감
		당 초	변 경
총공사비		822,573,400	870,702,950	48,129,550
도급액	공급가액	733,219,009	778,362,118	45,143,109
	부가가치세	73,321,901	77,836,212	4,514,311
	계	806,540,910	856,198,330	49,657,420
관급자재비		16,032,490	14,504,620	-1,527,870

3) 2차(1회)

구 분		금 액		증 감
		당 초	변 경
총공사비		1,157,017,110	1,575,937,380	418,920,270
도급액	공급가액	963,424,626	1,382,740,609	419,315,983
	부가가치세	96,342,464	138,274,061	41,931,597
	계	1,059,767,090	1,521,014,670	461,247,580
관급자재비		97,250,020	54,922,710	-42,327,310

사. 예산과목 : 서울대공원 총무과, 공원이용시민 만족도 향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전, 백두산호랑이 숲 조성, 시설비및부대비, 시설비

※ 1차분 소요예산(49,657,420원)은 2012년 본사업 사고이월예산 활용

아. 준공기한 연기 : 2014. 2. 28.일까지 (연기사유서 별첨)

붙임 : 1. 설계변경 검토보고 1부.

2. 설계변경 사유서 및 준공기한 연기서 각 1부.

3. 변경설계서 1부.

4. 제비율검증 결과서 1부.  끝.

주무관											주무관										조경과장										관리부장
서울대공원장
협조자				총무과장
시행			조경과-7014										(						)		접수												(						)
우	427-702					경기도 과천시 대공원광장로(막계동) 102																/			http://grandpark.seoul.go.kr/
전화		02)500-7511							/전송			02)500-7993					/	jsjo@seoul.go.kr													/	대시민공개