첨부1 <작업장별 감리원 및 현장책임자 배치현황(예시)>

- 평일과 같은 수준, 평일보다 적은 경우 감리원 배치 (918공구)

구 분		1구역	2구역	3구역	4구역	5구역	6구역	비고
연 장		326m	191m	172m	158m	210m	234m
공사내용 (공정률)		상반굴착 L=96m (굴착 27%)	구조물 L=105m 완료 (구조물 55%)	갱문설치완료 상반굴착 L=1m (굴착 1%)	굴착 130m완료 (굴착 90%)	굴착 90m완료 바닥슬래브3span완료 (굴착 75%, 구조물 5%)	굴착 및 복공작업 진행 중 (굴착10%)
평 일	작업장
	감리원	감리원 1명 근무				감리원 1명 근무
평일과 같 은 휴 일 작 업	작업장
	감리원	감리원 1명 근무				감리원 1명 근무
평 일 보 다 적 은 경 우	작업장
	감리원	감리원 1명 근무

범례

작업구간

첨부2 <작업장별 감리원 및 현장책임자 배치현황(예시)>

- 작업장 개소가 많은 경우 (우이-신설 4공구)

구 분		1구역	2구역	3구역	4구역	5구역	6구역	비고
연 장		1,118m	41m	831m	47m	927m	129m
공사내용 (공정률)		인버트 Con'c 타설 (구조물 21%)	토공 및 가시설 (토공 및 가시설 82%)	인버트 Con'c 타설 (구조물 11%)	본체 구조물 Con'c (구조물 18%)	인버트, 라이닝 Con'c 타설 (구조물 65%)	본체 구조물 Con'c (구조물 48%)
평일	작업장
	현 장 책임관	원청사 과장		원청사 대리	원청사 차장	원청사 대리	협력업체 소장
	감리원	감리원 1명 순회근무			감리원 1명 순회근무
휴일	작업장							현장 여건 에 따라 조 정됨
	현 장 책임관	원청사 과장		원청사 대리		원청사 대리	협력업체 소장
	감리원	감리원 1명 순회근무			감리원 1명 순회근무

범례

작업구간