문서번호	장애인복지정책과-5792
결재일자	2015.4.14.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	장애인거주시설팀장	장애인복지정책과장
오수연	서형석	04/14 윤재삼

장애인거주시설 누림홈

낙찰차액 사용승인 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
		해당없음

2015. 4.

장애인거주시설 누림홈

낙찰차액 사용승인 검토보고

장애인거주시설「누리홈」에서 기능보강 사업 입찰 후 발생한 차액의 사용승인 요청에 대한 검토 결과를 보고드림

□ 관련규정  【2015년 장애인복지(거주)시설 사업안내 - 복지부 지침】

❍ 변경승인권자 : 시․도지사

❍ 낙찰차액활용 : 낙찰차액은 같은 시설의 다른 기능보강사업에 사용

□ 낙찰차액 발생현황

(단위 : 천원)

시설명 (법인명)	사업내용	구분	교부금액	계약금액	낙찰차액	낙찰차액 사용승인 요 청 액
누림홈 (사회복지법인 프리웰)	리모델링 (승강기설치)공사	보조금	155,000	138,251	16,749	16,749

□ 검토결과

시설명	낙찰차액 사업	검토결과
누 림 홈 □경기도 김포시 □정원 91명 현원 64명 □1982.1.12.설립	□ 암반 제거 공사 - 승강기 설치 예정지에 약 20㎥규모의 암반이 발견되어, 암반 제거공사를 위한 비용발생	□ 타당성 인정 - 승강기 설치공사의 진행을 위해 경암터파기 토공사는 필수적으로 선행되어야 하는 사업으로 필요성이 인정됨.