도시안전본부

목     차

《보도환경개선과》

화양동 대학 문화의 거리 조성	1

《도로계획과》

서강대교북단 진출입램프 타당성조사 및 기본계획	2

월계로~창동길간 도로개설공사	3

잠실대교 및 천호대교 남단 주변 연결체계 개선	4

화랑로 육사삼거리 선형개량	5

강남순환도시고속도로 건설공사	7

강남순환도시고속도로 건설공사	8

강남순환도시고속도로 건설공사	9

겸재교 건설	10

고척교 확장공사	11

고척교 확장공사	12

고척교 확장공사	13

남부순환로(개봉역앞)구조개선공사	14

남부순환로(개봉역주변)구조개선	15

도림로 확장공사	16

도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사	17

도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사	18

동부간선도로 확장 TF팀 운영	19

망우리고개 횡단교량 설치공사	20

사가정길(장안삼거리~전농동사거리간)확장	21

서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선	22

선사로~고덕지구간 도로확장공사	23

선사로~고덕지구간 도로확장공사	24

성암로 병목구간 개선공사	25

성암로 병목구간 개선공사	26

시조사삼거리 교차로 구간 개선사업	27

신도림역~도림동 연결로 개선	28

신림~봉천터널도로건설공사	29

율곡로 (창경궁앞) 구조개선	30

율곡로(창경궁앞) 및 도로구조개선 전기(통신)공사	31

율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사	32

율곡로 (창경궁앞) 구조개선공사	33

응봉교 재설치	34

응봉교 재설치	35

한강상 교량 연결램프 구조개선	36

한강상 교량 연결램프 구조개선	37

KTX수서역 등 기반시설 입지에 따른 도로개선대책 검토 용역	38

동부간선도로(녹천교~의정부시계) 확장	39

동부간선도로(녹천교~의정부시계) 확장	40

동부간선도로(녹천교~의정부시계) 확장	41

사가정길~암사동간 도로개설(암사대교건설)	42

사가정길~암사동간 도로개설(암사대교건설)	43

사가정길~암사동간 도로개설(암사대교건설)	44

신사사거리~고양시계간 도로개설공사	46

신사사거리~고양시계간 도로개설공사	47

태릉~구리IC간 도로확장	48

남부순환로 ~오정대로 삼거리간 도로개설공사	49

방화대교남단 접속도로 건설	50

방화대교남단 접속도로 건설	51

제2자유로 종점부(난지도길) 입체화	52

동부간선도로(녹천교~의정부시계) 확장	53

《도로관리과》

호압사길 절개지사면 보수보강공사	54

남산1호터널 방음벽 보수보강공사	56

도로관리시스템 DB갱신사업	57

도로함몰 탐사장비 제조 구매	58

국제현상 공모지침 및 관리용역	59

서울역고가 프로젝트 타당성조사 및 현상공모	60

남부도로사업소 도시관리계획 결정 용역	61

가산2빗물펌프장 유수지복개 기본 및 실시설계	62

남부도로사업소 청사 설계 용역	63

《도로시설과》

경부고속도로 및 올림픽대로 상 7개 시설물 포장개량공사	77

강선보강교량 유지관리방안 수립	78

노량교 슬래브(난간하부)보수공사	79

탄천2고가교 정밀안전진단용역	80

홍지문터널 정밀안전진단용역	81

욱천복개1구간 정밀안전진단용역	82

대방천복개 정밀안전진단용역	83

도림천1복개 외 1개소 정밀안전진단용역	84

도림천4복개구조물 정밀안전진단용역	85

석촌지하차도 정밀안전진단용역	86

가락지하차도외 2개소 지반조사 용역	87

잠실대교 정밀안전진단 용역	89

도로시설물(자치구 위탁관리) 긴급보수	90

내부순환로 내진보강(홍제천고가교)	92

강변북로 사면 보수보강공사	93

옥수 금호터널 보도 차단벽 설치공사	94

자하문터널 보수공사	95

마들지하차도 외 3개소 보수 및 포장개량공사	96

창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치공사	97

창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치공사	99

남산1호터널외 5개소 노후방재설비 보완공사	101

남산1호터널외 5개소 노후방재설비 보완공사	102

《교량안전과》

도로시설물(교량) 일상유지 보수공사	103

한강교량 일상유지보수공사	104

한강교량일상유지보수공사 책임감리용역	106

동호대교 보수공사	107

성산대교 성능개선	109

성산대교 성능개선 실시설계 감리용역	110

동호대교 기초구조물(우물통)보수공사	111

동호대교 기초구조물(우물통)보수공사 책임감리용역	113

한강교량 하상 잔재물 수거용역	114

성내교 보수공사	115

장안교(구교) 성능개선공사	116

개봉고가 보수공사	117

서대문고가차도 철거공사	118

《물관리정책과》

서울시 지하수관리계획 수립(2차)	119

그린 빗물인프라 시설 구축	120

빗물관리시설 확충	121

빗물관리시설 확충	122

빗물관리시설 확충	123

물순환 효과분석 및 인프라구축 기술개발 연구	124

서울특별시 수질 및 수생태계 보전계획 수립 연구	125

양평1유수지 CSOs 저류조 설치	126

토양·지하수 환경정보시스템 유지보수 용역	127

《하천관리과》

한강로 일대 방재시설 확충사업(시설)	128

한강로 일대 방재시설 확충사업(감리)	129

신월 빗물저류 배수시설 설치(시설)	130

신월 빗물저류 배수시설 설치(감리)	131

관악산 저류조 설치공사(시설비)	132

관악산 저류조 설치(기계,전기,통신)공사	133

시흥계곡 빗물저류조 설치	134

일자산 도시자연공원 빗물 저류조설치 설계 용역	135

용두 빗물펌프장 시설용량증대(토목)	136

용두 빗물펌프장 시설용량증대(감리)	137

신림 빗물펌프장 시설 용량 증대(설비)	138

중동 빗물펌프장 시설 용량 증대(토목)	139

중동 빗물펌프장 증설 공사(설비)	140

중동 빗물펌프장 증설 공사(감리)	141

잠원 빗물펌프장 시설 용량 증대(토목)	142

잠원 빗물펌프장 시설 용량 증대(설비)	143

잠원 빗물펌프장 시설 용량 증대(감리)	144

신이문 빗물펌프장 시설 용량 증대(토목)	145

공릉 빗물펌프장 시설 용량 증대(토목)	146

공릉 빗물펌프장 시설 용량 증대(설비)	147

공릉 빗물펌프장 시설 용량 증대(감리)	148

합정 빗물펌프장 시설 용량 증대(토목)	149

용허리 공원 빗물 저류조 설치	150

도곡(대치1) 빗물펌프장 신설	151

조원동 저지대지역 침수해소	152

도봉2천 시설물 개선사업	153

중랑천 마스터플랜 수립 용역	154

중랑천 둔치(중랑구간) 친수시설 조성	155

군자교 진출입(경사로)시설 설치	157

불광천(은평구간) 환경개선	158

홍제천 종로구간 하천정비	159

동작구 사당역 일대 배수개선	160

안양천(금천구) 물놀이시설 설치	161

상도동 성대시장주변 침수해소	163

청계천 개선보완 사업	164

청계천 개선보완 사업	165

청계천 경사면 식재수종 교체	166

《물재생계획과》

하수도정비 기본계획(변경) 수립	167

하수도 사업관리 용역	168

하수도사업 자산평가 용역	169

사유지통과 공공하수도 정비방안 용역	170

2014 하수암거 정밀점검 용역	171

2014 하수암거 정밀점검 결과 GIS DB 구축 용역	172

노후하수관로조사(중점관리구역)	173

새창로 126 주변 외 8개소 사각형거 정밀점검용역	174

구의강변로 하수암거 외 3개소 정밀점검용역	175

관내 하수암거 안전점검 용역	177

중랑구 관내 노후 사각형거 정밀점검 및 정밀안전진단	178

강북구 사각형거 정밀안전점검 및 실시설계용역	180

사각형거 정밀안전 점검자료 GIS DB 구축 용역	181

공덕·대현배수분구내 하수암거에 대한 정밀안전진단	182

신정동 743-2~1293외 8개소 사각형거 정밀 점검 용역	183

양녕로 외 20개소 하수암거 안전점검 및 정밀안전진단용역	184

양녕로 외 20개소 노후사각형거 GIS DB 구축 용역	185

2014년 노후사각형거 정밀점검용역(2차)	186

필동배수분구 하수관거 종합정비사업	187

하계배수분구 하수관로 종합정비	188

구산1배수분구하수관로종합정비(시설비)	189

구산1배수분구하수관로종합정비(감리비)	190

도림1배수분구 하수관로 종합정비공사	191

신림4배수분구 하수관거 종합정비사업(2014년구간)	193

효자배수분구(광화문지역) 하수관로 개선사업 기본 및 실시설계	195

신촌 현대백화점주변 침수방지공사	196

한강로 일대 방재시설 확충사업	197

가양이마트~가양빗물펌프장간 하수암거 정비공사	198

강서구청사거리~가양빗물펌프장간 하수암거 정비공사	199

영등포7가 62-3~63-2 외 3개소 하수관개량공사	200

역삼동814~서초동1304번지 간 하수관거 확장공사	202

방배로 하수암거 신설공사(방배역~내방역 간)	203

암사역주변 침수해소를위한 기본 및 실시설계 용역	204

수색교 하부 하수관로 이설공사 실시설계용역	205

양평동 77~265간 사각형거 개량공사	206

월정로28길 156~월정로17길10외 1개소 하수암거 보수보강공사	207

《물재생시설과》

서남물재생센터 시설현대화	208

서남물재생센터 시설현대화	209

난지물재생센터 환경개선	210

서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	211

서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	212

차집관거 성능개선	213

복개하천 주변 악취방지공사	214

탄천물재생센터 복개공원화(4단계)	215

탄천물재생센터 복개공원화(4단계)	216

마곡지구내 재생수 공급(하수도특별)	217

마곡지구내 재생수 공급(하수도특별)	218

《중랑물재생센터》

제2처리장 유량조정 및 침전조설치공사	219

분뇨처리장 유입저류조 증설	220

화양동 대학 문화의 거리 조성

(보도환경개선과 / 광진구청 도로과)

□ 사업개요

◦ 위    치 : 광진구 자양4동 및 화양동 일대

◦ 규    모 : A=88,300㎡

◦ 기    간 : 2014. 7. 8 ~ 2015. 6. 30

◦ 총사업비 : 250,000천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦ 이월내역

- 예산과목 : 도로시설물 관리(도시개발), 화양동 대학 문화의 거리 조성 시설비 및 부대비, 시설비(205-401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	250,000,000	182,700,000	164,300,000	98,580,000	65,720,000 ( 0)	85,700,000
설 계 비	250,000,000	182,700,000	164,300,000	98,580,000	65,720,000 ( 0)	85,700,000

◦ 이월사유

- 화양동 대학 문화의 거리 조성 타당성 조사 및 기본계획 용역 추진과업에 대한 문화적인 측면 추가 검토와 외부 전문가 의견 수렴 등을 위하여 용역 준공기한 연기에 따른 사고이월

서강대교북단 진출입램프 타당성조사 및 기본계획

(도로계획과)

□ 사업개요

◦위치 : 서강대교 북단(마포구 신정동)

◦규모 : 교량 진․출입 램프 2개소 건설

- 서강대교북단→구리방향(L=620m, B=6.4m)

- 강변북로→서강대교북단(L=640m, B=6.4m)

◦기간 : 2014.1 ~ 2015.5(15.2월말 현재 기본계획용역중)

◦총사업비 : 2억원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로건설, 간선도로망확충(일반회계), 서강대교북단 진출입램프 타당성조사 및 기본계획, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	200,000,000	200,000,000	200,000,000	137,552,000	62,448,000 (0)	0
시 설 비 (타당성조사)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	137,552,000	62,448,000 (0)	0

◦이월사유

- 서강대교 북단의 불합리한 연결램프에 대한 전반적인 검토를 위하여 용역시행 방안 등을 마련하는데 일정기간 소요함에 따라 5월 이후 용역착수

- 과업기간이 2015. 5월말 예정으로 용역수행을 위하여 사고이월 필요

월계로~창동길간 도로개설공사

(도로계획과/노원구 토목과)

□ 사업개요(노원구간)

◦위    치 : 노원구 월계동 청백아파트~월계배수지

◦규    모 : 소로개설 B=10m, L=250m

◦기    간 : 2014.02.~2015.12.(15.2월말 현재 20%)

◦총사업비 : 2,200백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 일반회계, 도시안전본부 도로계획과, 도로건설, 간선도로망 확충, 월계로~창동길간 도로개설, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	55,614,700	1,444,385,300 ( )	0
설 계 비		53,135,000	53,135,000	53,135,000	53,135,000	0	0
공 사 비		1,294,303,550	1,294,303,550	1,294,303,550	0	1,294,303,550 ( )	0
	도 급 비	837,857,990	837,857,990	837,857,990	0	837,857,990 ( )	0
	관 급 비	456,445,560	456,445,560	456,445,560		456,445,560
보 상 비		63,129,450	63,129,450	63,129,450	2,317,700	60,811,750 ( )
이전비․기타		89,432,000	89,432,000	89,432,000	162,000	89,270,000 ( )

◦이월사유

- 관련기관 협의에 따른 기본 및 실시설계 지연으로 공사수행 절대공기 부족

잠실대교 및 천호대교 남단 주변 연결체계 개선

(도로계획과)

□ 사업개요

◦위치 : 잠실대교‧천호대교 남단 IC

◦규모 : 연결로 구조개선 2개소

◦기간 : 2014.1 ~ 2018.12 (15.2월말 현재 기본계획용역중)

◦총사업비 : 442억원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로건설, 간선도로망확충(일반회계), 잠실대교 및 천호대교 남단 주변 연결체계 개선, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	200,000,000	188,202,000	143,880,000	0	143,880,000 (0)	56,120,000
시 설 비 (타당성조사)	200,000,000	188,202,000	143,880,000	0	143,880,000 (0)	56,120,000

◦이월사유

- 잠실대교, 천호대교 남단 외 한강변 도시고속도로(강변북로, 올림픽대로) 양화대교~광진교 간 불합리한 연결램프에 대한 전반적인 검토를 위하여 용역시행 방안 등을 마련하는데 일정기간 소요함에 따라 5월 이후 용역착수

- 과업기간이 2015. 5월말 예정으로 용역수행을 위하여 사고이월 필요

화랑로 육사삼거리 선형개량

(도로계획과/노원구청 토목과)

□ 사업개요

◦위치 : 공릉동 100-31 육사아파트 입구

◦규모 : 폭3~7m, 연장 170m

◦기간 : 2014.12.30 ~2015. 2.27

◦총사업비 : 20백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로계획과,도로건설,간선도로망확충, 화랑로육사삼거리 선형개량, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		200,000,000	200,000,000	198,595,700	179,935,700	20,064,300 (1,404,300)	0
공 사 비		200,000,000	200,000,000	198,595,700	179,935,700	20,064,300 (1,404,300)	0
	도 급 비	157,000,000	157,000,000	155,595,700	137,204,000	19,796,000 (1,404,300)	0
	관 급 비	43,000,000	43,000,000	43,000,000	42,731,700	268,300 ( )	0
보 상 비						( )
이전비․기타						( )

◦이월사유

- 경찰청 교통규제심의 결과 2014.12. 9 가결되고, 동절기 굴착통제로 사업시행 곤란하여 사고이월 필요

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 화랑로 육사삼거리 선형개량 공사

□ 사업기간 : 2013.10.10 ~ 2014.04.30

□ 예산과목 : 도로계획과,도로건설,간선도로망확충, 화랑로육사삼거리

선형개량, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 지출원인행위 미필사유

- 경찰청 교통규제심의 결과 2014.12. 9 가결되고, 동절기 굴착통제로 사업시행 곤란하여 본예산 이월에 따른 부대비 사고이월 필요

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계		1,404,300
	부대비	1,404,300

확 인 자 :  직) 토목과장 성명) 이영관(인)

조 사 자 :  직)시설7     성명) 오정화(인)

강남순환도시고속도로 건설공사

(도로계획과/토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 금천구 독산동~강남구 일원동

◦규모 : 폭 6~8차로, 연장22.9km(민자구간 12.4km)

◦기간 : 1994.7 ~ 2016.5(`15. 2월말 현재 공정율 63%)

◦총사업비 : 1,551,445백만원(민간자본 5,242억원 별도)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시고속도로망확충(도시개발특별회계), 강남순환도시고속도로건설, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		35,619,647,450	35,619,647,450	35,619,646,850	34,104,664,290	1,514,982,560 ( )	600
공 사 비		34,707,800,450	34,707,800,450	34,707,800,450	33,557,556,450	1,150,244,000 ( )	0
설 계 비		911,847,000	911,847,000	911,846,400	547,107,840	364,738,560 ( )	600
	도 급 비	35,619,647,450	35,619,647,450	35,619,646,850	34,104,664,290	1,514,982,560 ( )	600
	관 급 비					( )
보 상 비						( )
이전비․기타						( )

※ ‘15.2월말 집행예정금액 : 3,963,670,000원,

※ 양재대로(대모) 지하차도 설계비 이월 :364,738,560원

◦이월사유

- 감사원 지적사항을 반영한 강남순환도로와 서해안고속도로 접속에 따른 설계용역 추가 과업 및 한국도로공사 협의 등으로 지연

- 과천시구간 도시계획시설 결정 및 보상협의 지연으로 8공구 공사지연

강남순환도시고속도로 건설공사

(도로계획과/도로계획과)

□ 사업개요

◦위치 : 금천구 독산동~강남구 일원동

◦규모 : 폭 6~8차로, 연장22.9km(민자구간 12.4km)

◦기간 : 1994.7 ~ 2016.5(`15. 2월말 현재 공정율 63%)

◦총사업비 : 1,551,445백만원(민간자본 5,242억원 별도)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시고속도로망확충(도시개발특별회계), 강남순환도시고속도로건설, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		911,847,000	911,847,000	911,846,400	547,107,840	364,738,560 ( )	600
공 사 비
설 계 비		911,847,000	911,847,000	911,846,400	547,107,840	364,738,560 ( )	600
	도 급 비
	관 급 비					( )
보 상 비						( )
이전비․기타						( )

※ 양재대로(대모) 지하차도 설계비 이월 : 364,738,560원

◦이월사유

- 감사원 지적사항을 반영한 강남순환도로와 서해안고속도로 접속에 따른 설계용역 추가 과업 및 한국도로공사 협의 등으로 지연

- 과천시구간 도시계획시설 결정 및 보상협의 지연으로 8공구 공사지연

강남순환도시고속도로 건설공사

(도로계획과/토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 금천구 독산동~강남구 일원동

◦규모 : 폭 6~8차로, 연장22.9km(민자구간 12.4km)

◦기간 : 1994.7 ~ 2016.5(`15. 2월말 현재 공정율 63%)

◦총사업비 : 1,551,445백만원(민간자본 5,242억원 별도)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시고속도로망확충(도시개발특별회계), 강남순환도시고속도로건설, 시설비및부대비, 감리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	1,696,000,000	304,000,000 ( )	0
공 사 비						( )
	도 급 비					( )
	관 급 비					( )
감 리 비		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	1,696,000,000	304,000,000 ( )	0
이전비․기타						( )

※‘15.2월말 집행예정금액 : 601,300,000원

◦이월사유

- 양재대로 기본 및 실시설계 지하차도건설 용역기간 추가필요(디자인심의)

- 감사원 지적사항을 반영한 강남순환도로와 서해안고속도로 접속에 따른 설계용역 추가 과업 및 한국도로공사 협의 등으로 지연

- 과천시구간 도시계획시설 결정 및 보상협의 지연으로 8공구 공사지연

겸재교 건설

(도로계획과/도시기반시설본부 토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 동대문구 휘경동 휘경여중고 삼거리 ~ 중랑구 면목동 동2로사거리

◦규모 : 본 교 량 B=18.24m, L=235m (Extra Dosed교)
접속교량 B=9m, L=160m, 접속램프 2개소,
도로확장 B=20→30m, L=750m

◦기간 : 2008.10.23 ～ 2016.12.31 (′15년 2월 현재 73%)

◦총사업비 : 84,793백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : (도시개발특별회계)도로계획과, 간선도로망 확충, 겸재교 건설, 시설비 및 감리비, 시설비, 감리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		7,628,357,680	7,628,357,680	7,628,317,899	4,912,210,910	2,716,106,989 ( )	39,781
공 사 비		7,128,357,680	7,128,357,680	6,929,377,679	4,368,270,690	2,561,106,989 ( )	39,781
	도 급 비	5,662,433,720	5,662,433,720	5,662,433,720	3,599,800,000	2,062,633,720 ( )
	관 급 비	1,266,983,740	1,266,983,740	1,266,943,959	768,470,690	498,473,269 ( )	39,781
이전비․기타		198,940,220	198,940,220	198,940,220	198,940,220	( )	-
감 리 비		500,000,000	500,000,000	500,000,000	345,000,000	155,000,000 ( )	-

◦이월사유

- 감사원 감사결과에 따른 접속교량 구간 터널형방음벽 설치 재검토로 인하여 공사 지연 발생

고척교 확장공사

(도로계획과/도시기반시설본부 토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 서울특별시 구로구 서남권 돔 야구장 주변 고척교

◦규모 : 교량확장 폭 37.53m→52.57m, 연장 203m

(북측보도교 3.5m, 남측보도교 11.5m)

◦기간 : 2013. 4. 8.～ 2015. 6.30.

◦총사업비 : 20,171백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : (도시개발특별회계)도로계획과, 간선도로망 확충, 고척교 확장, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		6,363,536,000	6,363,536,000	6,363,533,830	1,749,462,740	4,614,071,090 ( )	2,170
공 사 비		6,356,336,000	6,356,336,000	6,356,334,330	1,742,263,240	4,614,071,090 ( )	1,670
	도 급 비	4,614,071,090	4,614,071,090	4,614,071,090	0	4,614,071,090 ( )
	관 급 비	1,742,264,910	1,742,264,910	1,742,263,240	1,742,263,240	0 ( )	1,670
보 상 비						( )
이전비․기타		7,200,000	7,200,000	7,199,500	7,199,500	0 ( )	500

◦이월사유

- 수방기간(‘14.5.15~10.15)안양천 하천공사 중지로 사업지연

고척교 확장공사

(도로계획과/도시기반시설본부 토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 서울특별시 구로구 서남권 돔 야구장 주변 고척교

◦규모 : 교량확장 폭 37.53m→52.57m, 연장 203m

(북측보도교 3.5m, 남측보도교 11.5m)

◦기간 : 2013. 4. 8.～ 2015. 6.30.

◦총사업비 : 20,171백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : (도시개발특별회계)도로계획과, 간선도로망 확충, 고척교 확장, 시설비 및 부대비, 감리비(401-02)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		500,000,000	500,000,000	500,000,000	100,000,000	400,000,000 ( )	0
감 리 비		500,000,000	500,000,000	500,000,000	100,000,000	400,000,000 ( )	0
	도 급 비	500,000,000	500,000,000	500,000,000	100,000,000	400,000,000 ( )	0
	관 급 비					( )
보 상 비						( )
이전비․기타						( )

◦이월사유

- 수방기간(‘14.5.15~10.15)안양천 하천공사 중지로 사업지연

고척교 확장공사

(도로계획과/도시기반시설본부 설비부)

□ 사업개요

◦위치 : 서울특별시 구로구 서남권 돔 야구장 주변 고척교

◦규모 : 교량확장 폭 37.53m→52.57m, 연장 203m

(북측보도교 3.5m, 남측보도교 11.5m)

◦기간 : 2013.12. 9.～ 2015. 6.30.

◦총사업비 : 20,171백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : (도시개발특별회계)도로계획과, 간선도로망 확충, 고척교 확장, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		436,464,000	436,464,000	436,464,000	0	436,464,000 ( )	0
공 사 비		436,464,000	436,464,000	436,464,000	0	436,464,0000 ( )	0
	도 급 비	373,274,320	373,274,320	373,274,000	0	373,274,000 ( )	0
	관 급 비	63,189,680	63,189,680	63,189,680	0	63,189,680 ( )	0
보 상 비						( )
이전비․기타						( )

◦이월사유

- 수방기간(2014. 05. 15. ~ 2014. 10. 15.) 안양천 하천공사 중지로 사업지연되어 설비공사(후속사업)의 작업시기 미도래

남부순환로(개봉역앞)구조개선공사

(도로계획과 / 도시기반시설본부 토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 구로구 개봉동 198-1 일원(남부순환로 개봉역앞)

◦규모 : 남부순환로 구조개선 폭 30m, 연장 1,160m

(지하차도 4차로, 736m 신설 포함)

◦기간 : 2007.9.10 ～ 2015.6.30. (‘15.2월말 현재 공정율 : 95%)

◦총사업비 : 66,777백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 간선도로망확충(도시개발특별), 남부순환로(개봉역주변)구조개선, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		8,237,200,000	8,237,200,000	8,237,200,000	5,565,060,060	2,672,139,940 ( )	0
공 사 비		8,237,200,000	8,237,200,000	8,237,200,000	5,565,060,060	2,672,139,940 ( )	0
	도 급 비	8,207,626,000	8,207,626,000	8,207,626,000	5,565,060,060	2,642,565,940 ( )	0
	폐기물처리비	29,574,000	29,574,000	29,574,000	-	29,574,000 ( )	0

◦이월사유

- 지하매설물 저촉 등에 따른 한전‧통신지중화 지연으로 연계공정인 보도포장 지연 발생 및 남부순환로 자동차전용도로 해제에 따른 추가 보도설치 기간 소요

남부순환로(개봉역주변)구조개선

(도로계획과/도시기반시설본부 설비부)

□ 사업개요

◦위치 : 구로구 개봉동 198-1 일원(남부순환로 개봉역앞)

◦규모 : 남부순환로 구조개선 폭 30m, 연장 1,160m

(지하차도 4차로, 736m 신설 포함)

◦기간 : 2007.9.10 ～ 2015.6.30. (‘15.2월말 현재 공정율 : 95%)

◦총사업비 : 66,777백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : (도시개발특별회계)도로계획과, 간선도로망확충, 남부순환로(개봉역주변)구조개선, 시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		167,800,000	167,800,000	166,435,680	38,690,290	127,745,390 ( )	1,364,320
공 사 비		167,800,000	167,800,000	166,435,680	38,690,290	127,745,390 ( )	1,364,320
	도 급 비	34,988,760	34,988,760	33,624,440	33,624,440	0 ( )	1,364,320
	관 급 비	132,811,240	132,811,240	132,811,240	5,065,850	127,745,390 ( )	0

◦이월사유

- 신호등, 가로등 설치를 위한 선행 공정인 보도 포장, 한전·통신 지중화 등 공사 지연으로 사고이월 발생

도림로 확장공사

(도로계획과/영등포구 건설관리과)

□ 사업개요

◦위치 :  355-691 ~ 신길동 401-10

◦규모 :  B=25→35m,  L=120m

◦기간 :  실시계획 고시일로부터 5년(미착공)

◦총사업비 : 3,500백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 간선도로망 확충(도시개발특별), 도림로 확장, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		3,500,000,000	3,500,000,000	3,392,914,770	3,392,914,770	107,085,230 (107,085,230)
공 사 비						( )
	도 급 비					( )
	관 급 비					( )
보 상 비		3,500,000,000	3,500,000,000	3,392,914,770	3,392,914,770	107,085,230 (107,085,230)	0
이전비․기타						( )

◦이월사유

- 도림도 확장공사(8차) 편입된 토지 중 최삼순씨 소유의 토지(458,539,660원) 및 건축물(69,314,360원)은 예산이 부족하여 보상협의가 불가함에 따라 2015년 예산 확보 후 보상협의 진행하고자 함

도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사

(도로계획과/토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 성북구 정릉동 국민대 앞

◦규모 : 사업구간 연장 533m(정릉램프 202m)

- 신설램프 : 연장 120m(폭 6.24m)

- 본선확장 : 연장 82m(폭 5.095m)

- 보도BOX 연장 31m(폭 6.24m), U-Type 연장 37m(폭 6.24m)

◦기간 : 2013.12 ～ 2016.12(5%)

◦총사업비 : 12,200백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시안전실 도로계획과, 도로건설, 도시고속도로망 확충, 도시고속도로 연결램프 추가설치, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		4,100,000,000	4,100,000,000	4,100,000,000	234,050,000	3,865,950,000 ( )	0
공 사 비		4,100,000,000	4,100,000,000	4,100,000,000	234,050,000	3,865,950,000 ( )	0
	도 급 비	4,100,000,000	4,100,000,000	4,100,000,000	234,050,000	3,865,950,000 ( )	0
	관 급 비					( )
보 상 비						( )
이전비․기타						( )

◦이월사유

- 설계중 민원해소 및 램프노선 검토기간 장기 소요

- 도시계획시설(도로) 경미한 변경 등 행정절차 지연(성북구청장 반대) 및 민원사항 등으로 절대공기가 부족하여 사고이월이 불가피함

도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사

(도로계획과/토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 성북구 정릉동 국민대 앞

◦규모 : 사업구간 연장 533m(정릉램프 202m)

- 신설램프 : 연장 120m(폭 6.24m)

- 본선확장 : 연장 82m(폭 5.095m)

- 보도BOX 연장 31m(폭 6.24m), U-Type 연장 37m(폭 6.24m)

◦기간 : 2013.12 ～ 2016.12(5%)

◦총사업비 : 12,200백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시안전실 도로계획과, 도로건설, 도시고속도로망 확충, 도시고속도로 연결램프 추가설치, 시설비및부대비, 감리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000 ( )	0
공 사 비						( )
	도 급 비					( )
	관 급 비					( )
감 리 비		400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000 ( )	0
이전비․기타						( )

※2015. 2월말 지출예정

◦이월사유

- 설계중 민원해소 및 램프노선 검토기간 장기 소요

- 도시계획시설(도로) 경미한 변경 등 행정절차 지연(성북구청장 반대) 및 민원사항 등으로 절대공기가 부족하여 사고이월이 불가피함

동부간선도로 확장 TF팀 운영

(도로계획과 도로시설계획팀)

□ 사업개요

◦목  적 : 동부간선도로 확장 공사시행과 관련하여 향후 동북권 지역 대규모 개발(창동차량기지 개발)등 장래 지역 개발계획 추진에 따른 주요 동북권 도로노선에 대한 교통영향 분석 및 교통수요 예측을 통하여 미래 장기 개선 대책 마련을 위한 기본구상에 그 목적이 있음

◦개   요 : 서울 동북4구(강북,성북,도봉,노원) 동부간선도로 등 12개노선 총66.0km 장래교통수요분석 빛 발전기본구상

◦기   간 : 2015.1.5 ～ 2015. 7.3. (15.2월말 현재 공정율 12%)

◦총사업비 : 100,000천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로건설, 도시고속도로망 확충(도시개발특별회계), 동부간선도로 확장 TF운영, 사무관리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		100,000,000	98,417,000	87,480,000	0	87,480,000 (0)	12,520,000
사무관리비		100,000,000	98,417,000	87,480,000	0	87,480,000 (0)	12,520,000
	용 역 비	90,000,000	88,417,000	77,480,000		77,480,000 (0)	12,520,000
	부 대 비	10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000	0

◦이월사유

- 2014.12월 용역 계약하여 절대공기 부족으로 사고이월

망우리고개 횡단교량 설치공사

(도시안전본부 도로계획과/중랑구 도로과)

□ 사업개요

◦위치 : 서울 중랑구 망우동 산52-1 일대

◦규모 : 교량(연장 45m, 폭 14m(2개 차로 + 양측보도)

◦기간 : 2014.12.30 ～ 2015.12.29

(15. 2월말 현재 공정율 : 30%)

◦총사업비 : 2,938,000천원(1차 872,350천원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 간선도로망확충(도시개발특별), 망우리고개횡단교량설치공사, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,000,000,000	1,000,000,000	979,828,000	107,478,000	872,350,000 ( )	20,172,000
공 사 비		872,350,000	872,350,000	872,350,000	0	872,350,000 ( )	0
	도 급 비	872,350,000	872,350,000	872,350,000	0	872,350,000 ( )	0
	관 급 비					( )
보 상 비						( )
이전비․기타		127,650,000	127,650,000	107,478,000	107,478,000	0 ( )	20,172,000

◦이월사유

- 공법선정을 위한 기술심의 자문회의 2회 및 서울시민디자인위원회 심의 3회, 도시계획시설(도로) 결정 절차에 따른 착공 지연

사가정길(장안삼거리~전농동사거리간)확장

(도로계획과/동대문구 건설관리과)

□ 사업개요

◦위치 : 동대문구전농동32(전농동사거리)~장안동555(장안삼거리)

◦규모 : 전농사거리교차로(L=130m),배봉사거리교차로(L=390m)차도확장 5→6차로

◦기간 : 2010. ～ 2016.

◦총사업비 : 7,964백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 간선도로망확충(도시개발특별), 사가정길(장안삼거리~전농동사거리)확장, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	0	4,500,000,000 ( )	0
공 사 비
	도 급 비
	관 급 비
보 상 비		4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	0	4,500,000,000 ( )	0
이전비․기타

◦이월사유

- 도시계획시설 변경결정 및 도로사업 실시계획고시 등 관련절차 이행에 따른 보상 지연

서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선

(도시안전본부 도로계획과/도시기반시설본부 토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 용산구 보광동 ~ 주성동

◦규모 : 기존고가 철거 B=16.0m, L=510m

고가설치 B=6.4m, L=115m / B=10.4m, L=290m

◦기간 : 2011.01.06 ～ 2015.12.31 (′15년 2월 현재 56%)

◦총사업비 : 27,300백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 간선도로망확충, 서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		3,650,000,000	3,650,000,000	3,649,724,820	3,602,064,850	47,659,970 ( )	275,180
공 사 비		3,530,186,000	3,530,186,000	3,529,910,820	3,529,910,850	- ( )	-
	도 급 비	2,274,940,640	2,274,940,640	2,274,940,610	2,274,940,640	- ( )	-
	관 급 비	1,255,245,360	1,255,245,360	1,254,970,210	1,254,970,210	- ( )	275,180
보 상 비						( )
이전비․기타		119,814,000	119,814,000	119,814,000	72,154,000	47,659,970 ( )	-

◦이월사유

- 예산 미확보로 인한 공사기간 연장에 따라 14년 미 집행 폐기물처리비 이월 필요

선사로~고덕지구간 도로확장공사

(도로계획과 / 도시기반시설본부 토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 강동구 암사동440-1 ~ 고덕동165-11 (아리수로)

◦규모 : 도로확장 2차로 → 4~6차로, 연장3.70km

◦기간 : 2009.01.06 ～ 2015.12.31.(15. 2월말 57%)

◦총사업비 : 149,077백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로건설, 간선도로망확층, 선사로~고덕지구간도로확장(도시개발특별회계), 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		8,143,365,000	8,143,365,000	8,139,185,000	1,614,998,900	6,524,186,100 ( )	4,180,000
공 사 비		8,143,365,000	8,143,365,000	8,139,185,000	1,614,998,900	6,524,186,100 ( )	4,180,000
	도 급 비	6,072,762,010	6,072,762,010	6,068,582,010	1,323,785,000	4,744,797,010 ( )	4,180,000
	관 급 비	1,721,041,990	1,721,041,990	1,721,041,990	235,270,900	1,485,771,090 ( )
	폐기물처리비	349,561,000	349,561,000	349,561,000	55,943,000	293,618,000 ( )

◦이월사유

- 국토교통부의 “하남미사지구 보금자리주택 교통개선대책”에 의거 아리수로 추가 확장(4→6차로)에 따른 도시계획시설사업구간 토지 보상 및 문화재조사 지연으로 인한 공사 지연

선사로~고덕지구간 도로확장공사

(도로계획과 / 강동구청 재무과)

□ 사업개요

◦위치 : 강동구 암사동440-1 ~ 고덕동165-11 (아리수로)

◦규모 : 도로확장 2차로 → 4~6차로, 연장3.70km

◦기간 : 2009.01.06 ～ 2015.12.31.(15. 2월말 57%)

◦총사업비 : 149,077백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로건설, 간선도로망확층, 선사로~고덕지구간도로확장(도시개발특별회계), 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	18,635,000	18,635,000	18,635,000	14,904,710	3,730,290 ( )
보 상 비	18,635,000	18,635,000	18,635,000	14,904,710	3,730,290 ( )	0

◦이월사유

- 국토교통부의 “하남미사지구 보금자리주택 교통개선대책”에 의거 아리수로 추가 확장(4→6차로) 구간의 추가 보상용지 발생으로 인하여 보상 지연

성암로 병목구간 개선공사

(도로계획과/도시기반시설본부 토목부)

□ 사업개요

◦ 위    치 : 마포구 중동 200 ~ 중동 26-3

◦ 규    모 : 도로확장 및 개선 폭2→4차로, 연장 450m

(확장 : 폭 2→4차로 연장 200m)

◦ 사업기간 : 2014.02. ～  2015.05.23(공정율 68%, 15.1월말 현재)

◦ 사 업 비 : 6,750백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 단위사업)간선도로확충망, 세부사업)성암로 병목구간개선
편성목)시설비 및 부대비, 통계목)시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액(B)	원인행위액(C)	지 출 액(D)	사고이월액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		2,545,745,000	2,545,745,000	2,545,744,630	1,662,396,400	883,348,230	370
공 사 비		2,448,208,930	2,448,208,930	2,448,208,930	1,606,037,000		0
	도 급 비	2,336,640,770	2,336,640,770	2,336,640,770	1,606,037,000	730,603,770	0
	관 급 비	111,568,160	111,568,160	111,568,160	0	111,568,160	0
폐기물용역비		66,291,500	66,291,500	66,291,500	25,115,200		0
보 상 비
기 타 ( )		31,244,570	31,244,570	31,244,200	31,244,200		370

◦이월사유

- 미불용지(중동 151-5) 보상 지연 및 방음벽 설치 민원해결에 따른 공기

지연으로 도급비 및 관급자재비 사고이월 필요

성암로 병목구간 개선공사

(도로계획과/도시기반시설본부 설비부)

□ 2014 사업개요

◦ 위    치 : 성암로

◦ 규     모

- 가로등 31개소, 신호등 공사 1식

- 분전반 2면 및 가타 전기부대공 1식

◦ 사업기간 : 2014.04.18 ～  2015.05.30 (공정율 3 0 %, 15.1월말 현재)

◦ 사 업 비 : 263,365,530원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로건설(도시개발특별회계), 간선도로망 확충, 성암로 병목구간 개설,

시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역                                            (단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액(B)	원인행위액(C)	지 출 액(D)	사고이월액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		238,147,420	238,147,420	238,147,420	29,600,000	208,547,420 ( )	-
설 계 비
공 사 비		238,147,420	238,147,420	238,147,420	29,600,000	208,547,420	-
	도 급 비	184,412,350	184,412,350	184,412,350	29,600,000	154,812,350	-
	관 급 비	53,735,070	53,735,070	53,735,070	0	53,735,070	-
보 상 비
감 리 비
시설부대비						( )
기 타 ( 이전비 )						( )

◦이월사유

- 토목공종 후속사업으로 작업시기 미도래

시조사삼거리 교차로 구간 개선사업

(도시안본본부 도로계획과/성동도로사업소 시설보수과)

□ 사업개요

◦위치 : 동대문구 휘경동 시조사삼거리

◦규모 : 차도확장 B=3.0m, L=206m

(고가차도 성능개선 1개소, 보도육교 철거 1개소 포함)

◦기간 : 2014.12.18 ～ 2015.12.31.(0%-실착공 2015.3월)

◦총사업비 : 1,887백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 간선도로망확충(도시개발특별), 시조사삼거리 교차로 구간 개선, 시설비및부대비, 시설비,

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,887,000,000	1,887,000,000	1,881,030,000	30,030,000	1,851,000,000 ( 0)	5,970,000
공 사 비		1,851,000,000	1,851,000,000	1,851,000,000		1,851,000,000 ( 0)
	도 급 비	1,851,000,000	1,851,000,000	1,851,000,000		1,851,000,000 ( 0)
	관 급 비					( )
보 상 비						( )
용 역 비		36,000,000	36,000,000	30,030,000	30,030,000	( )	5,970,000

◦이월사유

- 본 사업과 병행 시공이 필요한 “청량제1고가차도 성능개선공사” 실시설계용역 시행기간이 추가 필요하였으며, 디자인 심의 등 관련 절차이행 등으로 용역기간이 연기되어 부득이 공사 착공시기가 지연됨

첨부  공사계약서 사본 1부. 끝.

신도림역~도림동 연결로 개선

(도시안전본부 도로계획과/영등포구 도로과)

□ 사업개요

◦위치 : 신도림역 ~ 영등포구 도림동

◦규모 : 연결로설치 폭 2.5m, 연장 104.6m

◦기간 : 2014.03.11~2015.02.27

(2015년 2월말 공정율 : 용역-100%, 공사-5%)

◦총사업비 : 2,880백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 간선도로망 확충(도시개발특별), 신도림역~도림동 연결로 개선, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		253,000,000	253,000,000	236,881,660	113,927,000	122,954,660 ( )	16,118,340
공 사 비		123,000,000	123,000,000	122,954,660		122,954,660 ( )	45,340
	도 급 비					( )
	관 급 비	123,000,000	123,000,000	122,954,660		122,954,660 ( )	45,340
보 상 비						( )
용 역 비		130,000,000	130,000,000	113,927,000	113,927,000	( )	16,073,000

◦이월사유

- 공사에 소요되는 관급자재를 기 구매하였으나, 자재적치 공간이 부족하여 공사추진 과정에서 적기에 반입 및 자재비 지출코자 사고이월 하고자 함.

신림~봉천터널도로건설공사

(도로계획과/관악구 건설관리과)

□ 사업개요

◦위치 : 서울시 관악구 신림동 시흥IC ~ 봉천동(낙성대 JCT)

◦규모 : 폭 왕복4차로, 연장 5.58Km

◦기간 : 2010.10.05～ 2017.12.31(13.2월말 현재 11.5%)

◦총사업비 : 550,700백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 간선도로망확충(도시개발특별회계), 신림~봉천터널건설, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		19,032,000,000	19,032,000,000	19,032,000,000	13,887,225,070	5,144,774,930 ( )
공 사 비						0 ( - )
	도 급 비					0 ( - )
	관 급 비					- ( - )
보 상 비		19,032,000,000	19,032,000,000	19,032,000,000	13,887,225,070	5,144,774,930 ( - )	0
이전비․기타						( - )

◦이월사유

- 중앙토지수용위원회 재결에 따른 보상 지연(관악구)

율곡로 (창경궁앞) 구조개선

(도시안전본부 도로계획과/도시기반시설본부 토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 종로구 권농동8(창덕궁 돈화문)∼종로구 원남동 166(원남동 사거리)

◦규모 : 도로확장 폭 4차로→6차로, 총 연장 800m

지하차도 L=316m,(BOX구간 300m, 출입구 16m)

◦기간 : 2010.11.11.～2017.12.31(15.2월말 현재 공정율:44%)

◦총사업비 : 85,370백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시개발특별회계,도로건설,간선도로망확충,율곡로 창경궁앞 구조개선, 시설비및시설부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		337,000,000	337,000,000	334,032,360	274,882,470	59,149,890 ( )	2,967,640
공 사 비		337,000,000	337,000,000	334,032,360	274,882,470	59,149,890 ( )	2,967,640
	도 급 비
	관 급 비	337,000,000	337,000,000	334,032,360	274,882,470	59,149,890 ( )	2,967,640
보 상 비
이전비․기타

◦이월사유

- 문화재 원형복원으로 인한 실시설계 변경에 따라 공사가 지연되어 관급자재비 사고이월 필요

율곡로(창경궁앞) 및 도로구조개선 전기(통신)공사

(도로계획과/도시기반시설본부 설비부)

□ 사업개요

◦위치 : 종로구 권농동8(창덕궁 돈화문)∼종로구 원남동 166(원남동 사거리)

◦규모 : 도로확장 폭 4차로→6차로, 총 연장 800m

지하차도 L=316m,(BOX구간 300m, 출입구 16m)

◦기간 : 2010.11.11.～2017.12.31(15.2월말 현재 공정율:44%)

◦총사업비 : 85,370백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로계획과, 도로건설, 간선도로망확충, 율곡로(창경궁앞) 구조개선, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		250,000,000	250,000,000	242,781,000	13,750,000	229,031,000 ( )	7,219,000
공 사 비						( )
	도 급 비	250,000,000	250,000,000	242,781,000	13,750,000	229,031,000 ( )	7,219,000
	관 급 비					( )
보 상 비						( )
이전비․기타				0	0	0 ( )	0

◦이월사유

- 문화재 원형복원으로 인한 실시설계 변경에 따라 종묘측 보도박스 공기가 지연되어 전기공사 도급비 사고이월 필요

율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사

(도로계획과/종로구 건설관리과)

□ 사업개요

◦위치 : 종로구 권농동8(창덕궁 돈화문)∼종로구 원남동 166(원남동 사거리)

◦규모 : 도로확장 폭 4차로→6차로, 총 연장 800m

지하차도 L=316m,(BOX구간 300m, 출입구 16m)

◦기간 : 2010.11.11.～2017.12.31(15.2월말 현재 공정율:44%)

◦총사업비 : 85,370백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 간선도로망확충, 율곡로 창경궁앞 도로구조개선, 시설비및시설부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,363,000,000	1,363,000,000	1,363,000,000	920,123,270	442,876,730	0
공 사 비
	도 급 비
	관 급 비
보 상 비		1,363,000,000	1,363,000,000	1,363,000,000	920,123,270	442,876,730	0
이전비․기타

◦이월사유

- 원남동 151-2외 1필지(대륭전선) 확대 보상에 따른 보상절차 기간 소요로 인한 보상 지연으로 보상비 사고이월 필요

율곡로 (창경궁앞) 구조개선공사

(도시안전본부 도로계획과/도시기반시설본부 토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 종로구 권농동8(창덕궁 돈화문)∼종로구 원남동 166(원남동 사거리)

◦규모 : 도로확장 폭 4차로→6차로, 총 연장 800m

지하차도 L=316m,(BOX구간 300m, 출입구 16m)

◦기간 : 2010.11.11.～2017.12.31(15.2월말 현재 공정율:44%)

◦총사업비 : 85,370백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시개발특별회계,도로건설,간선도로망확충,율곡로 창경궁앞 구조개선, 시설비및시설부대비, 시설비, 감리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		350,000,000	350,000,000	350,000,000	257,600,000	92,400,000 ( )
공 사 비
	도 급 비
	관 급 비
보 상 비
감 리 비		350,000,000	350,000,000	350,000,000	257,600,000	92,400,000 ( )

◦이월사유

- 문화재 원형복원에 따른 변경실시설계로 공사 지연에 지연에 따른

감리비 사고이월

응봉교 재설치

(도로계획과/토목부,설비부)

□ 사업개요

◦위치 : 성동구 응봉동 ～ 성수동(응봉교)

◦규모 : 확     장 - 폭4차로 → 6차로, 연장 633m

성능개선 - DB18 → DB24

◦기간 : 2008.10.20 ～ 2015.12.31(82%)

◦총사업비 : 78,536백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시안전실, 도로계획과, 도로건설, 간선도로망 확충

응봉교 재설치, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		5,613,000,000	5,613,000,000	5,469,582,580	2,043,710,590	3,425,871,990	143,417,420
토 목 부		5,398,857,000	5,398,857,000	5,398,857,000	2,018,284,200	3,380,572,800	-
공 사 비		5,071,186,000	5,071,186,000	5,071,186,000	1,690,613,200	3,380,572,800	-
	도 급 비	4,833,521,000	4,833,521,000	4,833,521,000	1,633,613,200	3,199,907,800	-
	관 급 비	237,665,000	237,665,000	237,665,000	57,000,000	180,665,000	-
						-	-
이전비․기타		247,000,000	247,000,000	247,000,000	247,000,000	-	-
폐기물처리비		80,671,000	80,671,000	80,671,000	80,671,000	-	-
전기공사비 (설비부)		214,143,000	214,143,000	70,725,580	25,426,390	45,299,190	143,417,420

◦이월사유

- 단계별 교통처리 및 방음벽 설치 민원 등에 따른 공기지연으로 도급비 및 관급비 사고이월 필요

응봉교 재설치

(도로계획과/토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 성동구 응봉동 ～ 성수동(응봉교)

◦규모 : 확     장 - 폭4차로 → 6차로, 연장 633m

성능개선 - DB18 → DB24

◦기간 : 2008.10.20 ～ 2015.12.31(82%)

◦총사업비 : 78,536백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시안전실, 도로계획과, 도로건설, 간선도로망 확충

응봉교 재설치, 시설비및부대비, 감리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		700,000,000	700,000,000	700,000,000	346,220,000	353,780,000	0
공 사 비
	도 급 비
	관 급 비
감 리 비		700,000,000	700,000,000	700,000,000	346,220,000	353,780,000	0
보 상 비
이전비․기타

◦이월사유

- 단계별 교통처리 및 방음벽 설치 민원 등에 따른 공기지연으로 감리비 사고이월 필요

한강상 교량 연결램프 구조개선

(도로계획과/도시기반시설본부 토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 한남‧성수대교 북단, 동호‧올림픽대교 남단 IC

◦규모 : 연결로 구조개선 4개소

◦기간 : 2012.2 ～ 2017.12 (15.2월말 현재 실시설계 중)

◦총사업비 : 76,100백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로건설, 간선도로망확충(도시개발특별회계), 한강상 교량 연결램프 구조개선, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		3,000,000,000	1,789,348,000	1,570,015,000	0	1,570,015,000 (0)	1,429,985,000 (명시이월 1,146백만원)
공 사 비		1,146,000,000	0	0	0	0 (0)	1,146,000,000 (전액 명시이월)
	도 급 비	1,146,000,000	0	0	0	0 (0)	1,146,000,000
	관 급 비	0	0	0	0	0 (0)	0
설 계 비		1,854,000,000	1,789,348,000	1,570,015,000	0	1,570,015,000 (0)	283,985,000

◦이월사유

- 유관기관 협의(하천협의 등), 지장물 추가 조사 등에 따른 기본설계지연됨에 따라 부득이 12월말에 실시설계용역 착수

- 준공기한이 2015. 12월말 예정으로 용역수행을 위하여 부득이 사고이월 필요

한강상 교량 연결램프 구조개선

(도로계획과/도시기반시설본부 토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 한남‧성수대교 북단, 동호‧올림픽대교 남단 IC

◦규모 : 연결로 구조개선 4개소

◦기간 : 2012.2 ～ 2017.12 (15.2월말 현재 실시설계 중)

◦총사업비 : 76,100백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로건설, 간선도로망확충(도시개발특별회계), 한강상 교량 연결램프 구조개선, 시설비 및 부대비, 감리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	500,000,000	165,896,000	145,012,000	0	145,012,000	354,988,000 (명시이월 254백만원)
설 계 감 리 비	400,000,000	165,896,000	145,012,000	0	145,012,000 (0)	254,988,000 (명시이월 254백만원)
공 사 감 리 비	100,000,000	0	0	0	0 (0)	100,000,000 (전액 명시이월)

◦이월사유

- 유관기관 협의(하천협의 등), 지장물 추가 조사 등에 따른 기본설계완료 및 실시설계 착수 지연됨에 따라 올림픽대교 남단 IC 구간에 대한 설계감리가 2014.10월 착수

- 나머지 구간에 대한 설계감리비, 올림픽대교 남단 IC구간의 공사감리비는 명시이월을 하였으며, 올림픽대교 남단 IC구간의 설계감리는 준공기한이 2015.5월 예정으로 부득이 사고이월 필요

KTX수서역 등 기반시설 입지에 따른 도로개선대책 검토 용역

(도시안전본부 도로계획과)

□ 사업개요

◦ 위치 및 규모

▶ 탄천변 서측도로 : 세곡동 사거리 ~ 청담대교 남단

- 지하차도 신설 폭 21.5m(4차로), 연장 5.0Km, 도로확장 3.3Km(6→8차로)

▶ 헌릉IC ~ 내곡IC

- 헌릉로 도로확장 1.2km(6→10차로)

◦ 용역기간 : 2014.6.17 ~ 2015.6.16

◦ 용 역 비 : 390백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로건설, 간선도로망 확충(도시개발특별), KTX수서역 등 기반시설 입지에 따른 도로개선대책 검토 용역, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	500,000,000		390,000,000	156,000,000	234,000,000	110,000,000
시 설 비	500,000,000		390,000,000	156,000,000	234,000,000	110,000,000

◦이월사유

- 준공기한 미도래(용역기간 : 2014.6.17~2015.6.16.)

동부간선도로(녹천교~의정부시계) 확장

(도로계획과/도시기반시설본부 토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 동부간선도로 녹천교 ~ 의정부 시계

◦규모 : 도로확장 왕복4→6~7차로, 연장 6.85㎞

◦기간 : 2007. 10. ～ 2017. 12.

◦총사업비 : 383,470백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 광역도로건설(광역교통시설특별회계), 동부간선도로(녹천교~의정부시계) 확장, 시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	재배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액 (E)	집행잔액 (A-(D+E))
계		38,836,620,000	38,836,620,000	38,830,640,000	12,967,080,000	25,863,560,000	5,980,000
공 사 비				38,830,640,000	12,964,700,000	25,863,560,000	5,980,000
	도 급 비			37,192,000,000	12,267,290,000	24,924,710,000	-36,530,000
	용 역 비			1,636,260,000	697,410,000	938,850,000	42,510,000
보 상 비				-	-	-
이전비․기타				2,380,000	2,380,000	-

◦이월사유

- 갈수기를 이용한 공사추진으로 절대 공기 부족

- 터널형 방음벽 및 지하화 요구 민원

동부간선도로(녹천교~의정부시계) 확장

(도로계획과/도시기반시설본부 설비부)

□ 사업개요

◦위치 : 동부간선도로(녹천교~의정부시계) 6.85km구간

◦규모 : 가로등 368본 및 지하차도 4개소 전기설비 1식

◦기간 : 2008.12.29～ 2015.12.30(5차:2014.12.18～2015.12.30)

◦총사업비 : 14,032백만원 (5차:763백만원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로계획과, 도로건설, 광역도로건설, 동부간선도로확장

(녹천교~의정부시계), 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	재배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,085,000,000	1,085,000,000	1,068,583,650	305,382,650	763,201,000	16,416,350
공 사 비				1,066,168,050	302,967,050	763,201,000	16,416,350
	도 급 비			1,007,978,000	244,777,000	763,201,000	16,416,350
	관급자재비			58,190,050	58,190,050	-	-
보 상 비
이전비․기타				2,415,600	2,415,600	-	-

◦이월사유

- 선행 공정인 토목공사 지연으로 전기분야 공사시기 미도래

동부간선도로(녹천교~의정부시계) 확장

(도로계획과/도시기반시설본부 토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 동부간선도로 녹천교 ~ 의정부 시계

◦규모 : 도로확장 왕복 4→6~7차로, 연장 6.85㎞

◦기간 : 2007. 10. ～  2017. 12.

◦총사업비 : 383,470백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 광역도로건설(광역교통시설특별회계), 동부간선도로(녹천교~의정부시계) 확장, 감리비(401-02)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	재배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액 (E)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	963,118,000	36,882,000
감 리 비				1,000,000,000	963,118,000	36,882,000
	도 급 비			-	-	-
	용 역 비			1,000,000,000	963,118,000	36,882,000
보 상 비				-	-	-
이전비․기타				-	-	-

◦이월사유

- 갈수기를 이용한 공사추진으로 절대 공기 부족

- 터널형 방음벽 및 지하화 요구 민원

사가정길~암사동간 도로개설(암사대교건설)

(도로계획과 / 도시기반시설본부 토목부)

□ 사업개요

◦ 위  치 : 강동구 암사동 ~ 구리시 아천동

◦ 규  모 : 폭4~6차로, 연장2.74km, IC 2개소 (암사, 아천)

- 교량 : 폭4~6차로, 연장1.13km, 연결도로1.61km

◦ 기  간 : 2006.04.05 ～ 2015. 6.30.(’15.2월 말 96%)

◦ 총사업비 : 379,224백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦ 이월내역

- 예산과목 : 광역도로건설(광역교통시설특별회계),사가정~암사동간도로개설(암사대교건설), 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		25,471,310,000	25,471,310,000	25,471,310,000	20,963,443,620	4,507,866,380 ( - )	0 ( - )
공 사 비		25,456,832,000	25,456,832,000	25,456,832,000	20,948,965,620	4,507,866,380	0
	도 급 비	14,015,800,000	14,015,800,000	14,015,800,000	11,227,700,000	2,788,100,000 ( - )	0
	관 급 비	5,136,609,470	5,136,609,470	5,136,609,470	3,549,851,090	1,586,758,380 ( - )	0
	폐 기 물	357,780,000	357,780,000	357,780,000	283,292,000	74,488,000 ( - )	0
	보전부담비	5,731,722,530	5,731,722,530	5,731,722,530	5,731,722,530	0 ( - )	0
	환경영향조사	58,520,000	58,520,000	58,520,000	0	58,520,000 ( - )	0
	문화재조사	156,400,000	156,400,000	156,400,000	156,400,000	0 ( - )	0
이전비․기타		14,478,000	14,478,000	14,478,000	14,478,000	0 ( - )	0

◦이월사유

- 구리암사대교 연결도로 문화재 발굴조사 추가, 완충녹지 보상 지연 및 강일삼거리 고덕교 확장 여부 미결정에 따른 절대공기 부족으로 예산집행시기 미도래

사가정길~암사동간 도로개설(암사대교건설)

(도로계획과 / 강동구청 재무과)

□ 사업개요

◦ 위  치 : 강동구 암사동 ~ 구리시 아천동

◦ 규  모 : 폭4~6차로, 연장2.74km, IC 2개소 (암사, 아천)

- 교량 : 폭4~6차로, 연장1.13km, 연결도로1.61km

◦ 기  간 : 2006.04.05 ～ 2015. 6.30.(’15.2월 말 96%)

◦ 총사업비 : 379,224백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 광역도로건설(광역교통시설특별회계),사가정~암사동간도로개설(암사대교건설), 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	6,991,487,000	6,991,487,000	6,991,487,000	6,946,147,010	45,339,990 ( )	0
시 설 비	6,991,487,000	6,991,487,000	6,991,487,000	6,946,147,010	45,339,990 ( )	0

◦이월사유

- 구리암사대교 연결도로 문화재 발굴조사 추가, 완충녹지 보상 지연 및 강일삼거리 고덕교 확장 여부 미결정에 따른 절대공기 부족으로 예산집행시기 미도래

사가정길~암사동간 도로개설(암사대교건설)

(도로계획과 / 도시기반시설본부 토목부)

□ 사업개요

◦ 위  치 : 강동구 암사동 ~ 구리시 아천동

◦ 규  모 : 폭4~6차로, 연장2.74km, IC 2개소 (암사, 아천)

- 교량 : 폭4~6차로, 연장1.13km, 연결도로1.61km

◦ 기  간 : 2006.04.05 ～ 2015. 6.30.(’15.2월 말 96%)

◦ 총사업비 : 379,224백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 광역도로건설(광역교통시설특별회계),사가정~암사동간도로개설(암사대교건설), 시설비 및 부대비, 감리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	910,000,000	910,000,000	626,600,000	626,600,000	283,400,000 (283,400,000)	0
감 리 비	910,000,000	910,000,000	626,600,000	626,600,000	283,400,000 (283,400,000)	0

◦이월사유

- 구리암사대교 연결도로 구간 중 강일삼거리 고덕교 확장 여부 미결정에 따른 감리비 예산 집행시기 미도래

지출원인행위미필이월명세서

□ 사 업 명 : 사가정길 ∼ 암사동간 도로개설(암사대교건설)

□ 사업기간 : 2006. 4. 5. ∼ 2015. 6.30.

□ 예산과목 : 광역도로건설(광역교통시설특별회계),사가정~암사동간

도로개설(암사대교건설), 시설비 및 부대비, 감리비

□ 지출원인행위 미필사유

- 구리암사대교 연결도로 구간 중 고덕교 확장 여부 결정에 따라 감리비 추가 소요

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계		283,400,000
감리비	직접인건비(3월) : 135,482천원 ․ 책임감리원 1인 ․ 보조감리원(토목4인, 전기․건축․조경 각1인) 제경비 및 기술료 : 108,912천원 직접경비 및 부가세 : 39,006천원	283,400,000

확 인 자 : 직) 광역도로과장     성명) 진 재 섭 (인)

조 사 자 : 직) 지방시설주사     성명) 한 병 찬 (인)

신사사거리~고양시계간 도로개설공사

(도로계획과/도시기반시설본부 토목부)

□ 사업개요

◦위    치 : 은평구 신사동 신사사거리 ~ 고양시 향동동 시계 간

◦규    모 : 도로개설 폭 4차로(25m), 연장 1,077m

◦기    간 : 2012.12.27.~2015.12.26.(15.2월말 현재 67%)

◦총사업비 : 46,811백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시안전본부 도로계획과, 도로건설 광역도로 건설(광역교통시설특별회계), 신사사거리~고양시계간 도로개설, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		6,597,000,000	6,108,737,000	6,108,737,000	6,071,597,690	37,139,310 ( )	488,263,000
공 사 비		6,597,000,000	6,108,737,000	6,108,737,000	6,071,597,690	37,139,310 ( )	488,263,000
	도 급 비	6,072,123,090	5,583,860,090	5,583,860,090	5,583,860,090	- ( )	488,263,000
	관 급 비	524,876,910	524,876,910	524,876,910	487,737,600	37,139,310 ( )	0
보 상 비						( )
이전비․기타						( )

◦이월사유

- 터널공사와 주차장 공사간 중첩으로 공정별 시설공사 미도래

신사사거리~고양시계간 도로개설공사

(도로계획과/도시기반시설본부 설비부)

□ 2014 사업개요(전기·통신 공사)

◦위    치 : 은평구 신사동 신사사거리 ~ 고양시 향동동 시계 간

◦규    모 : 도로개설 폭 4차로(25m), 연장 1,077m

◦기    간 : 2012.12.27.~2015.12.26.(15.2월말 현재 67%)

◦총사업비 : 46,811백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시안전본부 도로계획과, 도로건설 광역도로 건설(광역교통시설특별회계), 신사사거리~고양시계간 도로개설, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액(B)	원인행위액(C)	지 출 액(D)	사고이월액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		170,000,000	170,000,000	170,000,000	0	170,000,000
공 사 비		170,000,000	170,000,000	170,000,000	0	170,000,000
	도 급 비	170,000,000	170,000,000	170,000,000	0	170,000,000
	관 급 비
보 상 비
기 타 ( )		0	0	0		( )

◦ 이월사유

- 터널내 토목공사 시공 중으로 전기공사 후속 사업시기 미도래

태릉~구리IC간 도로확장

(도로계획과)

□ 사업개요

◦위    치 : 서울시 묵동IC ~ 구리시 구리IC(북부간선도로)

◦규    모 : 폭 4~6차로 → 6~8차로, 연장 4.67km

※ 총연장 중 「구리~포천 민자고속도로」에서 접속구간(중랑IC) 2㎞ 시행

◦용역기간 : 2014.12. ~ 2015.06.(15.2월말 현재 10%)

◦총사업비 : 117,184백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시안전본부 도로계획과, 도로건설, 광역도로 건설(광역교통시설특별회계), 태릉~구리IC간 도로확장, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	300,000,000	300,000,000	160,578,000	0	160,578,000	139,422,000
설 계 비	300,000,000	300,000,000	160,578,000	0	160,578,000	139,422,000

◦이월사유

- ‘14.12월 기본계획용역 착수로 용역수행 절대기간 부족

남부순환로 ~오정대로 삼거리간 도로개설공사

(도로계획과/설비부)

□ 사업개요

◦위치 : 강서구 방화동 남부순환로 ~ 부천시 오정구 오정대로 삼거리

◦규모 : 폭 8차로, 연장1.23km

◦기간 : 2010.11.29 ～ 2015.12.30. (53%)

◦총사업비 : 82,700백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 간선도로망확충(교통사업특별회계), 남부순환로~오정대로 삼거리간 도로개설, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000 ( )
공 사 비		80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000 ( )
도급비	전 기			80,000,000	0	80,000,000 ( )
	통 신				0	( )
	기 계				0	( )
관 급 비						( )
보 상 비						( )
이전비․기타						( )

◦이월사유

- 전기공사 9월 발주 및 부천시 구간 보상지연(중앙토지수용위원회 수용재결)에 따른 공사지연으로 준공시기(2014.6.30.) 미도래

방화대교남단 접속도로 건설

(도로계획과/도시기반시설본부 토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 강서구 방화동 ~ 올림픽대로

◦규모 : 도로개설 B=5.75∼18.0m, L=3,021m

(교량 756m, 터널 949m, 토공도로 1,316m)

◦기간 : 2005.10.05 ～ 2015.10.31 (′15년 2월 현재 86%)

◦총사업비 : 109,807백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 간선도로망확충, 방화대교남단 접속도로건설, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		3,800,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000	134,381,890	3,665,618,110 ( )	-
공 사 비		3,798,677,680	3,798,677,680	3,798,677,680	133,059,570	3,665,618,110 ( )	-
	도 급 비	3,617,735,820	3,617,735,820	3,617,735,820	-	3,617,735,820 ( )	-
	관 급 비	180,941,860	180,941,860	180,941,860	133,059,570	47,882,290 ( )	-
보 상 비						( )
이전비․기타		1,322,320	1,322,320	1,322,320	1,322,320	( )	-

◦이월사유

- 용지보상 지연 및 하부공 공사재개 승인 지연

방화대교남단 접속도로 건설

(도로계획과/강서구 건설관리과)

□ 사업개요

◦위치 : 강서구 방화동 ~ 올림픽대로

◦규모 : 도로개설 B=5.75∼18.0m, L=3,021m

(교량 756m, 터널 949m, 토공도로 1,316m)

◦기간 : 2005.10.05 ～ 2015.10.31 (′15년 2월 현재 86%)

◦총사업비 : 109,807백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 간선도로망확충, 방화대교남단 접속도로건설, 시설비 및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	988,946,820	11,053,180 ( )	-
공 사 비		-	-	-	-	( )	-
	도 급 비	-	-	-	-	( )	-
	관 급 비	-	-	-	-	( )	-
보 상 비		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	988,946,820	11,053,180 ( )	-
이전비․기타		-	-	-	-	( )	-

◦이월사유

- 사전행정절차(도시계획시설 변경 결정 등) 지연에 따른 보상 지연

제2자유로 종점부(난지도길) 입체화

(도로계획과)

□ 사업개요

◦위치 : 월드컵로 내 2개 교차로(구룡, 월드컵3단지, 월드컵경기장 교차로)

◦규모 : 교차로 입체화 3개소

◦기간 : 2014.1 ~ 2019.12 (15.2월말 현재 기본설계 중)

◦총사업비 : 720억원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로건설, 간선도로망확충(교통사업특별회계), 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000 (0)	0
설 계 비	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000 (0)	0

◦이월사유

- 파주운정3지구 광역교통개선대책의 일환으로 추진중인 사업으로 사업비를 부담하는 LH공사와의 사업시행 협약지연에 따라 부득이 12월말에 기본설계용역 착수

- 과업기간이 2015.12월말까지로 용역수행을 위하여 사고이월 필요

동부간선도로(녹천교~의정부시계) 확장

(도로계획과/도시기반시설본부 토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 동부간선도로(녹천교~의정부시계)

◦규모 : 도로확장 왕복 4→6~7차로, 연장 6.85㎞

◦기간 : 2007. 10. ~ 2017. 12.

◦총사업비 : 383,470백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 광역도로건설(교통사업특별회계), 동부간선도로(녹천교~의정부시계) 확장(교통개선분담금 계정), 시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		8,028,000,000	8,028,000,000	8,028,000,000	1,010,720,000	7,017,280,000
공 사 비			8,028,000,000	8,028,000,000	1,010,720,000	7,017,280,000
	도 급 비
	용 역 비		8,028,000,000	8,028,000,000	1,010,720,000	7,017,280,000
보 상 비
이전비․기타

◦이월사유

- 갈수기를 이용한 공사추진으로 절대 공기 부족

- 터널형 방음벽 및 지하화 요구 민원

호압사길 절개지사면 보수보강공사

(도로관리과/관악구 토목과)

□ 사업개요

◦위치 : 관악구 삼성동 산78-1(호압사길)

◦규모 : 사면정비 및 낙석방지망 A=26.25@, 낙성방지책 L=160m

폐기물 운반 124㎥, 폐기물 처리 246ton

◦기간 : 2014.12.15 ～ 2015. 6.16 (공정율 10%)

◦총사업비 : 380,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 도로사면붕괴예방을위한보수보강, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		380,000,000	380,000,000	330,513,170	61,000,000	291,155,170 (21,642,000)	27,844,830
공 사 비		373,059,000	373,059,000	323,913,170	61,000,000	284,555,170 (21,642,000)	27,503,830
	도 급 비	238,000,000	238,000,000	210,526,000	61,000,000	149,526,000	27,474,000
	관 급 비	113,417,000	113,417,000	113,387,170	0	113,387,170	29,830
	이전비․기타	21,642,000	21,642,000	0	0	21,642,000 (21,642,000)	0
폐기물처리비		6,941,000	6,941,000	6,600,000	0	6,600,000	341,000

◦이월사유 : 준공기한 미도래

- ‘14년 장마철 기간 중 실시한 특별 합동점검 결과에 따른 보수·보강으로 사전절차(실시설계) 이행기간 소요 등으로 하반기 발주 및 동절기 공사중지로 절대공기 부족

- 유관기관(통신주, 전신주 등) 지장물 협의 지연

※ 실시설계용역 : '14.10.22. ~ '14.12.20.

※ 공사시행     : '14.12.15. ~ '15. 6.16.

첨부  관계서류 1부.

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 호압사길 절개지사면 보수보강공사 (이전비)

□ 사업기간 : 2014.12.15 ～ 2015.06.16

□ 예산과목 : 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 도로사면붕괴예방을위한보수보강, 시설비및부대비, 시설비

□ 지출원인행위 미필사유

- 절개지사면 옹벽에 위치하고 있는 공중선(통신,한전)이 시공장비 저촉으로 작업 불가에 따른 지장 공중선 이전 필요

- 유관기관(통신주, 전신주 등) 지장물 협의 지연

(단위 : 원)

구  분

산  출  내  역

금   액

비  고

합  계

지장 공중선 이설(통신7선,전선1선)

21,642,000

▢ 지장 공중선 현황

연번	관리부서	저촉 현황	개략 이설비
1	LG유플러스	통신1선,연장250m	‣통신 7선X2,500천원 =17,500천원 ‣전선 1선X4,500천원 = 4,500천원 합계 ≒ 22,000천원
2	SK브로드밴드	통신1선,연장250m
3	SK텔레콤	통신2선,연장250m
4	HNC	통신1선,연장250m
5	드림라인	통신1선,연장250m
6	관악구청	통신1선,연장250m
7	한국전력공사	전선1선,연장250m

21,642,000

확 인 자 :  도로관리과장   이 택 근  (인)

조 사 자 :  도로관리과     홍 현 기  (인)

남산1호터널 방음벽 보수보강공사

(도로관리과/중구 도로시설과)

□ 사업개요

◦위치 : 중구 남산1호터널변

◦규모 : H=4m, L=120m

◦기간 : 2014. 8.27 ～ 2015. 5.31(공정율 58%)

◦총사업비 : 331,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 방음시설 설치 및 보수·보강, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		331,000,000	331,000,000	294,758,000	124,827,930	169,930,070	36,242,000
공 사 비		290,625,820	290,625,820	259,223,820	124,827,930	134,395,890	31,402,000
	도 급 비	269,720,000	269,720,000	238,318,000	112,805,000	125,513,000	31,402,000
	관 급 비	20,905,820	20,905,820	20,905,820	12,022,930	8,882,890	-
보 상 비		-	-	-	-	-	-
이전비․기타		40,374,180	40,374,180	35,534,180	-	35,534,180	4,840,000

◦이월사유 : 준공기한 미도래

- 방음벽 우측 이면도로 거주자우선주차 민원발생으로 착공 지연

- 방음벽 좌측(남산1호터널요금소~공사시점 간 70m) 삼일대로 구간은 통행량이 적은 주말(토·일)만 공사 가능하여 절대공기 부족

첨부  관계서류 1부.

도로관리시스템 DB갱신사업

(도로관리과)

□ 사업개요

◦ 규 모: 지형변화구간 위치정보 및 DB갱신 : 129㎢

- 도로시설물 및 부속물 정위치 검증 및 보정·편집

- 외부사용자를 위한 도로시설물/부속물 편짐기능 보완

◦ 기 간 : 2014.12.29 ~ 2015.6.30 (공정율 30%)

◦ 총사업비 : 154,850,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦ 이월내역

- 예산과목 : 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 2014 도로관리시스템 DB갱신사업, 전산개발비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		163,000,000	163,000,000	154,850,000	77,425,000	77,425,000	8,150,000
용 역 비		163,000,000	163,000,000	154,850,000	77,425,000	77,425,000	8,150,000
	도 급 비	163,000,000	163,000,000	154,850,000	77,425,000	77,425,000	8,150,000

◦이월사유 : 용역기간 미도래(사업기간 : ‘14.12.29. ~ ’15.6.30)

- 도로관리시스템에서 사용되고 있는 도로면형 및 선형 데이터는 공간정보담당관의 수치지도 2.0 연속데이터를 기초로 사용하고 있으므로

- 선행사업인 공간정보담당관의 ‘14 수치지형도 갱신사업의 물량증가(당초 45.9㎢ → 129㎢)로 준공기한이 '15.1로 연기됨에 따라 후속사업인 도로관리 DB갱신사업의 발주가 지연되었으며,

- 지형변화구간 위치정보 갱신 및 부속물 정위치 보정편집 등 도로관리 DB갱신에 필요한 절대공기(6개월)가 소요되므로 이월이 필요함

첨부  관계서류 1부.

도로함몰 탐사장비 제조 구매

(도로관리과/품질시험소 총무과)

□ 사업개요

◦개요 : 멀티GPR1식, 포터블 시추기 및 영상촬영기 1식 구매

◦기간 : 2014.12.31 ～  2015.08.28

◦총사업비 : 662,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 도로함몰탐사장비구매, 자산 및 물품취득비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '1.3이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	900,000,000	770,000,000	662,000,000		662,000,000	238,000,000
자산취득비	900,000,000	770,000,000	662,000,000		662,000,000	238,000,000

◦이월사유 : 집행시기 미도래

- 탐사장비 사전조사, 계약심사(‘14.11.13) 등 사전절차 이행기간 소요 및 추경예산으로 도로함몰 탐사장비 제작·구매 용역이 ‘14.12.31. 계약되어 집행시기 미도래

- 차량 구매 후 GPR송수신 안테나, 컴퓨터, CCTV, 카메라 등 장착하여 “서울형 동공탐사장비” 제작기간 및 시범운영기간(약 2개월) 소요

※ 납품 예정일 2015. 8.28

첨부  관계서류 1부.

서울역고가 프로젝트

국제현상 공모지침 및 관리용역

(도로관리과)

□ 사업개요

◦위치 : 서울시 중구 중림동~회현동 일대

◦규모 : 폭 10.3m, 연장 938m

◦기간 : 2014.11.10 ～ 2015.4.9. (공정율 40%)

◦총사업비 : 218,314,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 일반운영비, 사무관리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		232,838,000	232,838,000	218,314,000	109,157,000	109,157,000	14,524,000
용 역 비		232,838,000	232,838,000	218,314,000	109,157,000	109,157,000	14,524,000
	도 급 비	232,838,000	232,838,000	218,314,000	109,157,000	109,157,000	14,524,000
	관 급 비
보 상 비
이전비․기타

◦이월사유 : 준공기한 미도래

- 본 용역은「서울역 7017 국제설계공모 지침 및 관리용역」으로 지역주민 및 남대문 상인회 대상 사업설명회 및 시민토론회를 개최, 의견수렴 하는 등 소통의 사전절차 이행에 따른 국제설계공모 착수 지연

- 원활한 사업추진을 위해 설계공모일정과 관리운영기간 연계가 필요하여 용역비 사고이월 요구함  ※ 설계공모일정 : '15. 1.29. ~ '15. 5. 1.

첨부  관계서류 1부.

서울역고가 프로젝트 타당성조사 및 현상공모

(도로관리과)

□ 사업개요

◦위치 : 서울시 중구 중림동~회현동 일대

◦규모 : 폭 10.3m, 연장 938m

◦기간 : 2014.8 ～ 2016.12 (15.1월말 현재 설계공모중)

◦총사업비 : 500,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 서울역고가 프로젝트 타당성조사 및 현상공모, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	500,000,000
시 설 비		500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	500,000,000
	도 급 비
	관 급 비
이 전 비
이전비․기타

◦이월사유 : 집행시기 미도래

-「서울역 7017 국제설계공모」사업관련 지역주민 및 남대문상인회 대상 사업설명회 및 시민토론회를 개최, 의견수렴하는 등 소통의 사전절차 이행에 따른 설계공모 착수 지연

- 변경된 설계공모일정에 따라 참가작품에 대한 보상비의 사고이월 필요

※ 설계공모일정 : '15. 1.29. ~ '15. 5. 1.

첨부  관계서류 1부.

남부도로사업소 도시관리계획 결정 용역

(도로관리과)

□ 사업개요

◦위    치 : 금천구 시흥3동 963-1(진성연립) 외 12필지

◦규    모 : 부지면적 5,113㎡, 건축연면적 6,274㎡(지하1층 지상5층)

◦기    간 : ’14.12.26 ～ ’15.5.25 (공정율 20%)

◦사업내용 : 도시관리계획 결정(공공청사, 공원) 및 지형도면 고시

◦총사업비 : 17,751,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로관리(6개 도로사업소), 사업소 환경개선, 남부도로사업소 청사신축, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		‘13 명시이월 18,300,000	18,300,000	17,751,000	0	17,751,000	549,000
용 역 비		‘13 명시이월 18,300,000	18,300,000	17,751,000	0	17,751,000	549,000
	도 급 비	‘13 명시이월 18,300,000	18,300,000	17,751,000	0	17,751,000	549,000
	관 급 비
보 상 비
이전비․기타

◦이월사유 : 준공기한 미도래

- 주민민원 해소를 위하여 도로사업소 사무실·차고지 분리, 주민편의시설 설치 등의 청사이전 계획변경 및 재정투자심사 등 사전절차 이행에 따른 기간 소요 등으로 도시계획 결정 용역 하반기 발주

※ 청사이전 계획 변경 : '14. 7.30 / 재정투자심사 : '14. 8.27

첨부  관련서류 1부.  끝.

가산2빗물펌프장 유수지복개 기본 및 실시설계

(도로관리과/도시기반시설본부 방재시설부)

□ 사업개요

◦위치 : 서울시 금천구 가산2빗물펌프장 유수지

◦규모 : 유수지 복개 A=4,300㎡

◦기간 : ‘14.12.29 ～ ‘15.12.28. (공정율 5%)

◦총사업비 : 207,504,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로관리(6개 도로사업소), 사업소 환경개선, 남부도로사업소 청사신축, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		‘13 명시이월 239,000,000	239,000,000	207,504,000	0	207,504,000	31,496,000
용 역 비		‘13 명시이월 239,000,000	239,000,000	207,504,000	0	207,504,000	31,496,000
	도 급 비	‘13 명시이월 239,000,000	239,000,000	207,504,000	0	207,504,000	31,496,000
	관 급 비
감 리 비
이전비․기타

◦이월사유 : 준공기한 미도래

- 주민민원 해소를 위하여 도로사업소 사무실·차고지 분리, 주민편의시설 설치 등의 청사이전 계획변경 및 재정투자심사 등 사전절차 이행에 따른 기간 소요 등으로 설계용역 하반기 발주로 절대공기 부족

※ 청사이전 계획 변경 : '14. 7.30 / 재정투자심사 : '14. 8.27

첨부  관련서류 1부.  끝.

남부도로사업소 청사 설계 용역

(도로관리과/도시기반시설본부 건축부)

□ 사업개요

◦위치 : 금천구 시흥동 961-5외 7필지

◦규모 : 지하1층/지상5층, 연면적 6,274㎡

◦기간 : ‘14.12.26. ~’16. 3. (15.2월말 현재 설계공모 진행 중)

◦총사업비 : 717,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로관리(6개 도로사업소), 사업소 환경개선, 남부도로사업소 청사신축, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		‘13 명시이월 717,000,000	717,000,000	0	0	717,000,000 (717,000,000)	0
용 역 비		‘13 명시이월 717,000,000	717,000,000	0	0	717,000,000 (717,000,000)	0
	도 급 비	‘13 명시이월 717,000,000	717,000,000	0	0	717,000,000 (717,000,000)	0
	관 급 비
보 상 비
이전비․기타

◦이월사유 : 준공기한 미도래

- 주민민원 해소를 위하여 도로사업소 사무실·차고지 분리, 주민편의시설 설치 등의 청사이전 계획변경 및 재정투자심사 등 사전절차 이행에 따른 기간 소요 등으로 설계 용역 하반기 발주로 절대공기 부족

※ 청사이전 계획 변경 : '14. 7.30 / 재정투자심사 : '14. 8.27

- 예술성, 창의성이 요구되는 공공건축물 설계공모 절차 이행을 위하여 입찰공고(‘14.12.26) 후 계약까지 장기간(약90일) 소요

첨부  관련서류 1부.  끝.

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 남부도로사업소 청사 설계 용역

□ 사업기간 : 2014.12.26. ~ 2016. 3.

□ 예산과목 : 도로관리(6개 도로사업소), 사업소 환경개선, 남부도로사업소 청사신축, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 지출원인행위 미필사유

- 민원해소를 위한 사전절차 이행에 따른 기간소요로 하반기 발주

- 예술성, 창의성이 요구되는 공공건축물 설계공모 절차 이행을 위하여 입찰공고(2014.12.26.) 후 계약까지 장기간(약90일)이 소요

※ 지방재정법 제50조 제2항 제2호

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계		717,000,000
	○ 남부도로사업소 청사 설계 용역	717,000,000

첨부 : 관계서류 1부.

확 인 자 :  도로관리과장   이 택 근  (인)

조 사 자 :  도로관리과     문 미 주  (인)

	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	설계공모 공고 의뢰(남부도로사업소 청사 설계용역)

1. 본부장 방침 건축부-15061(2014.12.15)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 추진중인『남부도로사업소 청사 건립공사』설계용역과 관련하여 따로붙임과 같이 건설기술관리법 시행령 제50조 제2항 및 지방계약법 시행령 제42조의4에 의한 설계공모를 시행하고자 공고를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 사업개요

가. 용 역 명 : 남부도로사업소 청사 설계용역

나. 위    치 : 금천구 시흥동 961-5외 7필지

다. 건축규모 : 지하1층/지상5층, 연면적: 6,274㎡

라. 용    도 : 공공업무시설, 근린생활시설

마. 설 계 비 : 717백만원(공사비 14,166백만원)

○ 설계공모(현상설계) 개요

가. 관련근거

- 건설기술관리법시행령 제50조 제2항 및 동법규칙 제25조

- 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2012-446호, ‘12.7.23)

나. 공모방법 : 일반공개공모

다. 설계공모 참가자의 자격

1) 건축사법에 의한 건축사 자격을 소지하고 같은 법에 의하여 건축사사무소의 등록을 필한 자[회사(업체)간 공동이행방식에 의한 공동응모 가능]로서 건축사법제 9조에 의한 결격사유가 없는 자여야 함.

2) 설계공모 공고일 현재 해당관청으로 부터 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없음.

3) 공동응모시 동 응모자 모두 “1)항” 및 “2)항”의 자격조건을 모두 갖추어야 하며, 과반수 초과의 비율을 가진 응모자를 대표자로 선정하여야 함.(단, 공동응모시 5개사를 초과 할 수 없으며, 구성별 계약참여 최소지분율은 5%이상)

4) 외국건축사면허(자격) 취득업체는 상기 1)항의 건축사사무소개설자와 공동이행 방식으로 참여가능

5) 설계공모 당선자는 용역계약 후 발주기관의 사전승인 없이 용역 중 일부분이라도 타업체에 하도급을 줄 수 없음

라. 공고방법 : 서울시 홈페이지( http://infra.seoul.go.kr ) 및 조달청 g2b 등 이용

※ 설계공모 심사위원 명단 포함

마. 심사방법

- 설계공모지침서 규정에 따라 『설계공모 심사위원회』 심사

- 입상작 작품 및 보상

· 당선작(1점) : 설계용역 수의계약 대상자로 선정

· 우수작 및 가작 : 응모작품수에 따라 보상비 지급

바. 설계공모 추진일정(예정)

- 설계공모공고 : 2014.12.26(금)

- 현 장 설 명 : 2015. 1. 6(화) 16:00(시청 별관 후생동)

- 응모신청서등록 : 2015. 1. 8(목) ~ 1. 9(금)

- 작 품 접 수 : 2015. 3. 5(목)

- 작 품 심 사 : 2015. 3. 17(화) 예정

사. 향후 추진일정

- 2015. 3월 : 설계용역 계약 및 설계용역 착수

- 2016. 3월 : 설계용역 준공(설계기간 360일)

- 2016. 5월 : 공사 착공

- 2018. 5월 : 공사 준공(착공일로부터 24개월)

따로붙임 : 1. 설계용역 시행계획 방침서 1부.

2. 설계공고 공고문 1부.

3. 설계공모지침서 1부.

4. 과업내용서 1부.

5. 설계공모 심사위원 명단 1부. 끝.

	건축부장
전문관			건축관리과장			건축부장
협조자
시행	건축부-15130	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 2동 2층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2635	/전송	02-3708-2659	/		/	대시민공개

문서번호	건축부-15061
결재일자	2014.12.15.
공개여부	부분공개
방침번호

					시 민
전문관	건축관리과장	건축부장	시설국장		도시기반시설본부장
협 조	도로관리팀장
	열빛총괄과장
	조경시설과장

「남부도로사업소 청사 건립공사」

설계용역 시행 계획

2014. 12.

도시기반시설본부

건 축 부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	대학교수, 공공건축가	)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	건기법,지방계약법	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

「남부도로사업소 청사 건립공사」

설계용역 시행 계획

○ 현 청사는 ‘82년 건축된 노후건축물로 근무환경 개선 및 강남순환도시고속도로와 접한 주민의 이주대책 민원 해소 등을 위한 청사 건립을 위하여,

○ 상징성·기념성·예술성 및 구조·기능·안전 등 종합적으로 검토하여 사업목적에 적합한 건축물이 될 수 있도록 설계용역을 시행하고자 함.

1. 사업 개요

○ 대지위치 : 서울 금천구 시흥동 961-5번지 외7필지

○ 지역지구 : 제2종 일반주거지역

○ 건립규모 : 지하1/지상5층, 연면적 6,274㎡

○ 건 폐 율 : 60% 이내

○ 용 적 률 : 200% 이내

○ 주 용 도 : 공공업무시설, 근린생활시설

○ 공 사 비 : 14,166백만원

○ 설 계 비 :     717백만원

○ 설계기간 : ‘15.03 ∼ ’16.03(계약일로부터 360일)

○ 위치도 및 현황

2. 추진경위

○ ‘12. 4.13 : 청사이전(금천구 시흥동) 계획 수립

○ ‘14. 1.16 : 청사 기본계획(안) 제출

○ ‘14. 7.30 : 청사이전 계획변경(청사, 차고지 분리)

○ ‘14. 9.30 : 투자심사 - 적정

○ ‘14.10.28 : 남부도로사업소 청사 발주의뢰

○ ‘14.11.25 : 기술용역타당성 심사(적정)

○ ‘14.12.02 : 서울시 건축정책위원회 자문

○ ‘14.12.05 : 기술용역발주전 심의(조건부 가결)

3. 설계용역 세부시행 계획(안)

■ 설계용역 발주방법 : 설계공모 시행

○ 설계공모 방법 : 일반공개공고

○ 관련근거

- 건설기술관리법시행령 제50조제2항 및 지방계약법 시행령 제42조의4

- 설계등 용역업자의 사업수행능력 세부평가기준(국토교통부 고시 제2009-133호)

- 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2012-446호, 2012.7.23)

- 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 제7장 설계공모(안전행정부 예규 제20호, 2013.6.29)

○ 계약방법 : 설계공모 당선자와 수의계약

- 지방계약법 시행령 제25조 제1항 4호 자목

○ 참가자의 자격

1) 건축사법에 의한 건축사자격을 소지하고 같은 법에 의하여 건축사사무소의 등록을 필한 자로서 건축사법제 9조에 의한 결격사유가 없는 자여야 함.

2) 설계공모 공고일 현재 해당관청으로 부터 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없음.

- 응모신청서 등록시 건축사협회 및 등록관청에서 발급한 업무정지중이 아님을 증빙하는 서류를 제출하여야 한다

3) 설계공모 당선자는 용역계약 시 구조․기계․전기․토목․소방․통신․조경 설계자격이 없는 경우, 분야별 설계적격자와 공동계약(분담이행방식)을 체결하여야 한다.

○ 설계공모 추진일정

연번	구 분	추진일정	비 고
1	설계공모 공고	‘14.12.26(금)	서울시 홈페이지
2	현장설명 실시	‘15. 1. 6(화)	서소문별관 후생동 4층(16:00)
3	응모신청서 등록	‘15. 1. 8(목) ∼ 1. 9(금)	우리본부 건축부
4	질의사항 접수	‘15. 1.12(월) ∼ 1.13(화)	서울시 홈페이지
5	질의사항 회신	‘15. 1.21(수) 예정	서울시 홈페이지 게재
6	작 품 접 수	‘15. 3. 5(목)	우리본부 건축부(17:00까지)
7	작 품 심 사	‘15. 3.17(화)	설계공모 심사위원회(14:00)
8	당선작 발표	‘15. 3.20(금) 예정	서울시 홈페이지 게재

■ 설계공모 심사위원회 구성

○ 심사위원회 구성 : 관련분야 전문가 등 9명으로 구성

구 분	분 야	심사인원	비 고
위촉직	건축계획(설계)	4명	심사위원 선정위원회
	서울시 공공건축가	3명	“
	지역주민	1명	주관부서(도로관리과) 추천
당연직	공무원	1명

○ 심사위원 선정기준

- 건축계획분야에 학식과 경험이 풍부한 관련학과 대학교수, 서울시 공공건축가 및 주관부서 추전 지역주민으로 풀 명단 구성

○ 심사위원 선정

- 심사위원 선정위원회(별도 구성)에서 선정된 관련분야 심사위원수의 “일정배수(3배수) 후보위원”(당연직 심사위원 1명 제외)의 후보자 연락순서대로 유선통화하여, 심사위원 수락 여부를 파악하여 선정.

※ 설계공모 심사위원 명단 참조

- 심사위원의 사전공개

※ 설계공모 공고시 서울특별시 인터넷 홈페이지 게재

[http://infra.seoul.go.kr →분야별정보→건설→기반시설건설→현장자료실]

■ 설계공모 평가항목 및 분야별 배점

○ 관련근거 : 「건설기술관리법 시행규칙」 제25조

평가분야	배점	평가항목	기타
건축계획 예술성·작품성 및 기능성	40	- 디자인해법의 창의적□독창적 접근 - 각 실계획의 적정성 및 기능성 - 노유자 시설에 맞는 프로그램의 이해 및 독창성 창의성 등	상대평가
건축구조 및 시공계획 등	20	- 구조의 안정성, 시공의 적정성 등 - 추정공사비의 적정성 여부 등
주변환경과의 조화 등	15	- 조경시설 등 공공시설물과 커뮤니티 계획 등 - 외부 공간계획의 적정성 및 주변과 조화성
경제성 및 공공성 등	15	- 공공의 기여도, 생애주기비용의 적정성 - 노년층을 고려한 시설의 적용 등
친환경을 고려한 에너지절감 등	10	- 친환경을 고려한 에너지절감을 통한 유지 관리비용 절감 등
합 계	100

※ 평가방식은 채점재를 원칙으로하되, 설계공모심사위원회에서 투표제등 따로 정할수 있다.

■ 설계공모 보상비

1) 관련근거

- 설계공모 운영지침 제16조(국토교통부 고시 제2012-446호)

- 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 (안전행정부 예규 제20호, 2013.6.29)

2) 설계공모 입상작에 대한 공모안 작성비용 보상예산(예정사업비의 1% 범위내)

구 분		보상대상	보상금 지급	비 고
응모 작품수	2	1개	- 가작 1 : 33,000,000원	상장 및 보상금
	3	2개	- 우수 1 : 28,000,000원 - 가작 1 : 21,000,000원	〃
	4	3개	- 우수 1 : 28,000,000원 - 가작 1 : 21,000,000원 - 가작 2 : 14,000,000원	〃
	5 이상	4개	- 우수 1 : 28,000,000원 - 가작 1 : 21,000,000원 - 가작 2 : 14,000,000원 - 가작 3 : 7,000,000원	“
비고 : 작품수준에 따라 심사위원회의 결정으로 보상대상작품(우수작 및 가작)을 선정하지 않을 수 있으며, 채점결과 동점인 경우는 해당 순위 간 보상금을 균등 지급하며, 입상작으로 선정된 자가 30일 이내에 보상금 지급을 신청하지 않을시 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함

4. 향후 추진계획

○ 2014.12월 : 설계공모 공고(공모기간 70일)

○ 2015. 3월 : 설계용역 계약 및 설계용역 착수

○ 2016. 3월 : 설계용역 준공(용역기간 360일)

○ 2016. 5월 : 공사 착공

○ 2018. 5월 : 공사 준공(착공일로부터 24개월)

첨부 1. 설계공모지침서 1부

2. 과업내용서 1부

3. 설계공모 심사위원 명단 1부. 끝.

서울특별시도시기반시설본부 공고 제2014-9호

설계공모(현상설계) 공고

	용 역 명	◦ 남부도로사업소 청사 설계용역
	용역개요	◦ 위치 : 서울특별시 금천구 시흥3동 961-5외 7필지 ◦ 대지면적 : 2,341㎡ ◦ 연 면 적 : 지하1/지상5층, 연면적 6,274㎡ ±3% 내외 ◦ 건 폐 율 : 60% 이내 ◦ 용 적 율 : 200% 이내
	용역범위	◦ 대지 전체에 대한 배치계획 ◦ 기본(계획, 중간) 및 실시설계로서 건축,기계,전기,통신,토목,조경,소방,전시 등 일체의 설계
	추정공사비	◦ 14,166백만원 (부가세 포함)
	추정설계비	◦ 717백만원 (부가세 포함)
	설계공모 목 적	◦ 건축설계자를 선정함에 있어 공모를 통하여 보다 창의적이고, 주변 환경과의 조화와 예술성, 작품성을 갖춘 설계안을 제출한 자를 선정함으로써 보다 독창적이고 아름다운 건물을 건립하여 건축문화의 발전과 공공복리의 증진에 이바지하고자 함
	공모방식	◦ 일반공개공모
	응모자격	설계공모지침서 참조
	현장설명일	◦ 현장설명 : 2015년 1월 6일(화) 16:00, (서울시 서소문별관 후생동 4층 대강당)
	응모신청서 등록	◦ 기간 : 2015년 1월 8일(목) ～ 2015년 1월 9일(금) (근무시간 내) ◦ 장소 : 서울특별시 도시기반시설본부 건축부
	등록서류	설계공모지침서 참조
	심사방법 및 구성	◦ 설계공모심사위원회를 구성, 작품심사 ◦ 서울시 인터넷 홈페이지http://infra.seoul.go.kr에 심사위원명단 공개
	작품접수	◦ 2015년 3월 5일(목) 17:00까지 (서울특별시 도시기반시설본부 건축부)
	입상작품 및 보 상	◦ 최우수작(당선작) 1점 : 상장 및 설계용역 수의계약권 ◦ 우수작 및 가작 : 응모작품수에 따라 상장 및 보상금 지급
	기 타	.◦ 설계지침서 및 과업내용서 등 열람(서울특별시 도시기반시설본부 홈페이지) http://infra.seoul.go.kr → 기반시설건설→기반시설소통방→현장자료실 ◦ 입찰보증금은 없음 ◦ 계약에 관한 사항은 “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률”에 의함
	문 의 처	◦ 주소 : 서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지 프리미어플레이스 빌딩 13층) 서울특별시 도시기반시설본부 건축부 ◦ 전화 : 02) 3708-2635, 전송 : 02) 3708-2659
	서울특별시 도시기반시설본부장

경부고속도로 및 올림픽대로 상 7개 시설물 포장개량공사

(도로시설과/남부도로사업소 교량보수과)

□ 사업개요

◦위    치 : 자동차전용도로 4개 시설물

- 경부고속도로상 : 상촌고가, 우면고가, 양재천교, 서초고가

◦규    모 : 교면포장 전면개량 36.9a

◦기    간 : 2014. 10. 21 ~ 2015. 03.19

◦총사업비 : 675,000천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설과. 도로시설관리. 자동차전용도로교량관리. 경부고속도로 및 올림픽대로 상 7개 시설물 포장개량공사. 시설비 및 부대비. 시설비(도시개발특별회계)

- 이월세부내역                                           (단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		675,000,000	675,000,000	557,665,800	0	557,665,800	117,334,200
공 사 비		641,240,000	641,240,000	548,779,800	0	548,779,800	92,460,200
	도 급 비	602,200,000	602,200,000	516,509,600	0	516,509,600	85,690,400
	관 급 비	39,040,000	39,040,000	32,270,200	0	32,270,200	6,769,800
보 상 비
이전비․기타		33,760,000	33,760,000	8,886,000	0	8,886,000	24,874,000

◦이월사유

- 방수․포장공법, 발주방법 등 검토 장기소요 및 아스팔트 품질확보를 위한 동절기 공사중단에 의해 공사 지연

강선보강교량 유지관리방안 수립

(도로시설과)

□ 사업개요

◦사업기간 : 2014. 11. 17 ~ 2015. 09. 26

◦사업내용 : 유지관리 기준정립, 처짐(균열) 관리강화 방안, 정밀조사 기법 및  조치방안 정립 등 PSC 박스거더교 유지관리매뉴얼 작성

◦용 역 비 : 300,000천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설과. 도로시설관리. 자동차전용도로교량관리. 강선보강교량 유지관리 방안 연구. 시설비 및 부대비. 시설비(도시개발특별회계)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		300,000,000	260,137,000	245,025,000	0	245,025,000	54,975,000
용 역 비		300,000,000	260,137,000	245,025,000	0	245,025,000	54,975,000
	도 급 비	300,000,000	260,137,000	245,025,000	0	245,025,000	54,975,000
	관 급 비
이전비.기타

◦이월사유

- 용역 과업세부내용 선정을 위한 자체검토, 외부기관의뢰, 외부자문회의 등 수차례 사전검토와 2회 입찰 유찰에 따른 용역착수 지연(‘14.12.1)으로 ’15.09.30 완료 예정

노량교 슬래브(난간하부)보수공사

(도로시설과/남부도로사업소 교량보수과)

□ 사업개요

◦위    치 : 동작구 본동 ~ 흑석동(올림픽대로 노량교)

◦규    모 : 슬래브열화부제거 및 단면보수 1,955㎡, 수중기초 보수 103㎡

◦기    간 : 2014. 6. 25 ～ 2015. 3. 18(15.1월말 현재 5%)

◦총사업비 : 1,060,000천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설과. 도로시설관리. 자동차전용도로 교량관리. 노량교 슬래브(난간하부) 보수공사. 시설비 및 부대비. 시설비(도시개발특별회계)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,060,000,000	1,060,000,000	1,040,719,430	91,859,000	948,860,430	19,280,570
공 사 비		918,887,000	918,887,000	918,885,000	43,659,000	875,226,000	2,000
	도 급 비	918,887,000	918,887,000	918,885,000	43,659,000	875,226,000	2,000
	관 급 비	0	0	0	0	0	0
폐기물처리		10,010,000	10,010,000	6,930,000	0	6,930,000	3,080,000
이전비, 전기공사		76,103,000	76,103,000	66,704,430	0	66,704,430	9,398,570
설계비		55,000,000	55,000,000	48,200,000	48,200,000	0	6,800,000

◦이월사유

- 설계용역, 계약심사 등 사전절차 이행으로 하반기 공사착공(‘14. 10.) 되었으며 동절기 공사품질확보를 위한 공사 중지로 ’15.3. 준공예정

- ‘14.08.29 : 계약심사 완료

- ‘14.09.19 : 공사발주계획 및 시행

- ‘14.10.14 : 공사계약

- ‘14.12.19 : 동절기 공사중지

- ‘13.11.30 : 1차공사 교면포장 실적(현 공정 73%, 114/156a)

탄천2고가교 정밀안전진단용역

(도로시설과/동부도로사업소 교량보수과)

□ 사업개요

◦위    치 : 강남구 청담동~일원동

◦규    모 : B= 6.61～34.7m m, L=6,343.5m

◦기    간 : 2014. 4. 15 ~ 2015. 4. 9(15.1월말 현재 공정율90%)

◦총사업비 : 518,200천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설과. 도로시설관리. 도로시설물 운영. 시설물 안전점검 및 진단. 시설비 및 부대비. 시설비.(도시개발특별회계)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		포괄예산	518,200,000	518,200,000	207,000,000	311,200,000	0
용 역 비			518,200,000	518,200,000	207,000,000	311,200,000	0
	도 급 비		518,200,000	518,200,000	207,000,000	311,200,000	0
	관 급 비
보 상 비
이전비.기타

◦이월사유

- 현장조사 및 기술용역타당성심사 등 사전절차 이행에 따른 용역 발주 지연 (완료 예정일 ’15.4.9)

홍지문터널 정밀안전진단용역

(도로시설과/북부도로사업소 교량보수과)

□ 사업개요

◦위    치 : 서울시 서대문구 홍은동 ~ 종로구 평창동

◦규    모 : 상행선(L=1,892m), 하행선(L=1,874m)

◦기    간 : 2014. 4. 24. ～ 2015. 3. 31(‘15.2월말 현재 공정율 90%)

◦총사업비 : 314,300천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설과. 도로시설관리. 도로시설물운영. 시설물 안전점검 및 진단. 시설비 및 부대비. 시설비.(도시개발특별회계)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		포괄예산	314,330,000	314,330,000	0	314,330,000	0
용 역 비			314,330,000	314,330,000	0	314,330,000	0
	도 급 비		314,330,000	314,330,000	0	314,330,000	0
	관 급 비
보 상 비
이전비.기타

◦이월사유

- 홍지문터널 균열보수공사 시행에 따른 보수․보강부위 외관조사 등 추가 과업 발생으로 용역기간 연장(‘15.3.31.준공예정)

욱천복개1구간 정밀안전진단용역

(도로시설과/서부도로사업소 시설보수과)

□ 사업개요

◦위    치 : 서울시 용산구 의주로2가16-4~문배동30-17

◦규    모 : B=8.9~18m, L=3,018m

◦기    간 : 2014.5.12 ～ 2015.5.11(15.2월말 현재 공정율 80%)

◦총사업비 : 275,560천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설과. 도로시설관리. 도로시설물운영. 시설물 안전점검 및 진단. 시설비 및 부대비, 시설비.(도시개발특별회계)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		포괄예산	275,560,000	275,560,000	137,780,000	137,780,000	0
용 역 비			275,560,000	275,560,000	137,780,000	137,780,000	0
	도 급 비		275,560,000	275,560,000	137,780,000	137,780,000	0
이전비․기타

◦이월사유

- 최종 자문회의 및 건설기술심의(2015.1.26) 결과 재심의 의결사항 검토 보완·반영에 필요한 용역수행 기간 추가 소요

․구조검토 추가 실시, 현장 보완 및 균열 등 재조사

․탄산화, 염화물함유량 시료 채취 시험

․보고서 보완 및 심의 재신청 등

대방천복개 정밀안전진단용역

(도로시설과 / 남부도로사업소 시설보수과)

□ 사업개요

◦위    치 : 신길6동479호~도림2동265호

◦규    모 : B=16m~26m, L=2,380m(박스)

◦기    간 : 2014.5.9～ 2015.3.31.(15.2월말 현재 공정율 98%)

※ 준공기한 2015.3.31. 연기예정

◦총사업비 : 243,320천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설과. 도로시설관리. 도로시설물운영. 시설물 안전점검 및 진단. 시설비 및 부대비, 시설비.(도시개발특별회계)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		포괄예산	243,320,000	243,320,000	67,150,000	176,170,000	0
용 역 비			243,320,000	243,320,000	67,150,000	176,170,000	0
	도 급 비		243,320,000	243,320,000	67,150,000	176,170,000	0
이전비․기타

◦이월사유

- 자문회의 결과에 의한 구조해석 재검토(철근실측, 재하시험 등) 및 기술심의 일정(‘15.2.12)에 따른 후속 조치 추가 용역기간 소요

도림천1복개 외 1개소 정밀안전진단용역

(도로시설과 / 남부도로사업소 시설보수과)

□ 사업개요

◦위    치

- 도림천1복개 구조물 : 신림동 산32-1호 ~ 228-1호

- 사당천복개 구조물 : 서초구 방배동752-7호~752-2호

◦규    모

- 도림천1복개 : B=13m~23m, L=2,190m(라멘)

- 사당천복개 : B=13m, L=2,970m(박스)

◦기    간 : 2014.5.9～ 2015.3.31.(15.2월말 현재 공정율 98%)

※ 준공기한 2015.3.31. 연기예정

◦총사업비 : 247,959천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설과. 도로시설관리. 도로시설물운영. 시설물 안전점검 및 진단. 시설비 및 부대비, 시설비.(도시개발특별회계)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		포괄예산	247,959,000	247,959,000	74,387,700	173,571,300	0
용 역 비			247,959,000	247,959,000	74,387,700	173,571,300	0
	도 급 비		247,959,000	247,959,000	74,387,700	173,571,300	0
이전비․기타

◦이월사유

- 자문회의 결과에 의한 구조해석 재검토(철근실측, 재하시험 등) 및 기술심의 일정(‘15.2.12)에 따른 후속 조치 추가 용역기간 소요

도림천4복개구조물 정밀안전진단용역

(도로시설과 / 남부도로사업소 시설보수과)

□ 사업개요

◦위    치 : 대림동1101-7(우안) ~ 611(우안)

◦규    모 : B=9m~22.5m, L=2,013m(라멘)

◦기    간 : 2014.5.9～ 2015.3.31.(15.2월말 현재 공정율 98%)

※ 준공기한 2015.3.31. 연기예정

◦총사업비 : 227,623천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설과. 도로시설관리. 도로시설물운영. 시설물 안전점검 및 진단. 시설비 및 부대비, 시설비.(도시개발특별회계)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		포괄예산	227,623,000	227,623,000	58,223,400	169,399,600	0
용 역 비			227,623,000	227,623,000	58,223,400	169,399,600	0
	도 급 비		227,623,000	227,623,000	58,223,400	169,399,600	0
이전비․기타

◦이월사유

- 자문회의 결과에 의한 구조해석 재검토(철근실측, 재하시험 등) 및 기술심의 일정(‘15.2.11)에 따른 후속 조치 추가 용역기간 소요

석촌지하차도 정밀안전진단용역

(도로시설과/동부도로사업소 시설보수과)

□ 사업개요

◦위    치 : 송파구 석촌동 248번지

◦규    모 : 폭 17.6m, 길이 490m(U-Type 300, BOX190m)

◦기    간 : 2014.09.01.~2015.04.20.(현재공정 80%)

◦총사업비 : 142,800천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설과. 도로시설관리. 도로시설물운영. 시설물 안전점검 및 진단. 시설비 및 부대비, 시설비.(도시개발특별회계)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		포괄예산	142,800,000	142,800,000	71,400,000	71,400,000	0
용 역 비			142,800,000	142,800,000	71,400,000	71,400,000	0
	도 급 비		142,800,000	142,800,000	71,400,000	71,400,000	0
이전비․기타

◦이월사유

- 본 용역은 석촌지하차도 공동발생에 따라 긴급히 시행한 정밀안전진단으로서 하반기 발주(‘14.9.1) 되었으며 전문가 자문 및 기술심의 등 용역수행 절차를 위한 필수기간 소요로 ’15.4.20 준공예정

가락지하차도외 2개소 지반조사 용역

(도시안전본부 도로시설과)

□ 사업개요

◦위    치 : 가락지하차도, 송파지하차도, 국회앞지하차도

◦규    모 : 표면파탐사 489점, 시추공 및 탄성파탐사 4공

◦기    간 : 착수일로부터 90일(2015. 1월 현재 재입찰 공고 준비 중)

◦총사업비 : 111,100천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설과. 도로시설관리. 도로시설물운영. 시설물 안전점검 및 진단. 시설비 및 부대비, 시설비.(도시개발특별회계)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		포괄예산	111,100,000	-	-	111,100,000 (111,100,000)	0
용 역 비			111,100,000	-	-	111,100,000 (111,100,000)	0
	도 급 비		111,100,000	-	-	111,100,000 (111,100,000)	0
이전비․기타

◦이월사유

- 본 용역은 석촌지하차도 공동발생 사고에 따라 지하차도의 안전성을 검토하기 위해 하반기(‘14.11)에 긴급히 시행한 지반조사 용역으로  입찰 적격심사 결과 대상업체(144개) 모두 적격점수 미달로 유찰되어 예산 사고이월 및 ’15년에 사업 추진 예정

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 가락지하차도외 2개소 지반조사 용역

□ 사업기간 : 착수일로부터 90일

□ 예산과목 : 도로시설과. 도로시설관리. 도로시설물운영. 시설물 안전점검 및 진단. 시설비 및 부대비. 시설비

□ 지출원인행위 미필사유

- 본 용역은 석촌지하차도 공동발생 사고에 따라 지하차도의 안전성을 검토하기 위해 하반기(‘14.11)에 긴급히 시행한 지반조사 용역으로 입찰 적격심사 결과 대상업체(144개) 모두 적격점수 미달로 유찰되어 예산 사고이월 및 ’15년에 사업 추진 예정

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계		111,100,000
용역비	지하차도(가락, 송파, 국회앞) 지반조사	111,100,000

확 인 자 : 터널복개팀장 김 두 석 (인)

조 사 자 :    시설 6급  이 정 국 (인)

잠실대교 정밀안전진단 용역

(도로시설과/동부도로사업소 교량보수과)

□ 사업개요

◦위    치 : 서울특별시 광진구 자양동 ~ 송파구 잠실동 27

◦규    모 : 본선(L=1,280m), 램프(L=345m)

◦기    간 : 2014. 4. 21. ~ 2015. 4. 14.(359일간)

◦총사업비 : 257,050천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설과. 도로시설관리. 도로시설물운영. 시설물 안전점검 및 진단. 시설비 및 부대비, 시설비.(도시개발특별회계)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (B-(D+E))
계		포괄예산	257,050,000	257,050,000	-	257,050,000	0
용 역 비			257,050,000	257,050,000	-	257,050,000	0
	도 급 비		257,050,000	257,050,000	-	257,050,000	0
	관 급 비
보 상 비
이전비․기타

◦이월사유

- 용역 최종 자문회의 의견 검토기간 소요 및 건설기술심의위원회 심의일정에 따라 용역수행 기한이 추가 소요되어 준공기한 연기

․ 당   초 : 2014. 4. 21. ~ 2015. 2. 14.(300일간)

․ 변   경 : 2014. 4. 21. ~ 2015. 4. 14.(359일간)

도로시설물(자치구 위탁관리) 긴급보수

《노보텔 앞 보도육교 철거공사》

(도로시설과/금천구청 도로과)

□ 사업개요

◦위    치 : 서울시 금천구 시흥대로 391 앞

◦규    모 : B=4m, L=45m

◦기    간 : 2014.12.24 ～ 2015.6.23(15.2월말 현재 공정율 5%)

◦총사업비 : 147,000천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설과. 도로시설관리. 도로시설물운영. 도로시설물(자치구위탁관리)긴급보수. 시설비 및 부대비. 시설비.(도시개발특별회계)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계			147,000,000	130,332,750		130,872,750 ( 540,000)	16,127,250
공 사 비			147,000,000	130,332,750		130,332,750 ( 0)	16,127,250
	도 급 비		146,460,000	130,332,750		130,332,750 ( 0)	16,127,250
이전비․기타		540,000	540,000			540,000 (540,000)

◦이월사유

- 본 사업은 자치구 위탁관리 시설물 중 돌발적 조치 사항 발생 시 긴급 지원하는 예산으로 2014.12월 공사착공하여 교통심의․계약심사 등 사전절차 및 동절기 굴착통제에 의한 연내 사업완료 불가

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 노보텔앞 보도육교 철거공사

□ 사업기간 : 2014.12.24 ～ 2015.6.23

□ 예산과목 : 도로시설관리, 지하차도관리(도시개발특별회계), 창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 지출원인행위 미필사유

- 본 사업은 자치구 위탁관리 시설물 중 돌발적 조치 사항 발생 시 긴급 지원하는 예산으로 2014.12월 공사착공하여 신호 등 신설 및 이설에 따른 검사수수료 미지급

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계		540,000
수수료	신호등 신설 및 이설에 따른 검사수수료	540,000

확 인 자 :      직)도로과장        성명) 모완수(인)

조 사 자 :      직)시설7급        성명) 변성욱(인)

내부순환로 내진보강(홍제천고가교)

(도로시설과/서부도로사업소 교량보수과)

□ 사업개요

◦위    치 : 성산대교 북단 일대

◦규    모 : 폭 1~2차로, 연장3.2km

◦기     간 : 2014. 05. 29 ~ 2015. 08. 31(‘14.12월말 현재 공정율 15%)

◦총사업비 : 2,000,000천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설과. 도로시설관리. 도로시설물 운영. 내부순환로 내진보강. 시설비 및 부대비, 시설비.(도시개발특별회계)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '14이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		2,000,000,000	1,846,527,000	1,810,116,000	466,774,000	1,343,342,000	189,884,000
공 사 비		2,000,000,000	1,846,527,000	1,810,116,000	466,774,000	1,343,342,000	189,884,000
	도 급 비
	관 급 비
보 상 비
이전비.기타

◦이월사유

- 현장여건에 맞는 면진받침 자재선정 등 공법 및 안전성 검토에 장기간 소요되어 공사지연(‘15.8. 준공예정)

강변북로 사면 보수보강공사

(도로시설과/광진구청 도로과)

□ 사업개요

◦위    치 : 광진구 자양동 793 ~ 자양동 645-5번지 간

◦규    모 : 노후 석축정비 H=1~4m, L=980m

◦기    간 : 2014. 10. 16 ~ 2015. 04. 13

◦총사업비 : 1,800백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설과. 도로시설관리. 도로시설물운영. 강변북로 도로사면 보수보강(자양동 853-3~645-5). 시설비및부대비. 시설비.(도시개발특별회계)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,800,000,000	1,800,000,000	1,766,452,590	200,148,950	1,566,303,640	33,547,410
공 사 비		1,699,582,000	1,699,582,000	1,681,147,590	186,145,950	1,495,001,640	18,434,410
	도 급 비	1,534,997,000	1,534,997,000	1,516,790,000	175,758,000	1,341,032,000	18,207,000
	관 급 비	164,585,000	164,585,000	164,357,590	10,387,950	153,969,640	227,410
보 상 비
이전비․기타		100,418,000	100,418,000	85,305,000	14,003,000	71,302,000	15,113,000

◦이월사유

- 공사품질 확보(도로사면 석축정비)를 위한 동절기 공사중지로 공사 지연(‘15.4.13 준공예정)

옥수 금호터널 보도 차단벽 설치공사

(도로시설과/성동도로사업소 시설보수과)

□ 사업개요

◦위    치 : 옥수, 금호터널

◦규    모 : 보도차단벽 설치 960m

◦기    간 : 2014. 4. 2 ～ 2015. 6. 30(15.2월말 현재 공정율 5%)

◦총사업비 : 1,550,000천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설과. 도로시설관리. 터널시설관리. 옥수금호터널 보도 차단벽 설치. 시설비 및 부대비. 시설비.(도시개발특별회계)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,550,000,000	1,550,000,000	1,508,661,490	54,744,000	1,453,917,490	41,338,510
공 사 비		1,450,455,690	1,450,455,690	1,450,455,690		1,450,455,690	0
	도 급 비	391,958,500	391,958,500	391,958,500		391,958,500	0
	관 급 비	1,058,497,190	1,058,497,190	1,058,497,190		1,058,497,190	0
용 역 비		58,205,800	58,205,800	58,205,800	54,744,000	3,461,800	0
보 상 비
이전비․기타		41,338,510	41,338,510				41,338,510

◦이월사유

- 실시설계 중 유관기관 협의로 용역 지연(2014.4.1. ~ 2014.11.26.)되어 ‘14.12.18. 공사 계약·착수 하였으며 동절기 콘크리트공사 중단에 따라 연내 사업완료 불가

자하문터널 보수공사

(도로시설과/북부도로사업소 시설보수과)

□ 사업개요

◦위    치 : 서울시 종로구 청운동 산4-6 ~ 부암동(자하문터널 내부)

◦규    모 : 내오염 도장 13,201㎡, 균열보수 155m, 타일철거 및 재설치

◦기    간 : 2014. 7. 2. ∼ 2015. 5. 31.

◦총사업비 : 1,000,000천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설과. 도로시설관리. 터널시설관리. 자하문터널 보수공사. 시설비 및 부대비. 시설비.(도시개발특별회계)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,000,000,000	1,000,000,000	999,700,000	752,100,500	247,599,500	300,000
공 사 비		1,000,000,000	1,000,000,000	999,700,000	752,100,500	247,599,500	300,000
	도 급 비	1,000,000,000	1,000,000,000	999,700,000	752,100,500	247,599,500	300,000
이전비․기타		-	-	-	-	-	-

◦이월사유

- 공사 진행 중 ‘14년 11월 타일철거 및 재설치 등 추가 공종이 발생하여 공사기간 연장이 불가피

마들지하차도 외 3개소 보수 및 포장개량공사

(도로시설과/북부도로사업소 교량보수과)

□ 사업개요

◦위     치 : 노원구 일원(마들,노원,상계 지하차도- 동부간선도로상)

◦규    모 : 아스팔트 포장 A=48.67a, 신축이음보수 166m, 표면보수 2,209㎡ 등

◦총사업비 : 1,500,000천원

◦사업기간 : 2014. 5. 2 ～ 2015. 03. 15

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설과. 도로시설관리. 지하차도시설 관리. 마들지하차도 외 3개소 보수 및 포장개량공사. 시설비 및 부대비. 시설비.(도시개발특별회계)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,500,000,000	1,496,370,000	1,325,226,370	42,479,000	1,282,747,370	174,773,630
공 사 비		1,412,830,000	1,409,200,000	1,260,512,370	0	1,260,512,370	152,317,630
	도 급 비		1,168,200,000	1,023,060,000	0	1,023,060,000
	관 급 비		241,000,000	237,452,370	0	237,452,370
폐기물처리비		25,300,000	25,300,000	22,235,000	0	22,235,000	3,065,000
이설비		13,200,000	13,200,000	0	0	0	13,200,000
설계비		48,670,000	48,670,000	42,479,000	42,479,000	0	6,191,000

◦이월사유

- 설계용역, 계약심사 등 사전절차 이행으로 하반기 공사착공(‘14. 11.) 되었으며 동절기 공사품질확보를 위한 공사 중지로 ’15.3. 준공예정

창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치공사

(도로시설과/북부도로사업소 시설보수과)

□ 사업개요

◦위    치 : 서울시 도봉구 창동 75-9(창동지하차도)

◦규    모 : B=20.5m, L=306m

◦기    간 : 2014. 11. 6 ～ 2015. 6. 30(15.2월말 현재 공정율 5%)

◦총사업비 : 1,740,127천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설과. 도로시설관리. 지하차도관리. 창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치. 시설비 및 부대비. 시설비.(도시개발특별회계)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,773,552,000	1,740,127,000	1,214,337,050	383,971,580	1,243,655,120 (413,289,650)	145,925,300
공 사 비		1,023,466,770	990,041,770	877,541,470	47,176,000	830,365,470 ( )	0
	도 급 비	886,922,000	853,497,000	747,258,700		747,258,700 ( )	139,663,300
	관 급 비	83,106,770	83,106,770	83,106,770		83,106,770 ( )
	설계용역비	53,438,000	53,438,000	47,176,000	47,176,000		6,262,000
폐기물처리비		7,480,000	7,480,000			7,480,000 (7,480,000)
이전비․기타		742,605,230	742,605,230	336,795,580	336.795,580	405,809,650 (405,809,650)

◦이월사유

- 공법선정, 기술심의 및 계약심사 등 사전절차 지연으로 하반기 발주되었으며 공사품질 확보를 위한 동절기 공사중지로 ‘15. 6월 준공예정

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치공사

□ 사업기간 : 2014. 11. 6 ～ 2015. 6. 30

□ 예산과목 : 도로시설과. 도로시설관리. 지하차도관리. 창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치. 시설비 및 부대비. 시설비.

□ 지출원인행위 미필사유

- ‘14.11월 공사착공 및 동절기 굴착통제에 따른 지장물 이설이 불가하여 동절기 후 원인행위 및 완료 예정

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계		413,289,650
공사비	폐기물 처리비	7,480,000
공사비	통신,한전 등 지하지장물 이설비	405,809,650

확 인 자 :      직)시설보수과장   성명) 정재현(인)

조 사 자 :      직)시설6급        성명) 김영원(인)

창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치공사

(도로시설과/북부도로사업소 기전과)

□ 사업개요

◦위    치 : 서울시 도봉구 창동 75-9(창동지하차도)

◦규    모 : 엘리베이터 제작구매 1식, 부대공사(전기,통신) 1식

◦기    간 : 2014. 11. 28 ～ 2015. 6. 30(15.2월말 현재 공정율 5%)

◦총사업비 : 226,448천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설과. 도로시설관리. 지하차도관리. 창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치. 시설비 및 부대비. 시설비.(도시개발특별회계)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		226,448,000	226,448,000	207,460,680	0	210,069,680 (2,609,000)	16,378,320
공 사 비		226,448,000	223,839,000	207,460,680	0	207,460,680 ( )	16,378,320
	전기공사	70,417,000	70,417,000	63,887,730	0	63,887,730 ( )	6,529,270
	통신공사	33,759,000	33,759,000	29,878,680	0	29,878,680 ( )	3,880,320
	제작구매설치	119,663,000	119,663,000	113,694,270	0	113,694,270 ( )	5,968,730
폐기물처리비
이전비(전기)		2,609,000	2,609,000	0	0	2,609,000 (2,609,000)	0

◦이월사유

- 공법선정, 기술심의 및 계약심사 등 사전절차 지연으로 하반기 발주되었으며 공사품질 화보를 위한 동절기 공사중지로 ‘15. 6월 준공예정

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치공사

□ 사업기간 : 2014. 11. 28 ～ 2015. 6. 30

□ 예산과목 : 도로시설관리. 지하차도관리. 창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치. 시설비 및 부대비. 시설비

□ 지출원인행위 미필사유

- ‘14.11월 공사착공 및 동절기 굴착통제에 따른 지장물 이설이 불가하여 동절기 후 사업 추진할 예정으로 시설설치 전기수용신청비용은 ’15년 원인행위 및 집행 가능

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계		2,609,000
전기수용신청한전불입금	이동편의시설 신설에 따른 전기수용신청비	2,609,000

확 인 자 :      직)기전과장        성명) 이영목(인)

조 사 자 :      직)공업6급        성명) 문석기(인)

직)공업8급        성명) 백윤광(인)

남산1호터널외 5개소 노후방재설비 보완공사

(도로시설과/서부도로사업소 기전과)

□ 사업개요

◦위    치 : 서울시 용산구 한남동 772-3

◦규    모 : 한남관리실 송풍기 2대 제작설치

◦기    간 : 2014.5.30～ 2015.3.31(15.1월말 현재 공정율: 70%)

◦총사업비 : 1,300,000천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설과. 도로시설관리. 기전시설물관리. 남산1호터널 외 5개소 노후방재설비 보완공사. 시설비 및 부대비. 시설비.(도시개발특별회계)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		포괄예산	1,300,000,000	948,767,700	835,470,100	113,297,600	351,232,300
공 사 비			1,300,000,000	948,767,700	835,470,100	113,297,600	351,232,300
	도 급 비		1,300,000,000	948,767,700	835,470,100	113,297,600	351,232,300
	관 급 비
보 상 비
이전비․기타

◦이월사유

- 공법선정 등 사전절차 이행 기간 소요로 착공 지연되었고 현재 공정이 70% 진행 중에 있으나, 주요자재(송풍기)가 ‘15.02.02.이후 납품할 것으로 예상되어, 납품 후 설치기간(약 30일) 감안 ’15.3.에 준공될 예정

남산1호터널외 5개소 노후방재설비 보완공사

(도로시설과/북부도로사업소 기전과)

□ 사업개요

◦위    치 : 서울시 성북구 산871(북악터널)

◦규    모 : 젯트팬 철거 및 보강, 터널보강(20공, 그라우팅 99㎥)

◦기    간 : 2014.8.13～ 2015.03.31(15.2월말 현재 공정율 50%)

◦총사업비 : 283,000천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설과. 도로시설관리. 기전시설물관리. 남산1호터널 외 5개소 노후방재설비 보완공사. 시설비 및 부대비. 시설비.

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		포괄예산	283,000,000	263,040,370	124,040,370	139,000,000	19,959,630
공 사 비			283,000,000	263,040,370	124,040,370	139,000,000	19,959,630
	도 급 비		283,000,000	263,040,370	124,040,370	139,000,000	19,959,630
	관 급 비
보 상 비
이전비․기타

◦이월사유

- 터널 천공작업 시 예상치 못한 누수가 발생되어, 결빙 및 안전사고 우려가 있고 동절기 시공에 따른 품질의 확보에 어려움이 예상되어 공사 중지

도로시설물(교량) 일상유지 보수공사

(교량안전과/교통운영과)

□ 사업개요

◦위치 : 서울역 주변 일대

◦규모 : 서울역 주변 종합교통체계 개선대책 1식

◦기간 : 2014.10.13 ～ 2015.6.9 (15.2월말 현재 공정율50%)

◦총사업비 : 92백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 교량시설물운영, 도로시설물(교량)일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		92,400,000	92,400,000	80,720,000	40,360,000	40,360,000	11,680,000
용 역 비				80,720,000	40,360,000	40,360,000
	도 급 비			80,720,000	40,360,000	40,360,000
이전비및기타

◦이월사유

- 서울역 고가 관리방안이 ‘철거’에서 ‘재생’으로 집중 논의되고(‘14.7~8), 서울역고가 프로젝트 추진계획(시장방침 제230호, ‘14.8.27)이 확정됨에 따라,

- 서울역 주변 교통여건 변화에 대응하기 위한 교통체계 개선방안 마련이 요구되어 용역 진행중임(과업기간 ‘14.10.~’15.6월로 준공기한 미도래)

첨부  1) 방침서 및 계약서 각 1부

2) 지출원인행위 및 지출부 각1부

한강교량 일상유지보수공사

(교량안전과)

□ 사업개요

◦위    치 : 동호대교, 성수대교, 영동대교, 광진교

◦규    모 : 한강교량 일상유지보수

◦기    간 : 2014.04 ～  2015.04 (15.2월말 현재 공정율 80%)

◦총사업비 : 1,205백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 한강교량관리, 한강교량 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,205,234,000	1,205,234,000	1,173,850,790	844,716,355	360,517,645 (31,383,210)
공 사 비				1,164,500,570	835,366,135	329,134,435
	도 급 비			1,121,984,200	792,849,765	329,134,435
	관 급 비			42,516,370	42,516,370	0
이전비및기타				9,350,220	9,350,220	31,383,210 (31,383,210)

◦이월사유

- 한강교량인 동호대교의 남단 진입램프 슬래브 전면교체공사 추진 중, 하천(한강) 공사로 우기기간(7월~9월) 동안 공사 지연 및 가교 기초공사 반대 민원 발생에 따른 민원해소 기간소요로 공사가 지연되어 절대 공기부족에 따라 사고이월함.(준공예정일 ‘15.4.30)

첨부  1) 방침서 및 계약서 각 1부

2) 지출원인행위 및 지출부 각1부

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 한강교량 일상유지보수공사

□ 사업기간 : 2014. 4 ~ 2015. 4

□ 예산과목 : 교량관리, 한강교량관리, 한강교량일상유지보수,

시설비 및 부대비, 시설비

□ 지출원인행위 미필사유

- 동호대교 남단 진입램프 개량공사중 진입램프에 설치되어있는

통신선로이설등에 소요되는 이전비 집행시기 미도래로 지출원인행위 미필

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계		31,383,210
관급비	통신선로이설 : 31,383,210원	31,383,210

확 인 자 :     직) 교량안전과장  성명) 이용심(인)

조 사 자 :     직) 시설6급       성명) 우창원(인)

한강교량일상유지보수공사 책임감리용역

(교량안전과)

□ 사업개요

◦위치 : 광진교 등 한강교량 20개소

◦규모 :

◦기간 : 2014. 4. 10 ～ 2017. 4. 39(1차년도 ‘15.5.31까지)

◦총사업비 : 1,198백만원(1차년도 400백만원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 한강교량관리, 한강교량일상유지보수, 시설비 및 부대비, 감리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		400,000,000	400,000,000	400,000,000	217,250,000	182,750,000	0
용 역 비				400,000,000	217,250,000	182,750,000	0
	도 급 비			400,000,000	217,250,000	182,750,000	0
	관 급 비
이전비․기타

◦이월사유

- 본 용역은 장기계속 계약으로 시행하는 용역으로 2014년 낙찰차액분을 함께 계약하여 절대공기 부족에 따라 사고이월함.

첨부  1) 방침서 및 계약서 각 1부

2) 지출원인행위 및 지출부 각1부

동호대교 보수공사

(교량안전과)

□ 사업개요

◦위    치 : 동호대교남단 진입램프(강남구 압구정동)

◦규    모 : 바닥판교체 B=7.5m,L=60m

◦기    간 : 2014.07 ～  2015.04 (15.2월말 현재 공정율 10%)

◦총사업비 : 1,000백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 한강교량관리, 동호대교보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,000,000,000	1,000,000,000	959,571,320	261,085,000	738,915,000 (40,428,680)	0
공 사 비				905,513,470	220,330,000	685,183,470
	도 급 비			833,254,880	220,330,000	612,924,880
	관 급 비			72,258,590		72,258,590
설계용역비				40,755,000	40,755,000
폐기물용역비				13,302,850		13,302,850
이전비및기타						40,428,680 (40,428,680)

◦이월사유

- 동호대교 남단 진입램프 슬래브 전면교체 공사로 실시설계 기간 소요, 우기기간 공사 중단 및 공사 반대 민원 해소기간 소요로 절대공기 부족에 따라 사고이월함.(준공예정일 ‘15.4.30)

첨부  1) 방침서 및 계약서 각 1부

2) 지출원인행위 및 지출부 각1부

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 동호대교 보수공사

□ 사업기간 : 2014. 7 ~ 2015. 4

□ 예산과목 : 교량관리, 한강교량관리, 동호대교 보수공사,

시설비 및 부대비, 시설비

□ 지출원인행위 미필사유

- 관급자재(개질아스팔트콘크리트)를 공기에 맞추어 조달 구매하였으나 유찰되어 계약되지 않아 원인행위를 할수 없었음.

- 동호대교 남단 진입램프 개량공사중 타기관 지장물(수도,통신등) 이설등에 소요되는 이전비 집행시기 미도래로 지출원인행위 미필

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계		40,428,680
관급비	아스팔트 구매 : 32,421,000원	35,663,100
이전비	지장물 이설 1식 = 4,765,580원	4,765,580

확 인 자 :     직) 교량안전과장  성명) 이용심(인)

조 사 자 :     직) 시설6급       성명) 우창원(인)

성산대교 성능개선

(교량안전과)

□ 사업개요

◦위치 : 성산대교

◦규모 : 안전에 문제가 되고 있는 바닥판 교체 등 1등교로 성능개선

- 슬래브 전면교체(480@), 구조물 보강(거더, 트러스, 브레이싱 등), 가교설치 1,040m 등

◦기간 : 2013.11.1～ 2015.10.31.(70%-15.1월말 현재 공정율)

◦총사업비 : 2,490백만원(‘14년 547백만원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 한강교량관리, 성산대교 성능개선, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		547,000,000	547,000,000	547,000,000		547,000,000
공 사 비
	도 급 비
	관 급 비
설 계 비				547,000,000		547,000,000

◦이월사유

- 성산대교 성능개선 사업을 위한 기본 및 실시설계용역 추진중으로 추가 조사 시행 등으로 용역을 2015.10월까지 시행함에 따른 절대공기 부족으로 사고이월함.

첨부  1) 방침서 및 계약서 각 1부

2) 지출원인행위 및 지출부 각1부

성산대교 성능개선 실시설계 감리용역

(교량안전과/도시기반시설본부 토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 성산대교

◦규모 : 안전에 문제가 되고 있는 바닥판 교체 등 1등교로 성능개선

- 슬래브 전면교체(480@), 구조물 보강(거더, 트러스, 브레이싱 등), 가교설치 1,040m 등

◦기간 : 2014.12.22～ 2015.10.21.

◦총사업비 : 300백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 한강교량관리, 성산대교 성능개선, 시설비 및 부대비, 감리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		300,000,000	248,300,000	214,957,000	0	214,957,000	85,043,000
공 사 비
	도 급 비
	관 급 비
설 계 비				214,957,000	0	214,957,000	85,043,000
이전비․기타

◦이월사유

- 성산대교 성능개선 사업을 위한 기본 및 실시설계용역 추진중으로 추가 조사 시행 등으로 용역을 2015.10월까지 시행함에 따른 절대공기 부족으로 사고이월함.

첨부  1) 방침서 및 계약서 각 1부

2) 지출원인행위 및 지출부 각1부

동호대교 기초구조물(우물통)보수공사

(교량안전과)

□ 사업개요

◦위    치 : 동호대교(성동구 옥수동 ~ 강남구 압구정동)

◦규    모 : 기초구조물(우물통)보수  6개소

◦기    간 : 2014.12 ～  2015.05 (15.2월말 현재 공정율 10%)

◦총사업비 : 2,000백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 한강교량관리, 동호대교기초구조물(우물통)보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		2,000,00,000	1,911,586,000	1,895,934,260	118,038,800	1,793,547,200(15,651,740)	88,414,000
공 사 비				1,777,895,460		1,777,895,460
	도 급 비			1,753,831,000		1,753,831,000
	관 급 비			24,064,460		24,064,460
설계용역비				118,038,800	118,038,800
이전비및기타						15,651,740 (15,651,740)

◦이월사유

- 동호대교 기초구조물(우물통)보수공사로 실시설계(2014.4~9) 기간 소요 및 계약 행정기간 소요로 12월에 계약 및 착공함으로써 절대 공기부족으로 사고이월함.(준공예정일 ‘15.5.31)

첨부  1) 방침서 및 계약서 각 1부

2) 지출원인행위 및 지출부 각1부

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 동호대교 기초구조물(우물통) 보수공사

□ 사업기간 : 2014. 12 ~ 2015. 5

□ 예산과목 : 교량관리, 한강교량관리, 동호대교 기초구조물

(우물통) 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 지출원인행위 미필사유

- 동호대교 기초구조물(우물통) 보수공사시 사용예정인 바지선 운행 대여비 집행시기 미도래로 지출원인행위 미필

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계		15,651,740
이전비	바지선 운영 대여비 1식 = 15,651,740원	15,651,740

확 인 자 :     직) 교량안전과장  성명) 이용심(인)

조 사 자 :     직) 시설6급       성명) 우창원(인)

동호대교 기초구조물(우물통)보수공사 책임감리용역

(교량안전과)

□ 사업개요

◦위치 : 동호대교

◦규모 : 동호대교 기초구조물(우물통) 보수공사 책임감리 1식

◦기간 : 2014. 4.10 ～ 2015.5.31.(10%)

◦총사업비 : 88백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 한강교량관리, 동호대교 기초구조물(우물통), 시설비 및 부대비, 감리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		88,414,000	85,100,000	85,100,000	0	85,100,000	3,314,000
용 역 비				85,100,000	0	85,100,000	3,314,000
	도 급 비			85,100,000	0	85,100,000	3,314,000
	관 급 비
이전비․기타

◦이월사유

- 동호대교 기초구조물(우물통)보수공사로 실시설계(2014.4~9) 기간 소요 및 계약 행정기간 소요로 12월에 계약 및 착공함으로써 절대 공기부족으로 사고이월함.(준공예정일 ‘15.5.31)

첨부  1) 방침서 및 계약서 각 1부

2) 지출원인행위 및 지출부 각1부

한강교량 하상 잔재물 수거용역

(교량안전과)

□ 사업개요

◦위치 : 한강교량 17개소

◦규모 : 조사 및 수중측량 , 3개교량 폐콘크리트 306톤 수거

◦기간 : 2014.07.25.~2015.5.27. (공정율 65%)

◦총사업비 : 500백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 한강교량관리, 한강교량하상잔재물 조사 및 수거, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		500,000,000	464,681,000	383,201,000	183,150,000	200,051,000	116,799,000
용 역 비				383,201,000	183,150,000	200,051,000
	도 급 비			383,201,000	183,150,000	200,051,000
	관 급 비
기타,이전비

◦이월사유

- ‘14년 4월 한강교량(17개소) 주변 하상잔재물 조사계획 수립후 7월부터 11월까지 조사를 완료하였으며

- 총 공사잔재물중 ‘14년 예산 범위 내에서 수거용역 12월부터 ’15년 5월까지 수거를 진행중인 사항으로 절대공기 부족에 따라 사고이월함.

첨부  1) 방침서 및 계약서 각 1부

2) 지출원인행위 및 지출부 각1부.  끝

성내교 보수공사

(교량안전과/동부도로사업소 시설보수과)

□ 사업개요

◦위치 : 강동구 풍납동 361

◦규모 : 받침교체 90개소, 단면보수 126㎡

◦기간 : 2014.10.30.~2015.05.31(15.2월말 현재 60%)

◦총사업비 : 500백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도로시설과, 교량관리, 일반교량관리, 성내교 보수공사,

시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		500,000,000	500,000,000	447,849,280	278,449,900	169,399,380	52,150,720
공 사 비				447,849,280	278,449,900	169,399,380
	도 급 비			345,125,000	216,650,490	128,474,510
	관 급 비			102,724,280	61,799,410	40,924,870
보 상 비
이전비․기타

◦이월사유

- 공종 변경에 따른 검토 시일 소요, 발주시기 조정 및 동절기 공사중단에 따른 절대공기 부족으로 사고이월함.

첨부  1) 방침서 및 계약서 각 1부

2) 지출원인행위 및 지출부 각1부

장안교(구교) 성능개선공사

(교량안전과/도시기반시설본부 토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 동대문구 장안동 ~ 중랑구 면목동

◦규모 : 기존 교량철거 및 신설(폭 17m, 연장 218m)

◦기간 : 2014.12. ~ 2016.12. (15.1월말 현재 공정율 0%)

◦총사업비 : 20,700백만원(‘14년 1,500백만원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 교량관리, 일반교량관리, 장안교(구교) 성능개선, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000
공 사 비				1,500,000,000		1,500,000,000
	도 급 비			1,500,000,000		1,500,000,000
	관 급 비
이전비․기타

◦ 이월사유

- 설계가 8월에 완료되어 계약심사단, 계약심의, 계약심사 이행에 시일 소요되어 11월 공사발주로 절대공기 부족에 따른 사고이월

첨부  1) 방침서 및 계약서 각 1부

2) 지출원인행위 및 지출부 각1부

개봉고가 보수공사

(교량안전과/강서도로사업소 시설보수과)

□ 사업개요

◦위치 : 구로구 개봉동 353

◦규모 : 교면재포장 1,869㎡, 표면처리·단면보수· 1,733㎡ 등

◦기간 : 2013. 9. 22. ~ 2015. 03. 20.

◦총사업비 : 1,500백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 교량관리, 고가차도및입체교차로관리, 개봉고가 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (B-(D+E))
계		1,500,000,000	1,472,610,000	1,200,914,130	843,262,700	357,651,430	271,695,870
공 사 비				1,189,514,130	831,862,700	357,651,430
	도 급 비			1,145,350,430	787,699,000	357,651,430
	관 급 비			44,163,700	44,163,700	-
이전비․기타				11,400,000	11,400,000	-

◦ 이월사유

- 동 사업은 2013년부터 연차별로 공사를 계약 시행하는 사업으로 2013년차 공사가 도급업체 부도 및 계약이행보증사 시공등에 따라 공사 지연완료 되었음.(‘14.8.29)

- 2014년 보수공사는 2013년 공사와 연계 추진해야하는 공사로 발주가 지연되어 사고이월함.

※ 2014년 보수공사는 7/25 계약심사, 9/16 계약, 9/22 착공

2015.2월 현재 공정률 약 90%

첨부  1) 방침서 및 계약서 각 1부

2) 지출원인행위 및 지출부 각1부

서대문고가차도 철거공사

(교량안전과/도시기반시설본부 토목부)

□ 사업개요

◦위치 : 서대문구 충정로 1가 62(서대문역 사거리)

◦규모 : 고가차도(폭 11.5m, 연장 374m) 철거

◦기간 : 2014.12. ~ 2015.07. (15.1월말 현재 공정율 0%)

◦총사업비 : 5,700백만원(‘14년 1,000백만원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 교량관리, 고가차도 및 입체교차로 관리, 서대문고가철거, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000
공 사 비				1,000,000,000	0	1,000,000,000
	도 급 비			1,000,000,000	0	1,000,000,000
	관 급 비
이전비․기타

◦ 이월사유

- 당초 설계가 2012년 완료되어 2014년 기준으로 설계보완하고 계약심사 등 사전절차 이행에 시일 소요되어 11월 공사발주로 절대공기 부족으로 사고이월

첨부  1) 방침서 및 계약서 각 1부

2) 지출원인행위 및 지출부 각1부

서울시 지하수관리계획 수립(2차)

(물관리정책과)

□ 사업개요

◦위치 : 서울시 전역

◦근거 : 지하수법 제6조의2(지역지하수관리계획의 수립·시행)

◦기간 : 2014.3.27 ～  2015.6.30.(75%)

◦총사업비 : 311,133,740원 (※재난관리기금 113,595,330원은 별도)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 지하수 및 토양오염 관리, 서울시 지하수관리계획 수립(2차), 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	311,134,000	311,134,000	311,133,740	124,453,490	186,680,250	260
용 역 비	311,134,000	311,134,000	311,133,740	124,453,490	186,680,250	260

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유

- 준공시기 미도래(사업기간 : ‘14.3.27~’15.6.30)

- 지하굴착 관련 지하수 관리기준 수립 등 추가과업에 따른 설계변경 및 용역기간 연장으로 준공예정일이 ‘15.6.30. 임.

그린 빗물인프라 시설 구축

(물관리정책과 / 강서구 공원녹지과)

□ 사업개요

◦위치 : 강서구 서남환경공원, 국립국어원옆

◦규모 : 생태연못 및 통로화분 조성 2,300㎡

◦기간 : ’14. 8. 21 ～ ’15. 4. 20 (’15. 2월말 현재 공정률 60%)

◦총사업비 : 300백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물관리정책과, 깨끗한물관리, 물환경개선 및 관리, 그린빗물인프라시설 구축, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	배 정 액(B)	지출원인행위액 (C)	지 출 액(D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		300,000,000	300,000,000	286,459,530	119,994,490	166,465,040	13,540,470
공 사 비		286,500,000	286,500,000	274,719,530	108,254,490	166,465,040	11,780,470
	도 급 비	0	0	218,697,000	80,746,000	137,951,000	0
	관 급 비	0	0	39,022,530	10,508,490	28,514,040	0
	폐기물처리	0	0	17,000,000	17,000,000	0	0
설계용역		13,500,000	13,500,000	11,740,000	11,740,000	0	1,760,000

◦이월사유

- 국립국어원옆 보행자전용도로에 수목 식재시 우범화 우려에 따른 보안등 설치 요구 등 민원발생으로 인한 공사 지연

- 생태연못 조성지내 재활용수 공급에 따른 물순환 체계의 재검토 시일이 소요됨으로 인하여 사고이월이 불가피함.

빗물관리시설 확충

(물관리정책과)

□ 제작 개요

◦ 계약명 : 물순환 백서 제작 용역

◦ 계약기간 : 2014.7.8. ~ 2015.2.28

◦ 계약금액 : 13,386천원(금일천삼백삼십팔만육천원정)

◦ 계약내용 : 백서 원고작성, 편집, 디자인 등

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시안전실 물관리정책과, 깨끗한물관리, 건강한물관리시스템, 물순환개선 및 관리, 빗물관리시설확충, 사무관리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	13,800,000	13,800,000	13,386,000	0	13,386,000	414,000
용 역 비		13,800,000	13,386,000	0	13,386,000	414,000

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유

- 서울시에서 추진중에 있는 건강한 물순환 도시 추진 과정을 남김에 있어 보다 다양한 내용과 정확한 사실을 확인하는 과정이 요구됨

- 자료 검증, 편집, 디자인, 간행물 심의 기간 부족으로 사고이월이 불가피함

빗물관리시설 확충

(물관리정책과 / 은평구 주거재생과)

□ 사업개요

◦위치 : 은평구 응암동(산골마을) 주거환경 사업지구

◦규모 : 투수블록포장 A=438㎡, 빗물유입화단 350㎡, 자갈포장 등

◦기간 : ’14. 12. 30 ～ ’15. 10. 29(’15. 2월말 현재 공정률 5%)

◦총사업비 : 50백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물관리정책과, 깨끗한 물관리, 물환경개선 및 관리, 빗물관리 시설 확충, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0
공 사 비	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0

◦이월사유

- 주거환경과의 주거재생사업과의 병행 시행 사업으로 설계용역 기간 연장(‘14.5 → ’14.9.19)됨에 따라 공사기간의 부족 및 겨울철 굴착통제 기간으로 사고이월이 불가피함.

빗물관리시설 확충

(물관리정책과 / 마포구 토목과)

□ 사업개요

◦위치 : 성서중학교(마포구 성산로4길 42) 옆 도로

◦규모 : 투수블록포장 A=8.07@, 측구 L=282m

◦기간 : ’14. 12. 8 ～ ’15. 6. 30(’15. 2월말 현재 공정률 5%)

◦총사업비 : 117백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물관리정책과, 깨끗한 물관리, 물환경개선 및 관리, 빗물관리 시설 확충, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		117,000,000	117,000,000	117,000,000	0	117,000,000	0
공 사 비		103,916,000	103,916,000	103,916,000	0	103,916,000	0
	도 급 비	45,402,000	45,402,000	45,402,000	0	45,402,000	0
	관 급 비	58,514,000	58,514,000	58,514,000	0	58,514,000	0
이전비․기타		13,084,000	13,084,000	13,084,000	0	13,084,000	0

◦이월사유

- 차도용 투수블록 포장의 시험시공을 통해 시공기준 및 자재 성능 등을 모니터링 하고자 대상지를 선정 사업비를 배정하였으나, 공사기간의 부족 및 겨울철 굴착통제 기간으로 사고이월이 불가피함.

물순환 효과분석 및 인프라구축 기술개발 연구

( 물관리정책과 )

□ 사업개요

◦과업의 범위

- 공간적범위 : 효자배수분구, 도봉동 새동네. 마곡지구

◦과업의 내용

- 물순환 관련 국내․외 자료 조사 및 분석

- 물순환 시설 모니터링 및 효과검증

- 환경적 비용을 고려한 물순환 시설 도입 전․후의 편익비용 분석

- 물순환 시설의 적정 구축방안 및 효과분석

- 설계 및 시공 기준 및 계획수립․유지관리 지침서 작성 등

◦기간 : ’14. 5. 2 ～ ’15. 7. 25(’15.2월말 현재 공정률 65%)

◦총사업비 : 238백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 깨끗한물관리, 물환경개선 및 관리, 물순환 효과분석 및 인프라 구축 기술개발 연구, 연구용역비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		238,074,000	235,200,000	235,200,000	117,600,000	117,600,000	2,874,000
용 역 비		238,074,000	235,200,000	235,200,000	117,600,000	117,600,000	2,874,000
	도 급 비	238,074,000	235,200,000	235,200,000	117,600,000	117,600,000	2,874,000

◦이월사유

- 본 용역은 물순환 효과를 분석하기 위하여 총 과업기간이 15개월임으로 절대공기 부족으로 인한 사고이월이 불가피함.

서울특별시 수질 및 수생태계 보전계획 수립 연구

(물관리정책과)

□ 사업개요

◦과업명 : “서울특별시 수질 및 수생태계 보전계획 수립연구“ 용역

◦기간 : 2014.2.25 ～  2015.3.31.(’15.2월말 현재 공정률 90%)

◦총사업비 : 139,926,000원

◦주요내용

- 서울시내 하천을 4개권역(중랑천, 탄천, 안양천, 홍제천)으로 구분하여 수질 및 수생태계 보전계획(2014~2018)을 수립하고,

- 일부과업 추가(“2009 서울특별시 물환경 종합관리계획” 평가 및 갱신)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물환경개선 및 관리, 서울특별시 수질 및 수생태계 보전계획 수립 연구, 연구개발비, 연구용역비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	139,926,000	139,926,000	139,926,000	0	139,926,000	0
연구용역비	139,926,000	139,926,000	139,926,000	0	139,926,000	0

◦이월사유

- “서울특별시 수질 및 수생태계 보전계획 연구” 용역 진행 중 일부 과업 추가(2009년에 수립한 “서울특별시 물환경 종합관리계획”의 평가 및 갱신계획 수립)에 따라 준공기한 연기 및 계약금액 변경

․ 계약기간 : 당초 2014.2.25.~12.21⇒ 변경 후 2014.2.25.~2015.3.31.

․ 계약금액 : 당초 118,926,000원 ⇒ 변경 후 139,926,000원

양평1유수지 CSOs 저류조 설치

(물관리정책과)

□ 사업개요

◦위치 : 서울특별시 영등포구 국회대로 22길 20(양평동3가)

◦규모 : CSOs 저류조 46,000㎥

◦기간 : ‘14. 12. 23 ~’16. 12 (15.2 현재 공정율 : 5%)

◦총사업비 : 31,517,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물환경개선 및 관리, 양평1유수지 CSOs 저류조 설치,
시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0
용 역 비		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0
	기본 및 실시 설계비	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0

◦이월사유 : 사업기간 미도래(설계용역기간 : ‘14.12.23~’15.10.18)

- 전차 사업인 타당성조사 및 기본계획 용역 지연(가양유수지 CSOs 저류조 설치 지연)으로 용역 발주가 늦어짐

․  ‘14.  7.  3 : 전차용역 완료(서울시 CSOs 설치 타당성 조사 및 기본계획 수립)

․  ‘14.  8. 22 : 용역 시행계획 수립 및 용역 발주심의 의뢰

․  ‘14.  9. 26 : 발 주

․  ‘14. 12. 23 : 사업자 선정 및 계약

․  ‘15.  1. 22 : 착수보고회 개최

토양·지하수 환경정보시스템 유지보수 용역

(물관리정책과)

□ 사업개요

◦사 업 명 : 서울시 토양·지하수 환경정보시스템 유지보수 용역

◦용역내용 : 토양·지하수 오염지역 공간DB 및 토양오염조사 결과 자료관리

◦기    간 : 2014. 3. 28. ∼ 2015. 3. 27.

◦계약금액 : 금21,241,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시안전실 물관리정책과, 깨끗한물관리, 지하수 및 토양오염관리, 서울시토양지하수환경정보시스템 유지보수, 공공운영비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	22,370,000	21,900,000	21,241,000	17,700,830	3,540,170	1,129,000
용 역 비	22,370,000	21,900,000	21,241,000	17,700,830	3,540,170	1,129,000

◦ 이월사유 : 사업기간 미도래(‘14.3.28.~’15.3.27)

- ‘12년 개발된 서울시 토양·지하수 환경정보시스템에 대한 안정적인 운영기반을 위하여 발주한 유지관리 용역계약 건으로 당초 계획에 따라 최종 준공예정일이 ‘15.3.27. 임.

한강로 일대 방재시설 확충사업(시설)

(하천관리과/용산구 안전치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 한강대교 북단 ~ 남영역 간

◦규모 : 빗물펌프장 신설(Q=860㎥/분)

◦기간 : ‘13.12.27 ～ ’16.12.31 (15.2월말 현재 공정율 5%)

◦총사업비 : 30,958백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하천관리과, 치수 및 하천관리, 수방대책 사업, 용산구 한강로 방재시설 확충, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		11,990,000,000	11,990,000,000	11,990,000,000	1,637,055,040	10,352,944,960
공 사 비		11,205,152,290	11,205,152,290	11,205,152,290	1,343,350,200	9,861,802,090
	도 급 비	9,361,433,550	9,361,433,550	9,361,433,550	1,343,350,200	8,018,083,350
	관 급 비	1,843,718,740	1,843,718,740	1,843,718,740		1,843,718,740
이전비․기타		784,847,710	784,847,710	784,847,710	293,704,840	491,142,870

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유

: 인근 주민들의 펌프장 설치위치 변경민원 제기로, 지역주민 설득 및 협의 등으로 공사지연

-`14.04.24. : 빗물펌프장 설치 반대 집단민원발생[414명 연명부제출]

-`14.06.03. : 하천점용허가를 위한 협의(빗물펌프장 위치 이전)[市→서울지방국토관리청]

-`14.07.24. : 주민설명회 개최(3차)(펌프장 위치변경)

-`14.12.26. : 하천점용허가 완료[서울지방국토관리청]

-`15.01.26. : 한강로 일대 방재시설 확충사업 재설계 완료

한강로 일대 방재시설 확충사업(감리)

(하천관리과/용산구 안전치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 한강대교 북단 ~ 남영역 간

◦규모 : 빗물펌프장 신설(Q=860㎥/분)

◦기간 : ‘13.12.27 ～ ’16.12.31 (15.2월말 현재 공정율 5%)

◦총사업비 : 30,958백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하천관리과, 치수 및 하천관리, 수방대책 사업, 용산구 한강로 방재시설 확충, 감리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	800,000,000	800,000,000	800,000,000	304,749,800	495,250,200
감 리 비	800,000,000	800,000,000	800,000,000	304,749,800	495,250,200

◦이월사유

: 인근 주민들의 펌프장 설치위치 변경민원 제기로, 지역주민 설득 및 협의 등으로 공사지연

-`14.04.24. : 빗물펌프장 설치 반대 집단민원발생[414명 연명부제출]

-`14.06.03. : 하천점용허가를 위한 협의(빗물펌프장 위치 이전)[市→서울지방국토관리청]

-`14.07.24. : 주민설명회 개최(3차)(펌프장 위치변경)

-`14.12.26. : 하천점용허가 완료[서울지방국토관리청]

-`15.01.26. : 한강로 일대 방재시설 확충사업 재설계 완료

신월 빗물저류 배수시설 설치(시설)

(하천관리과/도시기반시설본부 방재시설부)

□ 사업개요

◦ 공사명 : 신월 빗물저류 배수시설 등 방재시설 확충공사

◦ 위  치 : 서울시 강서구 ~  양천구 일원

◦ 규  모 : 수직구 6개소(저지1·2, 고지, 환기, 유출, 유지관리)

저류배수 터널 : L=3,630km, D=10m

유도수로 터널 : L=1.097km, D=5.5m

◦ 기  간 : 2013. 5. ～ 2016. 5. (공정율 5%)

◦ 총사업비 : 138,004백만원(시설비:95,391)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦ 이월내역

- 예산과목

· 수방대책사업,신월빗물저류배수시설설치,시설비및부대비,시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		15,915,000,000	15,915,000,000	15,915,000,000	67,592,110	15,847,407,890	0
공 사 비		15,915,000,000	15,915,000,000	15,915,000,000	67,592,110	15,847,407,890	0
	도 급 비	15,851,301,620	15,851,301,620	15,851,301,620	67,592,110	15,783,709,510	0
	관 급 비	63,698,380	63,698,380	63,698,380	0	63,698,380	0

◦이월사유

- 저류배수터널 단면 확대(D=7.5m→D=10m)에 따른 도시계획시설 변경 결정과 실시계획 변경인가 절차이행 및 수리모형실험 지연과 공학적 검증 절차 이행에 따른 사업지연

신월 빗물저류 배수시설 설치(감리)

(하천관리과/도시기반시설본부 방재시설부)

□ 사업개요

◦ 공사명 : 신월 빗물저류 배수시설 등 방재시설 확충공사

◦ 위  치 : 서울시 강서구 ~  양천구 일원

◦ 규  모 : 수직구 6개소(저지1·2, 고지, 환기, 유출, 유지관리)

저류배수 터널 : L=3,630km, D=10m

유도수로 터널 : L=1.097km, D=5.5m

◦ 기  간 : 2013. 5. ～ 2016. 5. (공정율 5%)

◦ 총사업비 : 138,004백만원(시설비:95,391)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦ 이월내역

- 예산과목

· 수방대책사업,신월빗물저류배수시설설치,시설비및부대비,감리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	1,545,000,000	1,545,000,000	1,545,000,000	0	1,545,000,000	0
감 리 비	1,545,000,000	1,545,000,000	1,545,000,000	0	1,545,000,000	0

◦이월사유

- 저류배수터널 단면 확대(D=7.5m→D=10m)에 따른 도시계획시설 변경 결정과 실시계획 변경인가 절차이행 및 수리모형실험 지연과 공학적 검증 절차 이행에 따른 사업지연

관악산 저류조 설치공사(시설비)

(하천관리과/도시기반시설본부 방재시설부)

□ 사업개요

◦위치 : 서울대학교 내.외 주변

◦규모 : 빗물저류조 설치 65,000㎥(서울대정문 앞 40,000㎥, 서울대내 25,000㎥)

◦기간 : 2012. 1. 6.~2015. 5.30 (공정율 56%)

◦총사업비 : 494억원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 치수및하천관리, 수방대책사업, 관악산저류조설치, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		12,480,000,000	12,480,000,000	12,479,961,860	6,832,103,230	5,647,858,630 ( )	38,140
공 사 비		12,345,941,700	12,345,941,700	12,345,903,560	6,746,924,930	5,598,978,630 ( )	38,140
	도 급 비	9,950,000,000	9,950,000,000	9,950,000,000	5,729,156,000	4,220,844,000 ( )	-
	관 급 비	2,395,941,700	2,395,941,700	2,395,903,560	1,017,768,930	1,378,134,630 ( )	38,140
보 상 비						( )
이전비․기타		134,058,300	134,058,300	134,058,300	85,178,300	48,880,000 ( )	-

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 서울대 정문 앞 준공후 교통처리계획(삼거리→로타리방식, 서울대 요구) 변경으로 인하여 정문 앞 재설계가 추진되고 있어 사고이월 함

첨부  <서식1> 작성요령에서 명시한 제출서류 각1부(해당시).  끝.

관악산 저류조 설치(기계,전기,통신)공사

(하천관리과/도시기반시설본부 설비부)

□ 사업개요

◦위치 : 서울대학교 내.외 주변

◦규모 : 빗물저류조 설치 65,000㎥(서울대정문 앞 40,000㎥,
서울대내 25,000㎥)

◦기간 : 2012. 1. 6.~2015. 5.30 (공정율 56%)

◦총사업비 : 494억원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 치수및하천관리, 수방대책사업, 관악산저류조설치, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,470,000,000	1,470,000,000	1,448,581,969	830,522,110	618,059,859	21,418,031
공 사 비		1,470,000,000	1,470,000,000	1,448,581,969	830,522,110	618,059,859	21,418,031
	도 급 비	642,273,320	642,273,320	620,855,289	345,309,000	275,546,289	21,418,031
	폐 기 물
	관 급 비	824,718,420	824,718,420	824,718,420	482,204,850	342,513,570
	공공요금	3,008,260	3,008,260	3,008,260	3,008,260
감리용역비
시설부대비

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 서울대 정문 앞 준공후 교통처리계획(삼거리→로타리방식, 서울대 요구) 변경으로 인하여 정문 앞 재설계가 추진되고 있어 사고이월 함

첨부  <서식1> 작성요령에서 명시한 제출서류 각1부(해당시).  끝.

시흥계곡 빗물저류조 설치

(하천관리과/금천구 안전치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 시흥동 412-5번지 일원

◦규모 : 저류용량(V)=24,000㎥, 방수설비 상부복원 등

◦기간 : 2013. 11. 13 ~ 2015. 3. 31(15.2월말 공정율 95%)

◦총사업비 : 10,517백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 수방대책사업, 시흥계곡빗물저류조설치, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	1,700,000,000	1,300,000,000
공 사 비		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	1,700,000,000	1,300,000,000	0
	도 급 비	2,137,145,140	2,137,145,140	2,137,145,140	837,145,140	1,300,000,000	0
	관 급 비	862,854,860	862,854,860	862,854,860	862,854,860		0
보 상 비
이전비․기타

◦이월사유

- 주민 기피시설로 공사반대 민원이 발생하여 상부복원에 대한 주민합의 지연

▪ ‘14.  9 : 저류조 구조물공사 완료(저류기능확보)

▪ ‘14. 10 ~ : 주민협의체 구성 및 회의개최

▪ ‘14. 11 : 주민합의 완료

▪ ‘14. 12 : 설계변경 추진

일자산 도시자연공원 빗물 저류조설치 설계 용역

(하천관리과/강동구 치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 강동구 둔촌동 6-13번지(일자산 도시자연공원)

◦규모 : V=2,600㎥

◦기간 : 2014. 5. ~ 2015. 2 (15. 2월말 80%)

◦총사업비 : 1,740백만원(설계비 70, 공사비 1,670)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 치수및하천관리, 수방대책사업, 일자산빗물저류조설치, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		70,000,000	66,187,000	57,445,000	40,395,000	17,050,000	12,555,000
도 급 비		70,000,000	66,187,000	57,445,000	40,395,000	17,050,000	12,555,000
	용 역 비	70,000,000	66,187,000	57,445,000	40,395,000	17,050,000	12,555,000
	관 급 비
보 상 비
이전비․기타

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유

- 설계용역 추가검토 지시에 의한 용역기간 소요로 사고이월

용두 빗물펌프장 시설용량증대(토목)

(하천관리과 / 도시기반시설본부 방재시설부)

□ 사업개요

◦위    치 : 동대문구 용두동 129-274

◦규    모 : 유역분리 및 빗물펌프장 신설(240㎥/min)

모터펌프160Hp×3대, 토출관로 Ø1500×1, L=10.7m

◦기    간 : 2013. 1. 3. ～ 2015. 7. 31(공정률 0% )

◦총사업비 : 5,020백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 치수및하천관리, 수방대책사업, 용두빗물펌프장 시설용량 증대, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		2,425,000,000	2,425,000,000	2,424,677,610	852,677,610	1,572,000,000 ( - )	322,390
공 사 비			2,425,000,000	2,422,000,000	850,000,000	1,572,000,000 ( - )	322,390
	도 급 비		2,425,000,000	2,422,000,000	850,000,000	1,572,000,000 ( - )	322,390
이전비․기타				2,677,610	2,677,610	( - )

◦이월사유

- 지하철 지하 구조물 저촉으로 공사중지 되어 유역면적 조정 및 재설계를 위한 기간소요로 공사 미시행

첨부 :  1. 공사계약서(토목2차) 1부.

2. 용역변경계약체결통보서(폐기물) 1부.

3. 지출원인행위부 및 지출부 1부.

4. 설계변경 및 준공기한 연기보고(제3회) 1부.

5. 준공기한 연기검토 보고(건설폐기물처리용역) 1부. 끝.

용두 빗물펌프장 시설용량증대(감리)

(하천관리과 / 도시기반시설본부 설비부)

□ 사업개요

◦위    치 : 동대문구 용두동 129-274

◦규    모 : 유역분리 및 빗물펌프장 신설(240㎥/min)

모터펌프160Hp×3대, 토출관로 Ø1500×1, L=10.7m

◦기    간 : 2013. 1. 3. ～ 2015. 7. 31(공정률 0% )

◦총사업비 : 5,020백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 치수및하천관리, 수방대책사업, 용두빗물펌프장 시설용량 증대, 감리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	16,000,000	16,000,000	16,000,000		16,000,000 ( - )
감 리 비		16,000,000	16,000,000		16,000,000 ( - )

◦이월사유

- 지하철 지하 구조물 저촉으로 공사중지 되어 유역면적 조정 및 재설계를 위한 기간소요로 공사 미시행

첨부 : 용두3 계약서 1부.  끝.

신림 빗물펌프장 시설 용량 증대(설비)

(하천관리과 / 도시기반시설본부 설비부)

□ 사업개요

◦위   치 : 관악구 신사동 496 일대

◦규   모 : 빗물펌프장 신설(800㎥/mim)

모터펌프 416Hp×4대,416Hp×4대, 건축700.8㎡

토출관로 □2.5×1.0×3, L=8.8m

◦기   간 : 2013.1.4. ～ 2015.7.31.(공정률 98%)

◦총사업비 : 14,003백만 원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 치수및하천관리, 수방대책사업, 신이문빗물펌프장 시설용량 증대, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		2,869,604,000	2,869,604,000	2,691,291,572	2,681,291,572	10,000,000 ( - )	178,312,428
공 사 비		2,869,604,000	2,869,604,000	2,691,291,572	2,681,291,572	10,000,000 ( - )	178,312,428
	도 급 비	2,869,604,000	2,869,604,000	2,691,291,572	2,681,291,572	10,000,000 ( - )	178,312,428

◦이월사유

- 인수인계 전 공공요금 납부(집행시기 미도래)

첨부 : 1. 지출원인행위 및 지출부1부.

중동 빗물펌프장 시설 용량 증대(토목)

(하천관리과/ 도시기반시설본부 방재시설부)

□ 사업개요

◦위    치 : 마포구 성산2동 99-5 일원

◦규    모 : 빗물펌프장 증설(210㎥/min)

모터펌프 350Hp×1, 180Hp×1, 건축 337.68㎡

토출관로 Ø1,500×1,  L=12.3m

◦기    간 : 2013. 1. 4. ～ 2015. 6. 30.(공정률 90%)

◦총사업비 : 4,823백만 원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 치수 및 하수관리, 수방대책사업, 중동빗물펌프장 시설용량 증대, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		436,900,000	436,900,000	436,900,000	107,400,000	329,500,000 ( - )
공 사 비			436,900,000	436,900,000	107,400,000	329,500,000 ( - )
	도 급 비		436,900,000	436,900,000	107,400,000	329,500,000 ( - )

◦이월사유

- 부대시설 및 건축공사, 시운전을 위한 공사시행 집행시기 미도래

첨부 : 1. 공사변경 계약서 1부.

2. 원인행위부 1부.  끝.

중동 빗물펌프장 증설 공사(설비)

(하천관리과 / 도시기반시설본부 설비부)

□ 사업개요

◦위    치 : 마포구 성산2동 99-5 일원

◦규    모 : 빗물펌프장 증설(210㎥/min)

모터펌프 350Hp×1, 180Hp×1, 건축 337.68㎡

토출관로 Ø1,500×1,  L=12.3m

◦기    간 : 2013. 1. 4. ～ 2015. 6. 30.(공정률 60%)

◦총사업비 : 4,823백만 원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 치수및하수관리, 수방대책사업, 중동빗물펌프장 시설용량 증대, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		82,100,000	82,100,000	82,100,000	38,701,628	43,398,372 ( - )
공 사 비			82,100,000	82,100,000	38,701,628	43,398,372 ( - )
	도 급 비		12,573,778	12,573,778	2,693,040	9,880,738 ( - )
	관 급 비		69,526,222	69,526,222	36,008,588	33,517,634 ( - )

◦이월사유 : 토목·건축공사 시행중으로 기계·전기설비 공사 미시행

첨부 : 공사변경 체결통보서 1부.  끝.

중동 빗물펌프장 증설 공사(감리)

(하천관리과 / 도시기반시설본부 설비부)

□ 사업개요

◦위    치 : 마포구 성산2동 99-5 일원

◦규    모 : 빗물펌프장 증설(210㎥/min)

모터펌프 350Hp×1, 180Hp×1, 건축 337.68㎡

토출관로 Ø1,500×1,  L=12.3m

◦기    간 : 2013. 1. 4. ～ 2015. 6. 30.(공정률 60%)

◦총사업비 : 4,823백만 원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 치수 및 하수관리, 수방대책사업, 중동빗물펌프장 시설용량 증대, 감리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	122,000,000	121,880,800	121,422,930	0	121,422,930 ( - )	577,070
감 리 비	122,000,000	121,880,800	121,422,930	0	121,422,930 ( - )	577,070

◦이월사유 : 토목·건축공사 시행중으로 기계·전기설비 공사 미시행

첨부 : 용역계약체결통보서 1부.  끝.

잠원 빗물펌프장 시설 용량 증대(토목)

(하천관리과 / 도시기반시설본부 방재시설부)

□ 사업개요

◦위    치 : 강남구 압구정동 380-2번지 신사공원 일원

◦규    모 : 유역분리 및 빗물펌프장 신설(1,400㎥/min)

모터펌프 915Hp×5대,  건축 912㎡

토출관로 Ø1,900×3, □3.5×2.5×2  L=256m

◦기    간 : 2013. 1. 3.~2016. 12. 31.(공정률 5%)

◦총사업비 : 28,370백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 치수 및 하천관리 수방대책사업, 잠원빗물펌프장 시설용량 증대, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		5,606,000,000	5,606,000,000	5,588,480,000	214,400,000	5,374,080,000 ( - )	17,520,000
공 사 비		5,606,000,000	5,606,000,000	5,588,480,000	214,400,000	5,374,080,000 ( - )	17,520,000
	도 급 비			5,588,480,000	214,400,000	5,374,080,000 ( - )

◦이월사유

- 펌프장건설 반대 집단민원으로 공사중지되어, 민원해결을 위한 대안검토 및 협의 시행에 따른 사업지연

첨부 : 1. 잠원공사계약서 1부.

2. 잠원공사변경계약서 1부.

3. 지출원인행위 및 지출부(방재) 1부

4. 폐기물처리용역 계약서 1부.

5. 준공기한 연기방침 1부. 끝.

잠원 빗물펌프장 시설 용량 증대(설비)

(하천관리과 / 도시기반시설본부 설비부)

□ 사업개요

◦위    치 : 강남구 압구정동 380-2번지 신사공원 일원

◦규    모 : 유역분리 및 빗물펌프장 신설(1,400㎥/min)

모터펌프 915Hp×5대,  건축 912㎡

토출관로 Ø1,900×3, □3.5×2.5×2  L=256m

◦기    간 : 2013. 1. 3.~2016. 12. 31.(공정률 5%)

◦총사업비 : 28,370백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 치수 및 하천관리 수방대책사업, 잠원빗물펌프장 시설용량 증대, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,414,000,000	1,414,000,000	1,413,560,560	178,000,000	1,235,560,560	439,440
공 사 비		1,414,000,000	1,414,000,000	1,413,560,560	178,000,000	1,235,560,560	439,440
	도 급 비			254,924,000	-	254,924,000
	관 급 비			1,158,636,560	178,000,000	980,636,560

◦이월사유

- 펌프장건설 반대 집단민원으로 공사중지되어, 민원해결을 위한 대안검토 및 협의 시행에 따른 사업지연으로 기계 및 전기공사 작업시기 미도래

첨부 : 1. 공사변경계약체결통보서 1부.

2. 지출원인행위 및 지출부(설비부) 1부. 끝.

잠원 빗물펌프장 시설 용량 증대(감리)

(하천관리과 / 도시기반시설본부 방재시설부)

□ 사업개요

◦위    치 : 강남구 압구정동 380-2번지 신사공원 일원

◦규    모 : 유역분리 및 빗물펌프장 신설(1,400㎥/min)

모터펌프 915Hp×5대,  건축 912㎡

토출관로 Ø1,900×3, □3.5×2.5×2  L=256m

◦기    간 : 2013. 1. 3.~2016. 12. 31.(공정률 5%)

◦총사업비 : 28,370백만 원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 치수 및 하천관리 수방대책사업, 잠원빗물펌프장 시설용량 증대, 감리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	480,000,000	480,000,000	471,156,000	391,156,000	80,000,000 ( - )	8,844,000
감 리 비	480,000,000	480,000,000	471,156,000	391,156,000	80,000,000 ( - )	8,844,000

◦이월사유

- 펌프장건설 반대 집단민원으로 공사중지되어, 민원해결을 위한 대안검토 및 협의 시행에 따른 사업지연

첨부 : 잠원감리용역 계약서 1부.  끝.

신이문 빗물펌프장 시설 용량 증대(토목)

(하천관리과 / 도시기반시설본부 방재시설부)

□ 사업개요

◦위    치 : 동대문구 이문동 58-3

◦규    모 : 빗물펌프장 증설(375㎥/min)

모터펌프 400Hp×3대, 250Hp×1대, 건축 138㎡

토출관로 Ø1,500×1, L=21m

◦기    간 : 2013. 1. 3. ～ 2015. 6. 30.(공정률 36.1% )

◦총사업비 : 4,962백만 원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 치수및하천관리, 수방대책사업, 신이문빗물펌프장 시설용량 증대, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		930,000,000	930,000,000	922,264,270	902,711,170	19,553,100	7,735,730
공 사 비		784,669,890	784,669,890	784,669,890	784,669,890
	도 급 비		784,669,890	784,669,890	784,669,890
폐기물처리비		25,000,000	25,000,000	25,000,000	5,446,900	19,553,100
이전비․기타		120,330,110	120,330,110	112,594,380	112,594,380		7,735,730

◦이월사유

- 토목 구조물 및 건축공사 중으로 폐기물 처리비 지급 시기 미도래

첨부 : 1. 공사계약서(토목2차)1부.

2. 용역변경계약체결통보서(폐기물) 1부.

3. 지출원인행위부 및 지출부 1부.

4. 설계변경 및 준공기한 연기보고(제3차) 1부.

5. 준공기한 연기검토 보고 1부. 끝.

공릉 빗물펌프장 시설 용량 증대(토목)

(하천관리과/도시기반시설본부 방재시설부)

□ 사업개요

◦위    치 : 서울시 노원구 공릉동 406-1번지 일원

◦규    모 : 유역분리 및 빗물펌프장 설치(520㎥/min)

모터펌프 770Hp×2대, 건축 337.7㎡

토출관로 Ø1,500㎜×2,  L=65m

◦기    간 : 2013. 1. 8.~2015 .7. 31.(공정률 19%)

◦총사업비 : 11,842백만 원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 치수및하천관리, 수방대책사업, 공릉빗물펌프장 시설용량증대, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		2,075,000,000	2,075,000,000	2,074,998,305	1,013,490,735	1,061,507,570 ( )	1,695
공 사 비		1,775,804,930	1,775,804,930	1,775,804,930	764,297,360	1,011,507,570 ( )
	도 급 비	1,370,850,000	1,370,850,000	1,370,850,000	744,180,000	626,670,000 ( )
	관 급 비	404,954,930	404,954,930	404,954,930	20,117,360	384,837,570 ( )
폐기물처리비		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000 ( )
이전비․기타		249,195,070	249,195,070	249,193,375	249,193,375	( )	1,695

◦이월사유

- 기존 펌프장 수방기간 활용됨에 따라 철거지연으로 본구조물 설치공사중으로 집행시기 미도래

첨부 : 1. 지출원인행위 및 지출부 1부.

2. 공사변경계약체결통보서 2부.

3. 설계변경계약(총차5회,2차4회)의뢰 공문1부. 끝.

공릉 빗물펌프장 시설 용량 증대(설비)

(하천관리과 / 도시기반시설본부 설비부)

□ 사업개요

◦위    치 : 서울시 노원구 공릉동 406-1번지 일원

◦규    모 : 유역분리 및 빗물펌프장 설치(520㎥/min)

모터펌프 770Hp×2대, 건축 337.7㎡

토출관로 Ø1,500㎜×2,  L=65m

◦기    간 : 2013. 1. 8.~2015 .7. 31.(공정률 19%)

◦총사업비 : 11,842백만 원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 치수및하천관리, 수방대책사업, 공릉빗물펌프장 시설용량증대, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		882,000,000	882,000,000	882,000,000	293,421,300	588,578,700 ( - )	0
공 사 비				882,000,000	293,421,300	588,578,700 ( - )	0
	도 급 비			182,766,550	11,046,000	171,720,550 ( - )	0
	관 급 비			699,233,450	282,375,300	416,858,150 ( - )	0

◦이월사유

- 기존 펌프장 폐쇄지연(수방활용)으로 기전설비 공사 착공시기 미도래

첨부 : 1. 지출원인행위 및 지출부 1부.

2. 물품계약서 각 1부.  끝.

공릉 빗물펌프장 시설 용량 증대(감리)

(하천관리과 / 도시기반시설본부 설비부)

□ 사업개요

◦위    치 : 서울시 노원구 공릉동 406-1번지 일원

◦규    모 : 유역분리 및 빗물펌프장 설치(520㎥/min)

모터펌프 770Hp×2대, 건축 337.7㎡

토출관로 Ø1,500㎜×2,  L=65m

◦기    간 : 2013. 1. 8.~2015 .7. 31.(공정률 19%)

◦총사업비 : 11,842백만 원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 치수및하천관리, 수방대책사업, 공릉빗물펌프장 시설용량증대, 감리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	43,000,000	43,000,000	43,000,000	40,000,000	3,000,000	0
감 리 비	43,000,000	43,000,000	43,000,000	40,000,000	3,000,000	0

◦이월사유

- 기존 펌프장 폐쇄지연(수방활용)으로 기전설비 공사 착공시기 미도래

첨부 : 용역계약체결통보서 1부. 끝.

합정 빗물펌프장 시설 용량 증대(토목)

(하천관리과 / 도시기반시설본부 방재시설부)

□ 사업개요

◦위    치 : 마포구 합정동 199-4

◦규    모 : 빗물펌프장 증설(160㎥/min)

모터펌프 360Hp×2대,  건축 540.94㎡

토출관로 Ø1,200×1,  L=65m

◦기    간 : 2013. 1. 4. ～ 2015. 9.30(공정률 10%)

◦총사업비 : 8,845백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 치수및하천관리, 수방대책사업, 합정빗물펌프장 시설용량 증대, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		2,347,102,130	2,347,102,130	2,347,037,390	92,735,370	2,254,302,020 ( - )	64,740
공 사 비		2,347,102,130	2,347,102,130	2,347,037,390	92,735,370	2,254,302,020 ( - )	64,740
	도 급 비	2,068,964,740	2,068,964,740	2,068,900,000	66,000,000	2,002,900,000 ( - )	64,740
	관 급 비	278,137,390	278,137,390	278,137,390	26,735,370	251,402,020 ( - )	-

◦이월사유

- 보상건물 이주 지연에 따른 공사 지연

첨부 : 1. 공사변경계약서 1부.

2. 원인행위부 1부.  끝.

용허리 공원 빗물 저류조 설치

(하천관리과 / 서초구 공원녹지과)

□ 사업개요

◦위    치 : 서초구 서초동 1324-1번지 일원(용허리공원 내)

◦규    모 : 저류조 상부 공원 조경식자재 유지관리

조경면적 4,615㎡

◦기    간 : 2014.12. 20. ～  2015. 12. 19.(공정율 20%)

◦총사업비 : 1,500백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 수방대책사업, 용허리 빗물 저류조 설치, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		13,900,000	13,900,000	13,000,000	0	13,000,000 ( 0)	900,000
공 사 비		13,900,000	13,900,000	13,000,000	0	13,000,000 ( 0)	900,000
	도 급 비	13,900,000	13,900,000	13,000,000	0	13,000,000 ( 0)	900,000

◦ 이월사유

- 저류조 상부공원 조경식재 연중 유지관리비로 집행시기 미도래

첨부 : 1. 공사계약체결통보서 1부.

2. 지출원인행위 및 지출부 1부

3. 조경식재 유지관리공사 사고이월 추진계획 1부.  끝.

도곡(대치1) 빗물펌프장 신설

(하천관리과 / 강남구 치수과)

□ 사업개요

◦위    치 : 강남구 대치동 508-2

◦규    모 : 빗물펌프장 신설(750㎥/min)

모터펌프 650Hp×2, 350Hp×1, 유입관로 설치

□2.5×2.0×1, L=361.5m

◦기    간 : 2013.12. ~ 2016. 12. 31.(공정률 0%)

◦총사업비 : 25,802백만 원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 치수및하천관리, 수방대책 사업, 도곡빗물펌프장 신설, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	1,000,000,000	479,910,000	418,818,000	18,535,000	400,283,000 ( - )	581,182,000
용 역 비		479,910,000	418,818,000	18,535,000	400,283,000 ( - )	581,182,000

◦ 이월사유

- 침수피해 방지를 위한 펌프장 설치 반대민원 제기 및 주민의 요구 방안(SETE옆)에 대한 타당성 검토 결과 검증을 위한 수리모형 실험과 기본 및 실시설계용역의 ‘14.12월 시행으로 소요기간 부족

첨부 : 1. 용역계약 체결통보서 1부.

2. 지출원인행위부 1부.

3. 지출부 1부. 끝.

조원동 저지대지역 침수해소

(하천관리과 / 구로구 치수과)

□ 사업개요

◦위    치 : 구로구 구로동 810-2

◦규    모 : 빗물펌프장 신설(Q=320㎥/min)

◦기    간 : 2014. 5. 19 ～ 2015. 4. 30(공정율 80%)

◦사업내용 : 게이트펌프(120Hp×4대)

◦총사업비 : 2,000백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

- 예산과목 : 치수및하천관리, 수방능력향상을위한방재시설확충, 수방대책사업, 조원동저지대침수해소 시설용량 증대, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사고이월액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		2,000,000,000	2,000,000,000	1,943,868,180	1,455,449,550	488,418,630 ( - )	56,131,820
공 사 비		2,000,000,000	2,000,000,000	1,943,868,180	1,455,449,550	488,418,630 ( - )	56,131,820
	도 급 비	589,813,940	589,813,940	589,813,940	449,684,000	140,129,940 ( - )	0
	관 급 비	1,410,186,060	1,410,186,060	1,354,054,240	1,005,765,550	348,288,690 ( - )	56,131,820

◦이월사유 : 도림천변에 설치하는 수방시설 구축사업으로 수방기간

(2014.5.15~10.15) 이후 실착공으로 집행시기 미도래

첨부 : 1. 원인행위 및 지출부 1부.

2. 계약서 각 1부.

3. 준공기한연장 공문 각 1부. 끝.

도봉2천 시설물 개선사업

(하천관리과/도봉구 안전치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 도봉1천 합류부 ~ 도봉산 입구

◦규모 : 하천시설물 정비, L=860m

◦기간 : 2014. 8.11. ～  2015. 8.10(2월말 현재 54%)

◦총사업비 : 3,200백만원(국비 7억원 2013, 시비 2014 10억원, 2015 15억원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하천복원 및 정비, 도봉2천 시설물 개선, 시설비 및 부대비, 시설비(100-401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	748,206,960	251,793,040 ( 0 )	0
공 사 비		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	748,206,960	251,793,040 ( 0 )	0
	도 급 비	939,131,600	939,131,600	939,131,600	687,338,560	251,793,040 ( 0 )	0
	관 급 비	60,868,400	60,868,400	60,868,400	60,868,400	0 ( 0 )	0
보 상 비		0	0	0	0	0 ( 0 )	0
이전비․기타		0	0	0	0	0 ( 0 )	0

◦이월사유

- 2014. 8.11. 착공 후 우기철 하천 내 공사 불가로 인한 절대공기 부족(실시설계용역 2014.2.17.~6.16)

중랑천 마스터플랜 수립 용역

(하천관리과)

□ 사업개요

◦ 용 역 명 : 중랑천 이용 및 관리 마스터플랜 수립 용역

◦ 용역내용

- 중랑천 및 지천 등 자연형 하천조성 계획 수립

- 도시하천의 생태회복 및 관리모형 설정

◦ 용역기간 : 2014. 7. 31. ～ 2015. 7. 30.(2월말 현재 25%)

◦ 용 역 비 : 567,862천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦ 이월내역

- 예산과목 : 치수 및 하천관리, 생태하천 복원, 하천복원 및 정비, 중랑천 마스터플랜 수립 용역, 시설비 및 부대비, 시설비(100-401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	700,000,000	629,626,000	567,862,000	216,576,000	351,286,000 ( - )	132,138,000
용 역 비	700,000,000	629,626,000	567,862,000	216,576,000	351,286,000 ( - )	132,138,000

◦ 이월사유

- 용역발주 사전절차 이행(사업계획수립, 건설기술심의 등) 후 발주(’14.5)하였고 기술제안서 평가 등을 통해 사업수행자를 선정해 '14.7월 용역 착수하여 절대공기 부족(용역기간 12개월, '15.7 준공예정)

중랑천 둔치(중랑구간) 친수시설 조성

(하천관리과/중랑구청 치수과)

□ 사업개요

◦ 위치 : 중랑구 중랑천 장안교 주변

◦ 규모 : 친수시설 조성 6,000㎡

◦ 기간 : 2014. 7. ～2015. 12. 31 (’15.2월말 현재 공정율 10%)

◦ 총사업비 : 2,800백만원(2014년 1,000백만원, 2015년 1,800백만원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦ 이월내역

- 예산과목 : 치수 및 하천관리, 생태하천 복원, 하천복원 및 정비, 중랑천 둔치(중랑구간) 친수시설 조성, 시설비 및 부대비, 시설비(100-401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,000,000,000	1,000,000,000	999,899,560	80,300,000	919,700,000 (100,440)	0
공 사 비		906,479,560	906,479,560	906,479,560	0	906,479,560 ( 0 )	0
	도 급 비	880,000,000	880,000,000	880,000,000	0	880,000,000 ( 0 )	0
	관 급 비	26,479,560	26,479,560	26,479,560	0	26,479,560 ( 0 )	0
용 역 비		93,420,000	93,420,000	93,420,000	80,300,000	13,120,000 ( 0 )	0
이전비․기타		100,440	100,440	-	0	100,440 (100,440)	0

◦ 이월사유

- 설계용역 및 하천점용허가에 장기간이 소요되어 공사 절대공기 부족

· 2014. 9. 17.  : 기본 및 실시설계 용역 착수

· 2014. 12. 12. : 하천점용허가 신청 (서울지방국토관리청)

· 2014. 12. 31. : 공사 계약

· 2014. 12. 12. : 용역기한 연기

(당초 : 2014. 12. 15. → 변경 : 2015. 3. 31.)

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 중랑천둔치 친수시설조성공사

□ 사업기간 : 2014.9. ~2015.12.31

□ 예산과목 : 치수 및 하천관리, 생태하천 복원, 하천복원 및 정비, 중랑천 둔치 친수시설 조성, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 지출원인행위 미필사유

- 이전비 (지장물 등 이전)

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계		100,440
이전비	○ 이전비(지장물 이전 등) - 통신, 도시가스 등 1식 × 100,440원	100,440

확 인 자 : 직)중랑구청 치수과장     성명)이 권 구(인)

조 사 자 : 직)지방시설주사          성명)신 정 범(인)

군자교 진출입(경사로)시설 설치

(하천관리과/동대문구 안전치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 동대문구 장안동 (군자교 부근)

◦규모 : 폭 3.5m, 연장 77m

◦기간 : 2014. 8. ～  2015. 5.(’15.2월말 현재 공정율 40%)

◦총사업비 : 1,300백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하천복원 및 정비, 군자교 진출입(경사로)시설 설치,

시설비 및 부대비, 시설비 (100-401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,300,000,000	1,288,843,000	1,288,843,000	375,669,150	913,173,850 ( - )	11,157,000
공 사 비		850,162,390	839,005,390	839,005,390	318,799,150	520,206,240 ( - )	11,157,000
	도 급 비	607,291,000	596,134,000	596,134,000	193,453,000	402,681,00 ( - )	11,157,000
	관 급 비	242,871,390	242,871,390	242,871,390	125,346,150	117,525,240 ( - )	-
이전비․기타		449,837,610	449,837,610	449,837,610	56,870,000	392,967,610 ( - )	-

◦이월사유

- 설계용역 및 하천점용허가에 장기간이 소요되어 절대공기 부족

· 2014. 3. 5. : 기본 및 실시설계 용역 착수

· 2014. 5.20. :  하천점용허가 신청 (서울지방국토관리청)

· 2014. 6.16. :  하천점용허가 승인

· 2014. 8.13. : 기본 및 실시설계 용역 준공

· 2014.10.16. : 공사 착공

· 2014.12.17. : 준공기한 연기(당초 : 2015. 1. 3. → 변경 : 2015. 5. 30.)

불광천(은평구간) 환경개선

(하천관리과/은평구 안전치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 불광천 응암역~증산교

◦규모 : 하상정비 200m, 주민편의 시설(그늘막, 화장실, 음료수대 등), 자전거 및 산책로 분리(폭 6m, 연장 300m) 등

◦기간 : ’14.11.25～ ’15.5.25(15.2월말 현재 공정율 15%)

◦총사업비 : 1,000백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하천복원 및 정비, 불광천(은평구간) 환경개선, 시설비 및 부대비, 시설비(100-401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,000,000,000	989,710,000	979,890,840	34,858,900	945,031,940 ( )	20,109,160
공 사 비		828,361,000	818,071,000	808,252,700	-	808,252,700 ( )	20,108,300
	도 급 비	554,821,000	554,531,000	538,915,760	-	538,915,760 ( )	15,905,240
	관 급 비	273,540,000	273,540,000	269,336,940	-	269,336,940 ( )	4,203,060
보 상 비		-	-	-	-	( )	-
이전비․기타		171,639,000	171,639,000	171,638,140	34,858,900	136,779,240 ( )	860

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 불광천 수질악화 및 악취저감 방안 강구와 편의시설 설치 등 주민의견 수렴 및 검토결과 반영에 따른 실시설계 용역 지연으로 공사 지연

홍제천 종로구간 하천정비

(하천관리과/종로구 안전치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 홍제천 종로구간(홍지문~신영삼거리)

◦규모 : 유지용수관설치 120m, 세굴방지공207m, 호안식생블럭 정비 300m, 산책로 설치 428m, 제방옹벽 정비 3,358㎡, 호안블럭설치 644㎡, CCTV설치

◦기간 : 2014. 4. 1 ～  2015. 06. 21(2월말 현재 60%)

◦총사업비 : 1,000백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하천복원 및 정비사업, 홍제천 종로구간 하천정비(유지용수관 등), 시설비 및 부대비, 시설비(100-401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,000,000,000	1,000,000,000	885,486,920	251,438,920	634,048,000 ( 0 )	114,513,080
공 사 비		927,801,000	927,801,000	834,668,920	213,705,920	620,963,000 ( 0 )	93,132,080
	도 급 비	724,334,980	724,334,980	632,512,000	178,464,000	454,048,000 ( 0 )	91,822,980
	관 급 비	203,466,020	203,466,020	202,156,920	35,241,920	166,915,000 ( 0 )	1,309,100
용 역 비		59,114,000	59,114,000	37,733,000	37,733,000	0 ( 0 )	21,381,000
이전비․기타		13,085,000	13,085,000	13,085,000		13,085,000 ( 0 )	0

◦이월사유

- 문화재주변(홍지문, 세검정터)공사로 인한 문화재 현상변경심의, 디자인 협의 및 평창아트밸리 조성사업단과의 협의, 주민설명회 등에 따른 용역기간 연장으로 공사발주 지연

동작구 사당역 일대 배수개선

(도시안전본부 하천관리과)

□ 사업개요

◦위치 : 사당역 일대 및 사당천 유역

◦규모 : 사당천 유역 내수배제 개선 등을 통한 종합개선대책 마련

◦기간 : ‘13. 7.31~’15. 8.31(‘15.2월말 현재 공정율 70%)

◦총사업비 : 1,554,554천원(기본설계)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 수방대책 사업, 동작구 사당역 일대 배수개선, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	414,315,000	585,685,000 ( )	0
설 계 비		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	414,315,000	585,685,000 ( )	0
	도 급 비	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	414,315,000	585,685,000 ( )	0
	관 급 비					( )
보 상 비						( )
이전비․기타						( )

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유

- 사당역 일대 배수개선대책에 대한 기본설계가 ‘15. 2.20 완료 예정이었으나, 기본설계에 빗물저류 배수시설에 대한 수리모형 실험이 반영되어 수리모형실험 기간(3~4개월 소요) 만큼 용역준공 연기에 따른 설계비 사고이월 필요

첨부 : 용역준공기한 연기 의뢰 공문 사본.  끝.

안양천(금천구) 물놀이시설 설치

(하천관리과 / 금천구 안전치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 안양천 우안 금천교 주변 둔치(금천구 독산동)

◦규모 : 구름형태 물놀이 시설  B=15m, L=95m, A=1,425㎡

분수대, 미끄럼, 그늘막 등

◦기간 : ‘14. 3 ~ ’15. 6.30(‘15.2월말 현재 공정율 20%)

◦총사업비 : 1,500,000천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하천복원 및 정비, 안양천(금천구) 물놀이시설 설치, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,500,000,000	1,479,000,000	1,074,945,770	189,420,360	1,289,579,640 (404,054,230)	21,000,000
공 사 비		1,500,000,000	1,479,000,000	1,074,945,770	189,420,360	1,282,193,630 (396,668,220)
	설 계 비		74,000,000	58,060,000	58,060,000
	공 사 비		1,405,000,000	623,520,000	108,932,000	514,588,000
	관 급 비			393,365,770	22,428,360	767,605,630 (396,668,220)
이전비․기타						7,386,010 (7,386,010)

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유

- 안양천(금천구) 물놀이시설 설치공사와 관련하여 ‘14. 7월 하천점용 허가를 서울지방국토관리청에 신청하였으나, 현재까지 허가처리가 지연되고 있으며, 이로 인해 공사비와 관급비 등 이월이 불가피함.

첨부  지출원인행위 미필 이월명세서 및 계약서 각 1부.  끝.

상도동 성대시장주변 침수해소

(하천관리과 / 동작구 안전치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 동작구 신대방동 361-54 ~ 상도동 190-9호

◦규모 : 하수암거 부설(▣3.5×2.0~2▣4.5×2.2m), L=1,252m

◦기간 : ‘09. 61~’15. 6월(‘15. 2월말 현재 공정율 70%)

◦총사업비 : 18,756,000천원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 수방대책 사업, 상도동 성대시장주변 침수해소, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		2,600,000,000	2,600,000,000	2,437,008,070	594,301,210	1,842,706,860 ( )	162,991,930
공 사 비		2,371,371,070	2,371,371,070	2,371,371,070	528,664,210	1,842,706,860 ( )
	도 급 비	2,317,084,000	2,317,084,000	2,317,084,000	512,818,480	1,804,265,520 ( )
	관 급 비	54,287,070	54,287,070	54,287,070	15,845,730	38,441,340 ( )
보 상 비
이전비․기타		228,628,930	228,628,930	65,637,000	65,637,000	( )	162,991,930

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유

- 상도동 성대시장 주변 침수해소 사업은 대방천을 확장(분배·우회)하는 사업으로 주요 공사구간이 재래시장 및 간선도로 구간으로 민원불편 해소를 위해 야간공사 추진으로 인해 공사가 지연되어 공사비 및 관급비의 사고이월이 불가피함.

첨부  공사계약서 사본.  끝.

청계천 개선보완 사업

(도시안전본부 하천관리과)

□ 사업개요

◦위치 : 청계천 일원(수표교길, 청계광장~중랑천 합류점, 청계천 상류지천)

◦규모

- 수표교길(폭15m 연장500m, 수표교 폭7.5m 연장27.5m)

- 청계천 생태환경 개선(폭 19m 연장 8.12km)

- 청계천 상류 지천복원(폭2~8m, 연장 5.79km)

◦기간 : 2014.6.30. ～ 2015.12.21.

◦총사업비 : 550,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 청계천 개선보완 사업, 시설비, 설계비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		550,000,000	549,983,000	496,691,800	211,295,800	285,396,000	53,308,200
설 계 비		550,000,000	549,983,000	496,691,800	211,295,800	285,396,000	53,308,200
	도 급 비	550,000,000	549,983,000	496,691,800	211,295,800	285,396,000	53,308,200
	관 급 비
보 상 비
이전비․기타

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유

- 관련부서(생태, 역사, 도시계획 등) 합의지연 및 청계천시민위원회(전체, 3개분과)의 검증기간 소요로 설계용역 지연

청계천 개선보완 사업

(하천관리과/도시기반시설본부 방재시설부)

□ 사업개요

◦위치 : 청계천 일원(마전교 ~ 용답육교)

◦규모 : 식재공사 : A= 12,803m2, 수부지 녹화  A= 1,776m2, 수변 수림대 A= 11,027m2

◦기간 : 2014.12.11. ～ 2015.06.30(15.2월말 공정율 0%)

◦총사업비 : 450,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 청계천 개선보완 사업, 시설비, 공사비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '1.3이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		450,000,000	450,000,000	450,000,000	0	450,000,000	0
공 사 비		450,000,000	450,000,000	450,000,000	0	450,000,000	0
	도 급 비	450,000,000	450,000,000	450,000,000	0	450,000,000	0
	관 급 비
보 상 비
이전비․기타

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 설계 용역 지연에 따른 공사발주 및 착공지연

청계천 경사면 식재수종 교체

(하천관리과/도시기반시설본부 방재시설부)

□ 사업개요

◦위치 : 청계천 일원(마전교 ~ 용답육교)

◦규모 : 식재공사 : A= 12,803m2, 수부지 녹화  A= 1,776m2, 수변 수림대 A= 11,027m2

◦기간 : 2014.12.11 ～ 2015.06.30(15.2월말 공정율 0%)

◦총사업비 : 490,392,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 청계천 경사면 식재수종교체(마장2교~축산물시장간),

시설비, 공사비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		490,392,000	490,392,000	353,343,000	0	353,343,000	137,049,000
공 사 비		490,392,000	490,392,000	353,343,000	0	353,343,000	137,049,000
	도 급 비	490,392,000	490,392,000	353,343,000	0	353,343,000	137,049,000
	관 급 비
보 상 비
이전비․기타

◦이월사유

- 청계천시민위원회 제안사업에 대한 용역수행 단계별보고(착수보고, 1차 중간보고, 2차 중간보고)와 청계천시민위원회(전체, 3개분과)의 검증 및 합의지연

- 설계 용역 지연에 따라 공사발주 및 착공지연

하수도정비 기본계획(변경) 수립

(물재생계획과)

□ 사업개요

◦위치 : 관내 하수처리계획구역+하남시 등 5개 수탁도시(742.16㎢)

◦규모 : 하수도시설(하수관로, 물재생센터) 정비 및 개선방안 마련

◦기간 : 2013.7. ～ 2015.3.15.(공정율 90%)

◦총사업비 : 1,958백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수시설 관리, 노후 및 통수능부족관로정비, 하수관로 정비, 하수도관리, 하수도정비기본계획(변경)수립,(206-401-01) 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,560,000,000	1,560,000,000	1,558,297,000	983,000,000	575,297,000 ( )	1,703,000
공 사 비		1,560,000,000	1,560,000,000	1,558,297,000	983,000,000	575,297,000 ( )	1,703,000
	도 급 비	1,560,000,000	1,560,000,000	1,558,297,000	983,000,000	575,297,000 ( )	1,703,000
	관 급 비					( )
보 상 비						( )
이전비․기타						( )

◦이월사유

- 장기계속사업으로 현재 2차분(2014.7.19.~2015.3.15.) 시행중으로 정상추진 중에 있으나 회기내 준공기한 미도래

하수도 사업관리 용역

(물재생계획과)

□ 사업개요

◦위치 : 서울시 전역

◦기간 : 2014.6.9.~ 2015.4.4 (공정률 60%)

◦총사업비 : 356백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수도관리, 하수도사업관리용역, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		400,000,000	374,858,000	356,000,000	142,400,000	213,600,000 ( )	44,000,000
용 역 비		400,000,000	374,858,000	356,000,000	142,400,000	213,600,000 ( )	44,000,000
	도 급 비	400,000,000	374,858,000	356,000,000	142,400,000	213,600,000 ( )	44,000,000
	관 급 비					( )
보 상 비						( )
이전비․기타						( )

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 일반경쟁 입찰결과 응찰업체 수 부족으로 2회 유찰되어 수의계약으로 추진, 용역착수가 지연되어 준공기한 미도래(용역기간 : ‘14.6.9 ~ ’15.4.4)

하수도사업 자산평가 용역

(물재생계획과)

□ 사업개요

◦위치 : 서울시내 전역

◦규모 : 서울시가 소유하고 있는 전체 하수도시설에 대한 자산평가 및 성과물작성(‘14.12현재)

◦기간 : ‘14.8~’15.4.21(공정률 50%)

◦총사업비 : 220백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수도사업특별회계, 하수시설관리, 하수도관리, 하수도사업 자산가액 평가용역, 일반운영비, 사무관리비(201-01)

- 이월세부내역                                           (단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		250,000,000	250,000,000	219,775,000	109,887,500	109,887,500 ( )	30,225,000
용 역 비		250,000,000	250,000,000	219,775,000	109,887,500	109,887,500 ( )	30,225,000
	도 급 비	250,000,000	250,000,000	219,775,000	109,887,500	109,887,500 ( )	30,225,000
	관 급 비					( )
보 상 비						( )
이전비․기타						( )

◦이월사유(구체적으로 기재)

- ‘14.6월 발주 및 입찰공고하였으나 2차에 걸쳐 유찰됨에 따라 계약체결지연, ’14.8 수의계약 체결함

- 해당용역의 과업기간은 ‘14.8~’15.4(착수일로부터 240일간)이므로 미집행액에 대한 사고이월이 필요함

사유지통과 공공하수도 정비방안 용역

(물재생계획과)

□ 사업개요

◦위치 : 서울시 전역

◦규모 : GIS도면상 6,613개소, 148㎞

◦기간 : 2014.7.16.~2015.5.11(공정률 70%)

◦총사업비 : 175백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수시설관리, 하수도관리, 사유지통과 공공하수도 정비방안용역, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		200,000,000	199,950,000	174,620,000	87,310,000	87,310,000 ( )	25,380,000
용 역 비		200,000,000	199,950,000	174,620,000	87,310,000	87,310,000 ( )	25,380,000
	도 급 비	200,000,000	199,950,000	174,620,000	87,310,000	87,310,000 ( )	25,380,000
	관 급 비					( )
보 상 비						( )
이전비․기타						( )

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 동절기 잦은 폭설, 한파로 현장조사의 어려움으로 공정지연 및 사유지 통과 공공하수도 민원 사례(66건)와 자치구 추가 발굴 사례(33건)에 대해 검토·분석 등에 소요기간이 필요하여 준공 연기

2014 하수암거 정밀점검 용역

(도시안전실 물재생계획과/종로구청 안전치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 평창동 99-55외 24개소

◦규모 : □0.8×0.8~6.9×3.2m, L=9,983m

◦기간 : 2015.1.13.～ 2015.8.11.(공정률 10%)

◦총사업비 : 68백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수시설관리, 하수도관리, 노후하수관로조사(중점관리구역), 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		68,057,000	68,057,000	68,057,000		68,057,000	0
공 사 비		68,057,000	68,057,000	68,057,000		68,057,000
	도 급 비			68,057,000		68,057,000
	관 급 비
보 상 비
이전비․기타

◦이월사유

- 도로함몰 원인인 하수관로에 대한 조사 기간이 부족 및 보수∙ 보강 공법 선정에 따른 용역 기간 부족

2014 하수암거 정밀점검 결과 GIS DB 구축 용역

(물재생계획과/종로구청 안전치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 평창동 99-55외 24개소

◦규모 : □0.8×0.8~6.9×3.2m, L=9,983m

◦기간 : 2015.8.12.～ 2015.11.10.(공정률 5%)

◦총사업비 : 12백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수시설관리, 하수도관리, 노후하수관로조사(중점관리구역), 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		11,943,000	11,943,000	10,891,000		10,891,000	1,052,000
공 사 비		11,943,000	11,943,000	10,748,000		10,748,000
	도 급 비			10,748,000		10,748,000
	관 급 비
보 상 비
이전비․기타				143,000		143,000

◦이월사유

- 도로함몰 원인인 하수관로에 대한 조사 기간이 부족 및 보수∙ 보강 공법 선정에 따른 용역 기간 부족

노후하수관로조사(중점관리구역)

(물재생계획과/중구 안전치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 필동로 20~24-1 외 3개소

◦규모 : 정밀점검 □1.5×1.5~2.5×2.0m, L=1,393m

◦기간 : 2014. 12. 30 ～ 2015. 4. 28(공정률 60%)

◦총사업비 : 25백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수도관리, 노후하수관로조사(중점관리구역), 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	25,000,000	25,000,000	19,832,800	4,060,000	15,772,800	5,167,200
용 역 비	25,000,000	25,000,000	19,832,800	4,060,000	15,772,800	5,167,200

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유

- 도로함몰 원인인 하수관로에 대한 조사 기간이 부족 및 보수∙ 보강 공법 선정에 따른 용역 기간 부족

새창로 126 주변 외 8개소 사각형거 정밀점검용역

(물재생계획과/용산구 치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 새창로 126 주변 외 8개소

◦규모 : 정밀점검용역 8개소

◦기간 : 2014. 12. 29 ～ 2015. 05. 30 (공정률 40%)

◦총사업비 : 80백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물재생계획과, 하수시설 관리, 하수도 관리, 노후 하수관로 조사(중점관리구역)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		80,000,000	80,000,000	69,950,000		69,950,000	10,050,000
용 역 비				69,950,000		69,950,000
	도 급 비			69,950,000		69,950,000

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 도로함몰 원인인 하수관로에 대한 조사 기간이 부족 및 보수∙ 보강 공법 선정에 따른 용역 기간 부족

구의강변로 하수암거 외 3개소 정밀점검용역

(물재생계획과/광진구 안전치수방재과)

□ 사업개요

◦위치 : 구의3동 202-1 ~ 구의빗물펌프장 외 3개소

◦규모 : 정밀점검 4개소(▣1~3.0m x 1~2.5m, L=3,800m)

◦기간 : 2014.12.30 ～ 2015.4.28(공정률 20%)

◦총사업비 : 50백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수도관리,노후하수관로조사(중점관리구역),시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		50,000,000	50,000,000	36,680,000		50,000,000 (13,320,000)	-
용 역 비		36,680,000	36,680,000	36,680,000		36,680,000 (-)	-
	도 급 비	36,680,000	36,680,000	36,680,000		36,680,000 (-)	-
	관 급 비
보 상 비
이전비․기타		13,320,000	13,320,000			13,320,000 (13,320,000)	-

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 도로함몰 원인인 하수관로에 대한 조사 기간이 부족 및 보수∙ 보강 공법 선정에 따른 용역 기간 부족

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 구의강변로 하수암거 외 3개소 정밀점검용역

□ 사업기간 : 2014.12.30 ～ 2015.4.28

□ 예산과목 : 하수도관리,노후하수관로조사(중점관리구역),시설비

□ 지출원인행위 미필사유

- 구의강변로 하수암거 외 3개소 정밀점검용역 결과 DB 용역비

13,320,000원은 용역 준공후 정산

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계		13,320,000
	구의강변로 하수암거 외 3개소 정밀점검용역 결과 DB 용역비 1식	13,320,000

확 인 자 :     안전치수방재과장  신상식(인)

조 사 자 :                시설7  박찬선(인)

관내 하수암거 안전점검 용역

(물재생계획과/동대문구 안전치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 용두동104~용두동129 외 10개소

◦규모 : □1.5m×2.0m~3□3.0m×4.0m, L=18,800m

◦기간 : 2014.12.24~2015.5.22 (공정률 40%)

◦총사업비 : 87백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수도 관리, 노후 하수관로 조사(중점관리구역),

시설비및부대비, 시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		87,000,000	87,000,000	76,501,000	0	76,501,000 ( 0)	10,499,000
용 역 비		87,000,000	87,000,000	76,501,000	0	76,501,000 ( 0)	10,499,000
	도 급 비	87,000,000	87,000,000	76,501,000	0	76,501,000 ( 0)	10,499,000
	관 급 비	0	0	0	0	0 ( 0)	0
보 상 비		0	0	0	0	0 ( 0)	0
이전비․기타		0	0	0	0	0 ( 0)	0

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유

- 도로함몰 원인인 하수관로에 대한 조사 기간이 부족 및 보수∙ 보강 공법 선정에 따른 용역 기간 부족

중랑구 관내 노후 사각형거 정밀점검 및 정밀안전진단

(물재생계획과/중랑구청 치수과)

□ 사업개요

◦ 위치 : 묵동 중랑역로15길 156～중랑역로15길 33간등 11개소

◦ 규모 : 20년이상 노후 사각형거 정밀점검 및 정밀안전진단

- 정밀안전점검 : □1.5X1.2～□2@3.50X2.2, L=6,523m

- 정밀안전진단 : □2@3.50X2.2～□4.0X2.0~1.6, L=1,138m

◦ 기간 : 2014. 12. 24.～2015. 05. 22.(공정률 80%)

◦ 총사업비 : 100백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦ 이월내역

- 예산과목 : 하수도관리, 노후하수관로조사(중점관리구역), 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		100,000,000	100,000,000	85,468,000	42,680,000	44,288,000 (1,500,000)	13,032,000
공 사 비						( )
	도 급 비	98,500,000	98,500,000	85,468,000	42,680,000	42,788,000 ( )	13,032,000
	관 급 비					( )
보 상 비						( )
이전비․기타		1,500,000	1,500,000			1,500,000 (1,500,000)

◦ 이월사유(구체적으로 기재)

- 도로함몰 원인인 하수관로에 대한 조사 기간이 부족 및 보수∙ 보강 공법 선정에 따른 용역 기간 부족

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 중랑구 관내 노후 사각형거 정밀점검 및 정밀안전진단

□ 사업기간 : 2014.12.24~2015.05.22

□ 예산과목 : 하수도관리, 노후하수관조사(중점관리구역), 시설비 및

부대비, 시설비

□ 지출원인행위 미필사유

- 정밀점검 및 정밀안전진단용역 2014년 12월말 발주로 인한

건설기술자문회의 개최시기 미도래

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계		1,500,000
자문위원 수당	○ 건설기술자문회의 개최 - 자문위원 수당 100,000원×5인×3회	1,500,000

확 인 자 : 직)중랑구청 치수과장     성명)이 권 구(인)

조 사 자 : 직)지방시설(토목)주사보  성명)박 영 호(인)

강북구 사각형거 정밀안전점검 및 실시설계용역

(물재생계획과/강북구청 안전치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 솔샘로 327 ~ 솔매로 45 외 7개소

◦규모 : 하수암거 2@▣3.0 X 2.0 ~ ▣0.6 X 0.5,   L=4,664m

◦기간 : 2015.01.05. ～ 2015.06.03.(공정률 20%)

◦총사업비 : 금64백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수도관리, 노후하수관로조사, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	1,060,000,000	64,000,000	56,240,000	-	56,240,000 ( )	7,760,000
용 역 비	1,060,000,000	64,000,000	56,240,000	-	56,240,000 ( )	7,760,000
자산 취득비					( )
일반 운영비					( )

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 도로함몰 원인인 하수관로에 대한 조사 기간이 부족 및 보수∙ 보강 공법 선정에 따른 용역 기간 부족

사각형거 정밀안전 점검자료 GIS DB 구축 용역

(물재생계획과/강북구청 안전치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 솔샘로 327 ~ 솔매로 45 외 7개소

◦규모 : 사각형거 정밀안전 점검자료 GIS DB 구축(L=4.664km)

◦기간 : 2014.12.22. ～ 2015.07.30.

◦총사업비 : 금6백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수도관리, 노후하수관로조사, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계	6,000,000	6,000,000	5,700,000	-	5,700,000 ( )	300,000
용 역 비	6,000,000	6,000,000	5,700,000	-	5,700,000 ( )	300,000
자산 취득비					( )
일반 운영비					( )

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 도로함몰 원인인 하수관로에 대한 조사 기간이 부족 및 보수∙ 보강 공법 선정에 따른 용역 기간 부족

공덕·대현배수분구내 하수암거에 대한 정밀안전진단

(물재생계획과/마포구청 치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 마포구 독막로 331외 9개소

◦규모 : □1.0mX1.0m ~ 9.0mX3.0m, L=1,995m

◦기간 : 2015.2 ～  2015.6

◦총사업비 : 88백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수시설관리,하수도관리,노후하수관로조사(중점관리구역),시설비(206-401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		88,000,000	88,000,000	88,000,000	0	88,000,000 (0)	0
용 역 비		88,000,000	88,000,000	88,000,000	0	88,000,000 (0)	0
	도 급 비	88,000,000	88,000,000	88,000,000	0	88,000,000 (0)	0
	관 급 비					( )
보 상 비						( )
이전비․기타						( )

◦이월사유

- 도로함몰 원인인 하수관로에 대한 조사 기간이 부족 및 보수∙ 보강 공법 선정에 따른 용역 기간 부족

신정동 743-2~1293외 8개소 사각형거 정밀 점검 용역

(물재생계획과/양천구청 안전치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 신정동 743-2~1293외 8개소 사각형거 정밀점검 용역

◦규모 : 사각형거(1.8×1.8~3.6×2.1) 정밀점검 L=3,898m

◦기간 : 2014. 12. 29. ~ 2015. 5. 27.(공정률 20%)

◦총사업비 : 50백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수시설관리, 하수도관리, 노후하수관로조사(중점관리구역), 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		50,000,000	50,000,000	44,976,000	-	44,976,000	5,024,000
용 역 비		45,000,000	45,000,000	40,115,000	-	40,115,000	4,885,000
	도 급 비	40,000,000	40,000,000	35,365,000	-	35,365,000	4,635,000
	DB구축	5,000,000	5,000,000	4,750,000	-	4,750,000	250,000
이전비․기타		5,000,000	5,000,000	4,861,000	-	4,861,000	139,000

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 도로함몰 원인인 하수관로에 대한 조사 기간이 부족 및 보수∙ 보강 공법 선정에 따른 용역 기간 부족

양녕로 외 20개소 하수암거 안전점검 및 정밀안전진단용역

(물재생계획과 / 관악구 치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 관악구 성현동 산 101-75 외 20개소

◦규모 : 사각형거 안전점검 L=9.2km

◦기간 : 2014. 12. 24 ~ 2015. 6. 27 (공정률 5%)

◦총사업비 : 86백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시안전실 물재생계획과, 하수시설관리, 하수도관리,

노후하수관로조사(중점관리구역), 시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		86,000,000	86,000,000	74,789,000	0	74,789,000 (0)	11,211,000
용 역 비		86,000,000	86,000,000	74,789,000	0	74,789,000	11,211,000
	도 급 비	86,000,000	86,000,000	74,789,000	0	74,789,000	11,211,000
이전비․기타		0	0	0	0	0 (0)	0

◦이월사유

- 도로함몰 원인인 하수관로에 대한 조사 기간이 부족 및 보수∙ 보강 공법 선정에 따른 용역 기간 부족

양녕로 외 20개소 노후사각형거 GIS DB 구축 용역

(물재생계획과 / 관악구 치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 관악구 성현동 산 101-75 외 20개소

◦규모 : GIS DB 구축 L=9.2km

◦기간 : 2014. 12. 30 ~ 2015. 7. 27 (공정률 5%)

◦총사업비 : 14백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시안전실 물재생계획과, 하수시설관리, 하수도관리,

노후하수관로조사(중점관리구역), 시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		14,000,000	14,000,000	13,450,000	0	13,450,000 (0)	550,000
용 역 비		14,000,000	14,000,000	13,450,000	0	13,450,000	550,000
	도 급 비	14,000,000	14,000,000	13,450,000	0	13,450,000	550,000
이전비․기타		0	0	0	0	0 (0)	0

◦이월사유

- 도로함몰 원인인 하수관로에 대한 조사 기간이 부족 및 보수∙ 보강 공법 선정에 따른 용역 기간 부족

2014년 노후사각형거 정밀점검용역(2차)

(물재생계획과/서초구 물관리과)

□ 사업개요

◦위    치 : 반포동 949∼1318번지 외 31개소

◦규    모 : ▣1.1×1.5∼3.0×3.0m, L=11,766m

◦기    간 : 2014.12.31 ～ 2015.6.28. (공정률 20%)

◦총사업비 : 금100백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수시설관리, 하수도관리, 노후하수관로조사(중점관리구역), 시설비(206-401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		100,000,000	100,000,000	86,040,000	0	86,040,000 (0)	13,960,000
용 역 비		100,000,000	100,000,000	86,040,000	0	86,040,000 (0)	13,960,000
	도 급 비	100,000,000	100,000,000	86,040,000	0	86,040,000 (0)	13,960,000
	관 급 비	-	-	-	-	-	-
보 상 비		-	-	-	-	-	-
이전비․기타		-	-	-	-	-	-

◦이월사유

- 도로함몰 원인인 하수관로에 대한 조사 기간이 부족 및 보수∙ 보강 공법 선정에 따른 용역 기간 부족

필동배수분구 하수관거 종합정비사업

(물재생계획과/중구 안전치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 중구 명동, 광희동, 을지로동 일대

◦규모 : D300mm~▣2.5×2.0m, L=3.2㎞

◦기간 : 2012. 6. 25 ~ 2015. 5. 11(공정률 86%)

◦총사업비 : 38,880백만원(‘14년 5,000백만원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수관로종합정비, 필동배수분구하수관로종합정비,

시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		4,730,000,000	4,730,000,000	4,600,446,310	4,193,446,310	407,000,000	129,553,690
공 사 비		4,303,193,510	4,303,193,510	4,173,639,820	3,766,639,820	407,000,000	129,553,690
	도 급 비	3,817,270,690	3,817,270,690	3,687,717,000	3,280,717,000	407,000,000	129,553,690
	관 급 비	485,922,820	485,922,820	485,922,820	485,922,820	-	-
이전비․기타		426,806,490	426,806,490	426,806,490	426,806,490	-	-

◦이월사유

- 필동배수분구(7,8구역)는 도심지역의 상가가 밀집된 지역으로 PC암거 부설구간에 다수의 지장물(가스, 통신, 한전, 상수도 등)이 존치되어 이설작업시 이설공간 부족과 유관기관 승인절차 이행 및 시험굴착등당일굴착 당일복구로 인한 작업능율 저하와 수방기간 및 동절기 굴착통제로 인한 실작업일수 부족

하계배수분구 하수관로 종합정비

(물재생계획과/노원구 물안전관리과)

□ 사업개요

◦위치 : 하계동, 중계동, 공릉동 일원

◦규모 : L=3,918m,  D=450mm∼1,200mm,

◦기간 : 2014.05.22 ～ 2015.06.20 (공정률 74%)

◦총사업비 : 33,756백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물재생계획과, 하수시설관리, 하수관로종합정비, 하계배수분구하수관로종합정비, 시설비및부대비, 시설비(시비)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		4,730,000,000	4,730,000,000	4,728,667,000	2,574,499,070	2,154,167,930 ( 0 )	1,333,000
공 사 비		4,197,484,000	4,197,484,000	4,197,484,000	2,496,047,390	1,701,436,610 ( 0 )
	도 급 비	3,304,484,000	3,304,484,000	3,304,484,000	2,130,888,000	1,173,596,000 ( 0 )
	관 급 비	893,000,000	893,000,000	893,000,000	365,159,390	527,840,610 ( 0 )
이전비․기타		532,516,000	532,516,000	531,183,000	78,451,680	452,731,320 ( 0 )	1,333,000

◦이월사유

- 공사 추진중 장애발생

· 교통처리계획(서울지방경찰청) 협의지연

· 공사에 저촉되는 열병합관(D450mm) 및 상수도(D300mm) 이설 협의지연

구산1배수분구하수관로종합정비(시설비)

(물재생계획과/은평구 안전치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 은평구 갈현동, 구산동 일원

◦규모 : 하수관거정비 D300~1,100mm,L=4,439m, 하수

암거(□2.0×1.0m), L=20m

◦기간 : 2014. 2. 7 ～ 2015. 3. 18(공정률 62%)

◦총사업비 : 19,715백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수관거종합정비, 구산1배수분구하수관로종합정비,

시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		5,416,000,000	5,416,000,000	5,414,002,920	3,278,368,730	2,135,637,110 ( )	1,997,080
공 사 비		5,261,190,550	5,261,190,550	5,261,190,550	3,266,255,730	1,994,934,820 ( )
	도 급 비	4,298,610,000	4,298,610,000	4,298,610,000	2,715,738,500	1,582,871,500 ( )
	관 급 비	962,580,550	962,580,550	962,580,550	550,517,230	412,063,320 ( )
이 설 비		154,809,450	154,809,450	152,812,370	12,113,000	140,699,370 ( )	1,997,080
감 리 비						( )

◦이월사유

- 주계약자(세준종합건설) 채권압류 및 추심명령 등으로 계약이행이 불가  하여 계약해지 및 새로운 주계약자 선정에 따른 공사지연

구산1배수분구하수관로종합정비(감리비)

(물재생계획과/은평구 안전치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 은평구 갈현동, 구산동 일원

◦규모 : 하수관거정비 D300~1,100mm,L=4,439m, 하수

암거(□2.0×1.0m), L=20m

◦기간 : 2014. 2. 7 ～ 2015. 3. 18(공정률 62%)

◦총사업비 : 19,715백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수관거종합정비, 구산1배수분구하수관로종합정비,

시설비및부대비, 감리비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		262,000,000	262,000,000	262,000,000	242,379,000	19,621,000 ( )
공 사 비
	도 급 비
	관 급 비
이 설 비
감 리 비		262,000,000	262,000,000	262,000,000	242,379,000	19,621,000 ( )

◦이월사유

- 주계약자(세준종합건설) 채권압류 및 추심명령 등으로 계약이행이 불가하여 계약해지 및 새로운 주계약자 선정에 따른 공사지연

도림1배수분구 하수관로 종합정비공사

(물재생계획과 / 영등포구 안전치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 영등포구 대림동 일대

◦규모 : 하수관로 개량 D300~1,500mm, L=49.1km

◦기간 : 2010.08. ～  2023.12.(공정률 35%)

◦총사업비 : 66,707백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수시설관리, 하수관로 종합정비, 도림1배수분구 하수관로 종합정비, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		8,882,000,000	8,882,000,000	8,687,130,550	6,169,417,490	2,712,582,510 (194,869,450)
공 사 비		8,336,440,230	8,336,440,230	8,336,440,230	5,831,827,170	2,504,613,060 ( )
	도 급 비	6,865,499,000	6,865,499,000	6,865,499,000	4,966,876,000	1,898,623,000 ( )
	관 급 비	1,470,941,230	1,470,941,230	1,470,941,230	864,951,170	605,990,060 ( )
보 상 비						( )
이전비․기타		545,559,770	545,559,770	350,690,320	337,590,320	207,969,450 (194,869,450)

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 공사 발주 전 조달청 계약업무 절차 이행등으로 인하여 사업 착공이 지연되어 사고이월이 불가피함.

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 도림 1 배수분구 하수관로 종합 정비공사

□ 사업기간 : 2010.8. ~ 2023.12.

□ 예산과목 : 하수시설관리, 하수관로 종합정비, 도림1배수분구 하수관로 종합정비, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 지출원인행위 미필사유

- 본 공사는 장기 계속 공사로써 금회분 공사가 계약심사 업무 및 조달청 사전 계약절차 이행 등으로 착공이 지연되고, 동절기 공사 중단 등으로 사고이월이 불가피 하고,

- 하수관로 매설 등으로 굴착시, 지하매설물 등의 이설이 불가피하여 미필 원인행위 사고이월 코자 함.

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계		194,869,450
상수도	D300mm × 500,000 × 100m= 50,000,000 D200mm × 400,000 × 100m= 40,000,000 D100mm × 350,000 × 100m= 35,000,000 D20mm × 200,000 × 100m= 20,000,000	145,000,000
도시가스	D20mm ~ 50mm × 400,000 × 100m= 40,000,000	40,000
기타 부대공	1식 : 9,869,450	9,869,450

확 인 자 :      직) 지방시설사무관     성명) 박송한    (인)

조 사 자 :      직) 지방시설주사       성명) 유주옥    (인)

신림4배수분구 하수관거 종합정비사업(2014년구간)

(물재생계획과 / 관악구 치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 관악구 신사동, 조원동 일원

◦규모 : 하수관 신설 및 개량 D450~1,500mm L=1,726m

PC박스 신설 및 개량 □3.0m×1.5m~2@4.0m×2.5m L=100m

◦기간 : 2014. 3. 5 ~ 2015. 5. 31 (공정률 85%)

◦총사업비 : 40,700백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시안전실 물재생계획과, 하수시설관리, 하수관거종합정비, 신림4배수분구 하수관로종합정비, 시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		4,869,000,000	4,869,000,000	4,146,973,170	2,984,877,890	1,884,122,110 (722,026,830)	0
공 사 비		3,321,699,900	3,321,699,900	3,321,699,900	2,285,994,620	1,035,705,280	0
	도 급 비	2,605,977,000	2,605,977,000	2,605,977,000	1,836,651,300	769,325,700	0
	관 급 비	715,722,900	715,722,900	715,722,900	449,343,320	266,379,580	0
이전비․기타		1,547,300,100	1,547,300,100	825,273,270	698,883,270	848,416,830 (722,026,830)	0

◦이월사유

- 신림4배수분구 하수관로 종합정비사업(2014년) 구간은 신림2빗물펌프장 신설공사와 연계되어 시행하는 공사로 신림2빗물펌프장 가동 전 배수체계 변경은 취약지역 배수에 지장을 줄 수 있으며,
특히 고지배수로 내 역사이펀을 개량하는 사업으로서 고지배수로 상류구간 유역면적이 넓어(4.0×2.5m) 우기철 물돌리기가 절대 불가한바,
비 수방기간인 10월 15일에 공사가 착공되었으며 불가피하게 동절기 공사가 진행되고 있는 실정임.

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 신림4배수분구 종합정비사업(2014년 구간)

□ 사업기간 : 2014. 3. 5 ~ 2015. 5. 31

□ 예산과목 : 도시안전실 물재생계획과, 하수시설관리, 하수관거종합정비, 신림4배수분구 하수관로종합정비, 시설비(401-01)

□ 지출원인행위 미필사유

- 본 공사는 고지배수로 역사이펀 구간을 개선하고 배수체계를 변경하는 공사로 공사에 수반되는 도시가스, 통신, 수도 등 지하매설물의 이설시기 미도래

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계		722,026,830
	도시가스 이설비	251,735,000
	상수도 이설비	170,000,000
	통신이설비 등(폐기물 포함)	300,291,830

확 인 자 : 직) 치수과장  성명) 고 영 준 (인)

조 사 자 : 직) 시설7급   성명) 백 중 현 (인)

효자배수분구(광화문지역) 하수관로 개선사업 기본 및 실시설계

(물재생계획과)

□ 사업개요

◦위치 : 광화문지역(경복궁역 사거리~세종문화회관~광화문역사거리)

◦기간 : 2014.5.16 ~ 2015.3.11(공정률 : 80%)

◦총사업비 : 548백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수도사업특별회계, 하수도시설관리, 하수관로 신설개량, 효자배수분구 방재성능향상 중기대책, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		710,000,000	640,343,000	547,900,000	164,000,000	383,900,000 ( )	162,100,000
설 계 비		710,000,000	640,343,000	547,900,000	164,000,000	383,900,000 ( )	162,100,000
	도 급 비					( )
	관 급 비					( )
보 상 비						( )
이전비․기타						( )

◦이월사유

- ‘14년 3월에 발주, 5월에 계약 및 착수된 사업으로 준공기간 미도래
(용역기간 :2014.5.16 ~ 2015.3.11.)

신촌 현대백화점주변 침수방지공사

(물재생계획과/서대문구청 안전치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 서대문구 창천동 62번지 ~ 마포구 노고산동 56번지 일대

◦규모 : 하수관 부설  D=450 ~ 1,500mm,   L=1,146m

◦기간 : 2014. 6. 17 ～ 2015. 4. 30 (공정률 70%)

◦총사업비 : 4,947백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수관로 신설개량, 신촌현대백화점주변 침수해소, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		5,000,000,000	4,947,203,000	4,465,222,710	1,877,125,440	2,588,097,270 ( 0 )	534,777,290
공 사 비		4,921,150,000	4,868,353,000	4,395,951,710	1,877,125,440	2,518,826,270 ( 0 )	525,198,290
	도 급 비	3,024,670,000	2,971,873,000	2,566,850,000	1,295,051,000	1,271,799,000 ( 0 )	457,820,000
	관 급 비	748,724,000	748,724,000	691,987,900	387,060,340	304,927,560 ( 0 )	56,736,100
	이 전 비	1,147,756,000	1,147,756,000	1,137,113,810	195,014,100	942,099,710 ( 0 )	10,642,190
폐기물용역		78,850,000	78,850,000	69,271,000	0	69,271,000 ( 0 )	9,579,000

◦이월사유

- 비굴착 압입공법 추진중 지중매설물(강관파일, 파이프, 호박돌 등) 돌출 및 토사유실로 신촌로 지반보강 선행작업에 따른 사업 지연

- 동절기 굴착통제에 따른 공사지연 및 절대공기 부족

한강로 일대 방재시설 확충사업

(물재생계획과/용산구 치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 용산구 한강로3가 40-2 ~ 한강대교

◦규모 ┏ 비개착공사 : D2,400mm×1열, 연장 L=164.0m

┣ 비개착공사 : D1,800mm×2열, 연장 L=151.0m

┗ 개착공사   : D1,800mm×2열, 연장 L=109.0m

◦기간 : 2014.11.07. ～ 2016.11.05. (공정률 1%)

◦총사업비 : 50,258백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시안전실 물재생계획과, 하수시설 관리, 하수관로 신설개량, 한강로 일대 방재시설 확충사업(유역분할), 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		3,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	103,750	1,999,896,250	1,000,000,000
공 사 비			1,979,527,430	1,979,527,430		1,979,527,430
	도 급 비		1,740,000,000	1,740,000,000		1,740,000,000
	관 급 비		239,527,430	239,527,430		239,527,430
이전비․기타			20,472,570	20,472,570	103,750	20,368,820

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 한강로 일대 방재시설 확충사업(빗물펌프장 설치) 반대 집단민원 발생에 따라 빗물펌프장 착공이 어려웠으며, 대안 검토 및 민원 설득 과정에 많은 시일이 소요되었으며, 대안으로 검토된 펌프장 위치변경안 확정시 관로공사 구간 변경이 불가피한 상황으로 관로공사 추진이 불가하였음.

가양이마트~가양빗물펌프장간 하수암거 정비공사

(물재생계획과/강서구 물관리과)

□ 사업개요

◦위치 : 가양동 가양빗물펌프장~등촌동 대동황토방아파트간

◦규모 : 3@3.0×2.5m, L=340m, 3@2.5×2.5m, L=116m

◦기간 : 2012. 3. 19 ～ 2015. 12. 31(총괄) (공정률 62.5%)

◦총사업비 : 12,360백만원(시비)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수관거 신설·개량,  가양이마트~가양빗물펌프장간

하수암거정비, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		4,000,000,000	4,000,000,000	3,992,077,120	1,801,430,590	2,190,646,530 ( 0 )	7,922,880
공 사 비			1,807,640,000	1,756,770,590	1,756,770,590	( 0 )	0
	도 급 비		1,453,190,000	1,453,190,000	1,453,190,000	( 0 )	0
	관 급 비		354,450,000	303,580,590	303,580,590	( 0 )	0
폐기물 처리 용 역 비			56,940,000	44,660,000	44,660,000	( 0 )	7,922,880
이전비․기타			2,135,420,000	2,190,646,530	0	2,190,646,530 ( 0 )	0

◦이월사유

- 증미역 교차로구간 하수암거 설치구간내 저촉되는 지장물  상수도관로(D1200m, D700mm, D300mm 2열), 도시가스 및 한전선로 등 이전비 지출 시기 미도래

강서구청사거리~가양빗물펌프장간 하수암거 정비공사

(물재생계획과/강서구 물관리과)

□ 사업개요

◦위치 : 서울시 강서구 가양동 1485-5번지 일대

◦규모 : 하수암거 2@▣3.0 x 2.5m L=1,200M

◦기간 : ‘14.2.12~’16.2.17(공정률 75%)

◦총사업비 : 10,476백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수시설관리, 하수관거 신설ㆍ개량, 강서구청사거리~가양빗물펌프장간 하수암거정비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		10,476,500,000	10,476,500,000	10,475,224,000	3,888,454,800	6,586,769,200	1,276,000
공 사 비		6,891,003,460	6,891,003,460	6,891,003,460	2,783,522,060	4,107,481,400 (0)	0
	도 급 비	6,116,755,760	6,116,755,760	6,116,755,760	2,453,199,510	3,663,556,250 (0)	0
	관 급 비	774,247,700	774,247,700	774,247,700	330,322,550	443,925,150 (0)	0
보 상 비						(0)	0
이전비․기타		3,585,496,540	3,585,496,540	3,584,220,540	1,104,932,740	2,479,287,800 (0)	1,276,000

◦이월사유

- 시점부(1단계, 가양아파트 교차로) 현장타설 암거 구간의 지장물(열배관, 한전지중선)로 인한 협의 및 이설로 인한 절대공기 부족

- 공사 시행사 부도(2단계)로 인해 재발주 등 행정절차로 인한 공사추진 지연

영등포7가 62-3~63-2 외 3개소 하수관개량공사

( 물재생계획과/ 영등포구 안전치수과 )

□ 사업개요

◦위치 : 영등포7가 62-3~63-2 외 3개소

◦규모 : 하수관로 개량 D1,200~D1,350mm, L=313mm

하수관로 비굴착  D600~1,000mm, L=1,087.8mm

◦기간 : 2014.08.11.~2015.06.30 (공정률 15%)

◦총사업비 : 1,311백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수관거 신설개량, 영등포7가 62-3~63-2 외 3개소
하수관개량, 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역                                           (단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,600,000,000	1,402,341,000	1,390,562,370	324,539,350	1,066,023,020 (46,616,000)	209,437,630
공 사 비			1,324,099,370	1,324,099,370	309,692,350	1,014,407,020 ( )
	도 급 비		1,220,725,000	1,220,725,000	252,188,000	968,537,000 ( )
	관 급 비		103,374,370	103,374,370	57,504,350	45,870,020 ( )
보 상 비						( )
이전비․기타			78,241,630	66,463,000	14,847,000	51,616,000 (46,616,000)

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 지장물협의(한전)지연에 따른 공사 추진이 다소 늦어 절대공사기간 부족

지출원인행위 미필 이월명세서

□ 사 업 명 : 영등포7가 62-3 ~ 63-2 외 3개소 하수관 개량공사

□ 사업기간 : 2014.08.11~2015.06.30

□ 예산과목 : 도시안전실 물재생계획과, 하수시설관리, 하수관거 신설개량, 영등포7가 62-3 ~ 63-2 외 3개소 하수관개량, 시설비

□ 지출원인행위 미필사유

- 본 공사 시행시 지장물 이설비, 폐기물 처리비 등이 필요함에 따라 미필원인행위 사고이월코자함

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
합 계		46,616,000
상수도 이설비	D100mm × 50m × 350,000 =17,500,000 D20mm × 50m × 200,000 =10,000,000	27,500,000
폐기물 처리비	500 t × 30,000 = 15,000,000	15,000,000
기타 부대비	1식 : 4,116,000	4,116,000

확 인 자 :      직) 지방시설사무관     성명) 박송한    (인)

조 사 자 :      직) 지방시설주사       성명) 유주옥    (인)

역삼동814~서초동1304번지 간 하수관거 확장공사

(물재생계획과/서초구 물관리과)

□ 사업개요

◦위치 : 역삼동814~서초동1304번지

◦규모 : 하수관 단면확장

▸ D1,000mm → □2.0×1.5m, L=44m(이면도로 구간) : 현재완료

▸ D1,000mm → D1,000mm(기존관) + □1.5×1.0m(추가), L=48m(강남대로횡단구간)

◦기간 : 2013.04.28 ～ 2015.05.31 (공정률 70%)

◦총사업비 : 700백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수관로신설개량, 역삼동814~서초동1304하수관거확장 시설비 및 부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	700,000,000	0
공 사 비			371,200,780	371,200,780	0	371,200,780 ( )	0
	도 급 비		303,619,070	303,619,070	0	303,619,070 ( )	0
	관 급 비		67,581,710	67,581,710	0	67,581,710 ( )	0
보 상 비						( )
이전비․기타			328,799,220	328,799,220	0	328,799,220	0

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 강남대로 횡단구간 교통소통 대책 심의 및 지장물저촉으로 인안 공법 선정에 따른 공사기간 절대 부족

방배로 하수암거 신설공사(방배역~내방역 간)

(물재생계획과/서초구청 물관리과)

□ 사업개요

◦위치 : 방배역 ~ 반포천간

◦규모 : 하수암거 신설 ▣4.0×4.0m~3.0×2.5m, L=2.1㎞

◦기간 : 2013.11.29. ~ 2015.11.18.(공정률 25%)

◦총사업비 : 23,531백만원(시비)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수도사업특별회계, 도시안전실 물재생계획과, 하수시설관리, 하수관거 신설․개량, 방배로 사각형거 신설, 시설비(시비)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	4,680,736,950	1,319,263,050	0
공 사 비				3,692,719,800	2,803,891,750	888,828,050	0
	도 급 비			3,337,400,000	2,635,600,000	701,800,000	0
	관 급 비			355,319,800	168,291,750	187,028,050	0
보 상 비				0	0	0	0
이전비․기타				2,307,280,200	1,876,845,200	430,435,000	0

◦이월사유

- 내방역 주변 상수도 및 도시철도공사 접지선 이설공사 신규 발생에 따른 공사물량 증가로 공사기간 부족

암사역주변 침수해소를위한 기본 및 실시설계 용역

(물재생계획과 / 강동구 치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 강동구 암사동,천호동 암사역 일대(올림픽로,상암로,선사로)

◦규모 : 관거 신,증설 개량 D=600mm~□3.5m, L=2,673m

◦기간 : 2014. 4.30 ~ 2015.5.31 (공정률 80%)

◦총사업비 : 27,947백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 도시안전실물재생계획과,하수시설관리,하수관로신설개량,
암사역주변침수해소,시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,100,000,000	1,024,540,000	937,589,550	449,065,710	488,523,840 ( )	162,410,450
도 급 비		1,100,000,000	1,024,540,000	937,589,550	449,065,710	488,523,840 ( )	162,410,450
	용 역 비	1,100,000,000	1,024,540,000	937,589,550	449,065,710	488,523,840 ( )	162,410,450
	관 급 비					( )
보 상 비						( )
이전비․기타						( )

◦이월사유

- 건설기술진흥법 시행령75조에 의거 설계용역의 경제성(VE)검토에 따라 검토기간 소요

수색교 하부 하수관로 이설공사 실시설계용역

(물재생계획과/은평구 안전치수과)

□ 사업개요

◦위    치 : 수색교 하부

◦규    모 : 하수관로 실시설계 2.44km

- 하수관 정비(확관) : D800 ⇒ D900 ~ 1,500mm,L=0.47km

- 하수관 정비(신설 및 개량) : D300 ~ 1,000mm, L=1.97km

- 기존 하수관(옹벽내 매설) 폐쇄 : D800mm, L=0.52km

◦기    간 : ‘14.12.30 ～ ’14.04.28 (공정률 20%)

◦총사업비 : 74백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수관로 신설개량, 하수시설물 긴급복구 및 정비, 시설비 및 부대비, 시설비(206-401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		74,334,000	74,334,000	65,010,000	-	65,010,000 ( )	9,324,000
용 역 비		74,334,000	74,334,000	65,010,000	-	65,010,000 ( )	9,324,000
	도 급 비					( )
	관 급 비					( )
보 상 비						( )
이전비․기타						( )

◦이월사유

- 철도시설 관리 기관 협의 및 용역기간 절대 부족

양평동 77~265간 사각형거 개량공사

(물재생계획과/영등포구 안전치수과)

□ 사업개요

◦위치 : 영등포구 양평동 77~265

◦규모 : 사각형거 개량 및 보수․보강 ▣1.5~2.5×1.5m, L=750m

◦기간 : 2014.05.07 ～ 2015.03.31(88%)

◦총사업비 : 1,520백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수시설 관리, 하수관로 신설개량, 양평동77~265간 사각형거 개량, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,400,000,000	1,400,000,000	1,399,484,580	1,148,938,410	250,546,170 ( )	515,420
공 사 비			1,320,952,000	1,320,952,000	1,070,405,830	250,546,170 ( )
	도 급 비		926,530,000	926,530,000	705,133,000	221,397,000 ( )
	관 급 비		394,422,000	394,422,000	365,272,830	29,149,170 ( )
보 상 비						( )
이전비․기타			79,048,000	78,532,580	78,532,580	( )	515,420

◦이월사유

- 현장 여건 변동으로 인한 잔여공종 품질확보를 위한 절대공기 부족으로 공기 연장

월정로28길 156~월정로17길10외 1개소 하수암거 보수보강공사

(물재생계획과/강서구 물관리과)

□ 사업개요

◦위치 : 월정로28길 156 ~월정로17길 10외 1개소

◦규모 : 하수암거 단면보수 2,376㎡, 구조물(슬라브) 보강 29개소

◦기간 : 2015.1.12 ～ 2015.7.11. (공정률 10%)

◦총사업비 : 1,230백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 하수관로 보수보강, 월정로1가, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,250,000,000	1,230,391,000	1,084,610,440	36,972,940	1,047,637,500 (0)
공 사 비		1,092,451,000	1,075,732,000	940,088,500		940,088,500 ( 0)
	도 급 비	1,077,241,000	1,060,522	924,878,500		924,878,500 ( 0)
	관 급 비	15,210,000	15,210,000	15,210,000		15,210,000 ( 0)
용 역 비		50,000,000	47,110,000	36,972,940	36,972,640	0 ( 0)
이전비․기타		107,549,000	107,549,000	107,549,000		107,549,000 (0)

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 도로 함몰 원인인 하수 구조물 보수보강에 공사 기간 절대 부족

서남물재생센터 시설현대화

(물재생시설과/도시기반시설본부 방재시설부)

□ 사업개요

◦위치 : 강서구 마곡동 91(서남물재생센터 내)

◦규모 : 고도처리 115만톤/일, 현대화 36만톤/일, 기존존치 12만톤/일

◦기간 : '09.11.09 ～ '15.08.09 (15.2월말 현재 공정율 37%)

◦총사업비 : 302,400백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물재생시설 개선, 서남물재생센터 시설현대화, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		30,780,000,000	30,780,000,000	30,780,000,000	13,005,907,000	17,774,093,000	0
공 사 비		30,288,000,000	30,288,000,000	30,288,000,000	12,588,000,000	17,700,000,000	0
	도 급 비	30,288,000,000	30,288,000,000	30,288,000,000	12,588,000,000	17,700,000,000	0
기타 (폐기물)		492,000,000	492,000,000	492,000,000	417,907,000	74,093,000	0

◦이월사유

- ‘13년 예산배정 지연으로 4차공사(`13.11.21계약) 발주가 늦어져

‘14년 예산집행 부진

- 총인 국비 90억 배정(`13.12.31)이 지연되어, 설계변경기간소요 및 총인처리시설 관련 5차공사(14.7월)계약이 늦어짐에 따라 사고이월 발생(5차 준공시기:`15.8)

※ 폐기물처리용역(4차) 준공시기 미도래 (※준공기한 : 2015.8.30)

※ 시설현대화공사(6차) 준공시기 미도래 (※준공기한 : 2015.8.9.)

서남물재생센터 시설현대화

(물재생시설과/도시기반시설본부 방재시설부)

□ 사업개요

◦위치 : 강서구 마곡동 91(서남물재생센터 내)

◦규모 : 고도처리 115만톤/일, 현대화 36만톤/일, 기존존치 12만톤/일

◦기간 : '09.11.30 ～ '15.07.27 (15.2월말 현재 공정율 55%)

◦총사업비 : 10,153백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물재생시설 개선, 서남물재생센터 시설현대화, 시설비및부대비, 감리비(401-02)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
용 역 비		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	745,000,000	255,000,000	0
	도 급 비	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	745,000,000	255,000,000	0

◦이월사유

- 시설공사와 연동하여 책임감리용역(6차) 준공시기 미도래

난지물재생센터 환경개선

(물재생시설과/도시기반시설본부 방재시설부)

□ 사업개요

◦사업명 : 난지물재생센터 환경개선사업(단기사업) 실시설계 용역

◦위치 : 경기도 고양시 덕양구 자유로 116번지 일대(난지물재생센터 內)

◦규모

- 주민친화시설 조성 : 212,895㎡(차폐수림대 별도)

※ 주요시설 : 운동시설(축구장, 배드민턴장 등), 조경시설(산책로, 캠핑장, 힐링농원 등)

- 악취개선사업 등

◦기간 : 2014.11.14 ～ 2015.9.9 (15.2월말 현재 공정율 30%)

◦총사업비 : 1,400백만원(도급비 1,022백만원)

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물재생시설 개선, 난지물재생센터 환경개선, 시설비및부대비

시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
용 역 비		1,400,000,000	1,281,350,000	1,021,900,000	306,000,000	715,900,000	378,100,000
	도 급 비	1,400,000,000	1,281,350,000	1,021,900,000	306,000,000	715,900,000	378,100,000

◦이월사유

- ‘14.6 기본설계용역이 준공됨에 따라 사전절차 이행후 ’14.9에 실시설계용역을 발주하여 준공시기(‘15.9) 미도래

※ 기본설계준공(‘14.6), 기술용역타당성심사(’14.8), 용역발주심의(‘14.8), 사업수행능력평가 및 심의(’14.9), 실시설계 용역 발주(‘14.9), 입찰공고(’14.9), 용역개찰(‘14.10), 용역계약 및 착수(’14.11)

서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업

(물재생시설과/도시기반시설본부 설비부)

□ 사업개요

◦위치 : 서울특별시 강서구 양천로 201(서남물재생센터 내)

◦규모 : 분뇨처리시설 4,000ton/일

◦기간 : 2012.11.15 ～ 2015.07.18(15.1월말 현재 31%)

◦총사업비 : 73,200백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물재생시설 개선, 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업,
시설비및부대비, 시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
공 사 비		21,230,000,000	21,209,000,000	20,597,962,740	5,440,386,510	15,157,576,230	632,037,260
	도 급 비	13,782,000,000	13,782,000,000	13,782,000,000	3,612,000,000	10,170,000,000	-
	관 급 비	7,427,000,000	7,416,550,000	6,805,512,740	1,817,936,510	4,987,576,230	621,487,260
	폐 기 물	21,000,000	10,450,000	10,450,000	10,450,000	-	10,550,000

◦이월사유

- 3차공사 ‘14.11월 착공하여 ’15.7월 준공 예정으로 준공시기 미도래

- 관급자재가 ‘14.10월 발주하여 ‘15.5월 반입예정 설치시기 미도래

- 가시설 공법변경(‘13.9~’14.5)으로 공사기간 추가소요

(어스앵커 7단 → 어스앵커 2단 + 스트러트)

서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업

(물재생시설과/도시기반시설본부 설비부)

□ 사업개요

◦위치 : 서울특별시 강서구 양천로 201(서남물재생센터 내)

◦규모 : 분뇨처리시설 4,000ton/일

◦기간 : 2012.11.15 ～ 2015.07.18(15.1월말 현재 31%)

◦총사업비 : 73,200백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물재생시설 개선, 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업,
시설비및부대비, 감리비(401-02)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
감 리 비	870,000,000	869,600,000	869,099,000	369,832,000	499,267,000	901,000

◦이월사유

- 시설공사 준공시기(`15.7)에 연동하여 감리용역 준공시기 미도래

차집관거 성능개선

(물재생시설과/서초구 물관리과)

□ 사업개요

◦사업명 : 양재천 차집관거 성능개선 공사(서초구)

◦위치 : 양재천(수영장~무지개다리)

◦규모 : 차집관거 확대개량

‣ 좌안(추가신설) D=400mm : L=1,123m

‣ 우안(확대개량) D=500~600mm→D=700~800mm : L=627m

◦기간 : 2014.07.22 ～ 2015.05.30 (공정율 55%)

◦총사업비 : 6,726백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물재생시설개선, 차집관거성능개선, 시설비및부대비,
시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		2,770,369,000	2,770,369,000	2,770,369,000	1,006,279,100	1,764,089,900	0
공 사 비		2,460,909,310	2,460,909,310	2,460,909,310	1,006,279,100	1,454,630,210	0
	도 급 비	1,763,983,290	1,763,983,290	1,763,983,290	887,304,000	876,679,290	0
	관 급 비	696,926,020	696,926,020	696,926,020	118,975,100	577,950,920	0
이전비․기타		309,459,690	309,459,690	309,459,690	0	309,459,690	0

◦이월사유

- 하천내 공사로 우기공사 중단되어 공사지연

※ 서울시계약심사(‘14.4.14~5.7), 예산배정요청(’14.5.8), 서초구일상감사(‘14.6),

입찰공고(’14.6.18), 공사개찰(‘14.7.03), 공사착수(’14.7.22), 준공예정(‘15.05.30)

복개하천 주변 악취방지공사

(물재생시설과/중랑물재생센터 물재생과)

□ 사업개요

◦위치 : 중랑물재생센터

◦규모 : 중랑천 등 악취방지 시설설치

◦기간 : 2014.12.31～ 2015.6.30.(15.2월말 공정율:55%)

◦총사업비 : 1,729,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물재생시설개선, 복개하천 주변 악취방지공사, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
공 사 비		1,729,000,000	1,729,000,000	1,455,316,580	848,931,280	606,385,300	273,683,420
	도 급 비	1,729,000,000	1,729,000,000	1,455,316,580	848,931,280	606,385,300	273,683,420

◦이월사유

- 하천내 공사로 인한 우기중 공사중단에 따른 공사 지연

- 공사개소가 여러 곳에 산재(10개 자치구)되어 있어 공기 지연

- 복개하천 주변의 악취방지사업을 유형에 따라 6개 공사로 나누어 자체 설계 발주함에 따라 4개 공사는 완료되었으나, 잔여 2개 공사는 준공시기(‘15.6.30) 미도래

※ 예산배정요청(’14.12.3), 입찰공고(’14.12.11.), 공사개찰(‘14.12.17),

공사착수(’14.12.31), 준공예정(‘15.06.30.)

탄천물재생센터 복개공원화(4단계)

(물재생시설과/도시기반시설본부 방재시설부)

□ 사업개요

◦위치 : 서울시 강남구 개포로 625(탄천물재생센터 제2처리장)

◦규모 : 구조물복개 A=33,978㎡,보도육교1개소(폭4.5m,연장16m),

복개상부 공원화 및 주민친화시설조성 A=36,920㎡,

관리동 및 화장실 1개소

◦기간 : 2013.10.1 ～ 2016.10.22. (38%)

◦총사업비 : 33,383백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물재생시설 개선, 탄천물재생센터 복개공원화(4단계),

시설비및부대비, 시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		8,000,000,000	8,000,000,000	7,989,960,070	7,228,284,430	761,675,640	10,039,930
공 사 비		7,870,929,840	7,870,929,840	7,870,929,840	7,109,254,200	761,675,640	0
	도 급 비	7,329,947,000	7,329,947,000	7,329,947,000	7,032,220,000	297,727,000	0
	관 급 비	540,982,840	540,982,840	540,982,840	77,034,200	463,948,640	0
이전비․기타		129,070,160	119,030,230	119,030,230	119,030,230	0	10,039,930

◦이월사유

- 관급자재 심의지연으로 관급자재 사용시기 미도래

탄천물재생센터 복개공원화(4단계)

(물재생시설과/도시기반시설본부 방재시설부)

□ 사업개요

◦위치 : 서울시 강남구 개포로 625(탄천물재생센터 제2처리장)

◦규모 : 구조물복개 A=33,978㎡,보도육교1개소(폭4.5m,연장16m),

복개상부 공원화 및 주민친화시설조성 A=36,920㎡,

관리동 및 화장실 1개소

◦기간 : 2013.10.1 ～ 2016.10.22. (38%)

◦총사업비 : 33,383백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물재생시설 개선, 탄천물재생센터 복개공원화(4단계),

시설비및부대비, 감리비(401-02)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
감 리 비	500,000,000	500,000,000	500,000,000	435,062,000	64,938,000	0

◦이월사유

- 시설공사와 연동하여 감리용역 집행시기 미도래

마곡지구내 재생수 공급(하수도특별)

(물재생시설과/도시기반시설본부 방재시설부, 설비부)

□ 사업개요

◦위치 : 강서구 마곡동 91(서남물재생센터 내)

◦규모 : 재생수처리시설 20,000톤/일

◦기간 : 2011.11.1～2016.7.31(15.2월말 현재 공정율 72%)

◦총사업비 : 18,300백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물재생시설 개선, 마곡지구내 재생수공급, 시설비및부대비,

시설비(401-01)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		5,734,400,000	5,734,400,000	5,619,572,380	1,570,595,810	4,048,976,570	114,827,620
공 사 비		5,709,271,600	5,709,271,600	5,594,443,980	1,545,467,410	4,048,976,570	114,827,620
	도급비	3,470,550,310	3,470,550,310	3,355,722,690	1,270,820,200	2,084,902,490	114,827,620
	관급비	2,238,721,290	2,238,721,290	2,238,721,290	274,647,210	1,964,074,080	0
기타 (폐기물)		25,128,400	25,128,400	25,128,400	25,128,400	0	0

◦ 이월사유

- 마곡지구 택지개발사업이 도시계획 변경 등으로 재생수 공급시기가 2014년 10월에서 2016년 6월로 연기되어 기계 및 전기공사 일시정지 (행정2부시장 방침 294호, ‘13.9.23)및 사업기간 연기 등 사업계획 변경으로 사고이월 하고자 함.

마곡지구내 재생수 공급(하수도특별)

(물재생시설과/도시기반시설본부 방재시설부, 설비부)

□ 사업개요

◦위치 : 강서구 마곡동 91(서남물재생센터 내)

◦규모 : 재생수처리시설 20,000톤/일

◦기간 : 2011.11.1～2016.7.31(15.2월말 현재 공정율 72%)

◦총사업비 : 18,300백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 물재생시설 개선, 마곡지구내 재생수공급, 시설비및부대비,

감리비(401-02)

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분	예산현액(A) '13이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
감 리 비	112,000,000	112,000,000	112,000,000	56,000,000	56,000,000	0

◦ 이월사유

- 마곡지구 택지개발사업이 도시계획 변경 등으로 재생수 공급시기가 2014년 10월에서 2016년 6월로 연기되어 기계 및 전기공사 일시정지 및 사업기간 연기 등 사업계획 변경으로 사고이월 하고자 함.

제2처리장 유량조정 및 침전조설치공사

(중랑물재생센터)

□ 사업개요

◦위치 : 중랑물재생센터 #3벨트탈수동 옆

◦규모 : 유량조정 및 침전조 V=2,210㎥

◦기간 : 2014.12.29 ～ 2015.12.20.(15.2월말 공정율:15%)

◦총사업비 : 금1,500,000,000원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 중랑물재생센터, 중랑물재생센터운영관리, 중랑물재생센터운영관리, 중랑물재생센터 공통분야 유지보수, 시설비및부대비, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		1,000,000,000	1,000,000,000	999,975,430	69,102,000	930,873,430 ( - )	24,570
공 사 비		1,000,000,000	1,000,000,000	999,975,430	69,102,000	930,873,430 ( - )	24,570
	도 급 비	982,339,570	982,339,570	982,315,000	69,102,000	913,213,000 ( - )	24,570
	관 급 비	17,660,430	17,660,430	17,660,430	-	17,660,430 ( )	-
보 상 비		-	-	-	-	( )	-
이전비․기타		-	-	-	-	( )	-

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 당초 계획에 없던 기본 및 실시설계 용역 시행으로 용역착수가 지체되었고, 인력 부족으로 설계용역 발주가 지연됨에 따라 공사발주가 지연됨

분뇨처리장 유입저류조 증설

(중랑물재생센터)

□ 사업개요

◦위치 : 중랑물재생센터

◦규모 : 분뇨 유입저류조 5,000㎥ 증설 및 부대설비

◦기간 : ‘14.10.7~’15.6.15 (15.2월말 현재 공정율 60%)

◦총사업비 : 2,512백만원

□ 사고이월 요구 세부내역

◦이월내역

- 예산과목 : 중랑물재생센터운영관리, 오니처리유지보수, 시설비

- 이월세부내역

(단위 : 원)

구 분		예산현액(A) '12이월비 제외	(재)배정액 (B)	원인행위액 (C)	지 출 액 (D)	사 고 이 월 액(E) (원인행위미필액)	집행잔액 (A-(D+E))
계		2,512,000,000	2,512,000,000	2,220,127,350	463,609,700	1,756,517,650 ( )	291,872,650
공 사 비		2,512,000,000	2,512,000,000	2,220,127,350	463,609,700	1,756,517,650 ( )	291,872,650
	도 급 비	1,953,200,000	1,953,200,000	1,676,379,240	450,164,700	1,226,214,540 ( )	276,820,760
	관 급 비	558,800,000	558,800,000	543,748,110	13,445,000	530,303,110 ( )	15,051,890
보 상 비						( )
이전비․기타						( )

※ 용역 및 물품 구매인 경우에도 상기 서식에 준하여 작성(구분란에 용역비, 자산취득비, 일반운영비 등 기재)

◦이월사유(구체적으로 기재)

- 사업추진에 1년이상 소요 : 사전절차(기술심사, 설계, 계약심사 등) 이행 및 5개월 이상의 공사기간 필요(동절기 제외)

- ‘14.2~3월 기술용역타당성심사, ‘14.4~7월 설계용역, ‘14.7~8월 계약심사 및 계약의뢰(재무과),  ‘14.9월 계약체결,  ‘14.10월~’15.6월 공사시행