투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전[공사중지(2015. 4.16.)]

1.업무지시현장 : 의주로 지하차도 평면화 공사 (주)삼보기술단, 의주로 지하차도 평면화 공사 천명토건 주식회사

2.작 성 일 자 : 2015-04-16 00:04:00

3.지 시 내 용:

가. 『의주로 지하차도 평면화공사』와 관련 2015. 4.16일부로 공사중지를 지시하오니 별도의 지시가 있을 때까지 공사를 중단하고,

나. 공사연장에 따른 간접공사비 등은 향후 설계변경에 반영할 예정이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

다. 현장 및 안전관리 등 마무리 하여 주시기 바랍니다.  끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							이상욱			터널건설과장					04/16 권혁대
협조자				주무관						강철규
시행			토목부-7748									(						)		접수											(						)
우	120-715					서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화								/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개