함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	동부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	동일로 송배수관정비공사 관련 예산증액 검토요청 회신

1. 동부급수운영과-8712호(2015.4.14.)와 관련입니다.

2. 2015년 노후 송배수관 정비사업과 관련 동일로 송배수관정비공사 예산증액 요청건에 대하여 아래와 같이 검토 회신하오니 예산집행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

❍ 예산 조정 내역

공 사 명	공사개요	예산 조정 현황(백만원)
		당 초	변 경	증․감
동일로 송배수관정비공사	D=1,000mm L=700m	1,700	2,000	증) 300
아차산로 배수관 부설공사	D=200~500mm L=470m	900	600	감) 300

- 조정사유

∙ 아차산로 배수관 부설공사 도면심사시 일부 구간(광장동336-8~145-8간) 기존관(D=DP300mm,L=170m) 활용에 따라 부설연장 감소(D=300mm, L=170m).  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	신근호		배수과장	이임섭		급수부장	04/16 이규상
협조자
시행	배수과-2494	(		)	접수		(		)
우	121-030	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1437	/전송	3146-1429	/	smile1010@seoul.go.kr	/	대시민공개