등록번호

푸른도시과-6083

★주무관

자연생태팀장

푸른도시과장

등록일자

2015.4.8.

결재일자

2015.4.8.

공개구분

부분공개

협  조

2015년 산사태 예방 사방공사 낙찰차액 사용계획

[연희동 141-29 외 7개소]

서 대 문 구

【푸른도시과】

2015년 산사태 예방 사방공사 낙찰차액 사용계획

[연희동 141-29 외 7개소]

우리과에서 시행중인 「2015년 산사태 예방 사방공사(연희동 141-29 외 7개소)」의 실시설계 중 관급자재의 단가 적용에 오류가 있어, 이에 대한 변경 구매를 위한 낙찰차액 사용 계획임

Ⅰ		사 업 개 요

▢ 사 업 명 : 2015년 산사태 예방 사방공사(연희동 141-29 외 7개소)

▢ 사업기간 : 2015. 04. 08. ∼ 06. 30

▢ 도 급 자 : 이엔텍건설(주) 대표 양남용

▢ 사 업 비 : 금915,323천원(재배정액)

[도급비 : 금769,232,080원, 관급비 : 금36,931,350원]

Ⅱ		사 용 배 경

▢ 실시설계 용역 결과물 검토 결과 관급자재(식물매트-줄사철)의 단가 적용이 1/10로 적용되어(원가 : 14,000원 → 적용가 : 1,400원), 설계에 반영된 수량(1,399매) 확보를 위하여 낙찰차액을 활용하여 변경구매가 필요함

※ 예산 범위 안에서 식생매트 89매 선 구매

Ⅲ		검 토 사 항

대 상 지	검토 사항	증감액
연희동 산118-1	- 현재 선 구매 된 식생매트 89매에서 설계 적용 물량인 1,399매로 변경 구매 필요 · 89매(1,252,720원)→1,399매(19,691,760원)	증)18,439,040원

Ⅳ		낙찰차액 사용계획

▢ 상기 검토 내용을 낙찰차액을 활용하여 공사에 반영하고자 함

공사명	재배정액	①발주금액	②계약금액	③낙찰차액 [②-①]
2015년 산사태 예방 사방공사 (연희동 141-29 외 7개소)	915,323,000	총공사비 914,901,350 도급비 877,970,000 관급비 36,931,350	총공사비 806,163,430 도급비 769,232,080 관급비 36,931,350	108,737,920

Ⅴ		검 토 사 항

▢ 낙찰차액을 활용하여 원설계에 반영된 식생매트 물량을 변경 구매하여, 사업 진행에 만전을 기하고자 함[낙찰차액 사용 액 : 금18,439,040원]

끝.