문서번호	전시과-1472
결재일자	2015.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
	전시과장	학예연구부장	서울역사박물관장
홍현도	정명아	박현욱	04/17 강홍빈
협 조
	경영지원부장		박형중
	총무과장		연규승

상설 2존 정동모형 제작 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.   4.   .

서울역사박물관

(전시과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

상설 2존 정동모형 제작 설치 계획

상설 2존의 중심영역에 있는 정동지역 그래픽을 모형으로 제작 설치하여 대한제국의 상징적 공간인 정동을 생생하고 입체적인 모습으로 관람객에게 전시하고자 함

Ⅰ		사업 개요

□ 개  요

○ 사 업 명 : 상설 2존 정동모형 제작 설치

○ 사업기간 : 2015. 4 ～ 7

○ 투입예산 : 70,000천원

○ 사업장소 : 서울역사박물관 상설전시 2존

○ 사업내용 : 정동지역 모형 제작설치, 바닥전시물 철거

□ 추진방향

○ 전통과 근대의 공존을 추구한 대한제국의 상징적 공간 표현

○ 각국 공사관, 교육기관, 종교시설 등 서양식 건물들과 신문물 강조

○ 1903년 지도를 활용하여 당시 필지와 가로, 물길을 재현

○ 정동모형 설치공간 주변 환경과의 조화로운 채색, 디자인 고려

□ 모형 개요

○ 제작규모 : 5m × 3.6m(18㎡)

○ 제작비율 : 1/250 내외

○ 제작대상 : 경운궁, 한양도성, 각국 공사관, 교육 ∙ 종교 시설

○ 모형 제작 범위

― 대한제국의 상징인 경운궁과 환구단을 중심에 배치

― 한양의 중심가로인 운종가와 남대문로 포함

Ⅱ		추진 계획

□ 제작도면 작성

○ 기본도면 : 문화재청 경운궁 복원계획 내 도면 활용

○ 제작도면 : 건축물 형태별(한옥, 양관 등) 제작도면 작성

□ 모형 방식

○ 지형 : 현재의 수치지형도와 1930년대 지형도를 비교 제작

○ 필지 : 1903년 지도를 활용하여 판 형태로 표현

○ 건축물

― 주요 건축물 : 도면과 사진자료를 활용하여 재현

― 주변 건축물 : 외곽 확인 건축물 블록으로 표현

Ⅲ		예 산

□ 필요예산 : 총 70,000천원

○ 예산항목 - 서울역사박물관, 역사와문화의복합공간창조, 시민의이용도증가, 상설전시실유지운영, 일반운영비, 사무관리비

구 분	예산액(천원)	예산과목
정동지역 모형 제작 설치	70,000	사무관리비(100-201-01)
바닥 전시물 철거
총 계	70,000

Ⅳ		추진 일정

□ 진행 사항

○ 2015. 3.  1. ~ 30.	도면 자료 수집

○ 2015. 4. 15.	추진 계획 수립

□ 향후 추진 일정

○ 2015. 4. 16. ~ 22.	발주 및 계약

○ 2015. 4. 23. ~ 5. 15.	제작도면 작성

○ 2015. 5. 16. ~ 7. 25.	모형 제작

○ 2015. 7. 26. ~ 7. 27.	모형 설치 및 바닥 전시물 철거

Ⅴ		성과 지표

□ 12. 관람 환경의 적정성

□ 13. 고객만족도

□ 18. 전시기획 및 운영