투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	하도급 변경계약 알림(용비교~행당중간 도로개설공사)

1. 평화엔지니어링 PH15-용행감-090호(2015. 4.22.)와 관련입니다.
2. 우리부에서 시행중인『용비교~행당중간 도로개설공사』의 하도급 변경

계약 내역을 알려드리오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 용비교~행당중간 도로개설공사

나. 수 급 사 : 한신공영(주)

다. 하도급 계약                                              (단위:원)

하수급사	하도급 공종명	구분	하도급공사기간	도급액	하도급액	하도급율	비고
㈜오케이건설	EPMA 가설교량공사	당초	2011.01.24. ~2014.12.31.	2,938,100,000	2,303,400,000	78.40%
		변경	2011.01.24. ~2015.05.31.	3,120,590,000	2,359,500,000	75.61%
㈜아르케포럼건설	포장공사	당초	2012.07.06. ~2014.12.31.	136,070,000	239,140,000	175.75%
		변경	2012.07.06. ~2015.12.31.	113,300,000	217,800,000	192.23%
홍진공영(주)	기존구조물 철거공사	당초	2014.05.21. ~2015.12.31.	108,075,000	89,199,000	82.53%
		변경	2014.05.21. ~2015.03.31.	115,500,000	100,100,000	86.67%

붙 임 : 건설공사의 하도급계약서 각 1부.  끝.

	토목부장
주무관	이상욱		터널건설과장	권혁대		토목부장	04/24 노우성
협조자	주무관	강철규
시행	토목부-8545	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2571	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개