투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	9호선2단계 917공구 기계설비 및 자동제어설비공사 하도급공사기간 변경계약서류 송부

1. 유탑기감 2014-479(2014.10.8.) 및 유탑기감 2014-480(2014.10.8.)호와

관련입니다.

2. 지하철 9호선2단계 917공구 건설공사와 관련하여 감리단으로부터 기계분야 기계설비공사와 자동제어공사의 하도급 공사기간 등에 대한 변경계약이 통보되어 송부하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 하도급 변경계약 내용

구 분	원도급 업체명	하도급 업체명	하도급 부분금액 (천원)	하도급액 (천원)	하도급율	공사기간
[기계설비공사] : 하도급 공사기간 변경
당 초	GS건설(주)	㈜한산씨피에스	4,231,940	3,598,240	84.81%	‘13.4.1~’14.8.31
변 경	“	“	4,231,940	3,598,240	84.81%	‘13.4.1~’14.12.31
[자동제어공사] : 하도급 공사기간 및 하도급율 변경
당 초	GS건설(주)	㈜한산씨피에스	381,600	336,000	88.21%	‘13.4.1~’14.8.31
변 경	“	“	392,019	336,000	85.86%	‘13.4.1~’14.12.31

※ 자동제어 하도급율 변경사유

: 물가변동율 4회[3.18%,기준시점(12.1.31)]로 하도급부분금액은 증가하였으며,

물가변동 기준시점 이후에 하도급계약(13.4.1) 체결되어 하도급금액 조정을 미적용.

붙임 : 1. 감리단 검토서 각 1부.

2. 하도급계약서류 각 1부(별도송부). 끝.

	도시철도설비부장
주무관	장병선		설비계획과장	강재천		도시철도설비부장	10/10 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-9216	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울시 중구 삼일대로 231 남산별과 4층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)772-7295	/전송	02)772-7308	/		/	대시민공개