문서번호	역사문화재과-9646
결재일자	2015.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	문화재활용팀장	역사문화재과장
최영미	박달경	05/01 황요한

2015 운현궁 문화재 시설 보수공사계획

2015. 5.

문화관광디자인본부

(역사문화재과)

2015 운현궁 문화재 시설 보수공사계획

방문객에게 개방중인 운현궁의 노후 문화재를 보수하여 전통의 아름다움을 살리고 문화재 관리·보호에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		운현궁 현황

소 재 지 : 종로구 운니동 114-10(사적 제257호 : ‘77.11.22.지정)

시설규모 : 대지 7,300㎡, 건물 1,302.36㎡

시 설 물 : 이로당, 노락당, 노안당, 수직사, 유물전시관, 기획전시관 등

전 시 물 : 대원군가 유품, 생활가구, 전통복식 등 793점

운현궁 전경

Ⅱ		추진 경위

2012. 5. 15 : 문화재 위원 조사 실시

□ 흰개미 목조피해, 균열 회벽, 우기시 처마 부식으로 보수공사 필요

2012. 11. 26 ~ 2013. 4. 2 : 운현궁 보수 실시(133백만원)

□ 전통가옥 처마 보수, 소방 시설 설치 등

2013. 10. 24 ~ 2014. 1. 21 : 운현궁 보수 공사 실시(55백만원)

□ 전통가옥의 지붕, 담장 및 가옥 내의 노후화된 회벽 보수 등

2014. 4. 25 : 문화재 위원 조사 실시

□ 흰개미 목조피해, 균열 회벽, 우기시 처마 부식으로 보수공사 필요

2014. 10. 6 ~ 2015. 3. 17 : 운현궁 보수 공사 실시(153백만원)

□ 수직사 : 흰개미 피해기둥 동바리 보수, 마루밑 방습용 생석회 다짐 등

□ 노락당 : 북행각 흰개미 피해기둥 약제처리, 인방재 교체 등

□ 이로당 : 협문 부식부 보존수지처리 등

□ 노안당 : 서행각 박공판 부식부 교체

Ⅲ		2015년 보수 계획

사업기간 : 2015. 5. ~ 12

□ 2015.  6 ~  8 : 설계용역(현상변경 포함)시행

□ 2015.  9 ~ 12 : 공사계약 및 보수실시

보수내용 : 유물전시관(흥선대원군 시절 창고) 및 정문 벽면(※ 첨부 참고)

※ ①, ②를 우선 보수하고 ③, ④를 예산에 맞추어 집행

① 전시관 도리 2개

② 전시관 쪽마루 전면

③ 전시관 기둥 동바리

소요예산 : 50백만원 (국비 : 35백만원, 시비 : 15백만원)

□ 역사문화유산의 계승 발전, 역사문화유산의 보존복원, 전통문화시설 운영, 운현궁 위탁운영, 시설비(401-01)

Ⅳ		행정사항

행정사항

□ 설계 및 시공 추진(도시기반시설본부)

- 전시관 쪽마루와 기둥 동바리 및 정문 둔태 우선 시행

- 시민에게 개방되고 있는 문화재이므로 운현궁 행사 성수기인 5∼9월 사이 설계 등 선행절차 완료하고, 10월부터 공사실시

□ 발주 부서에 예산 재배정(역사문화재과)

별첨 : 2015년 보수 대상 1부.  끝.