투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	북일종합건설(주) 대표이사 이충무 귀하
(경유)
제목	공사시행 협의

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사와 계약체결하여 추진중인「율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사」의 문화재 원형복원에 따른 지하차도 구조물 변경 및 종단선형 조정에 대한 변경설계가 마무리되어 감에 따라 공사의 시급성을 감안하여 아래와 같이 공사시행 방안을 협의하오니 귀 사의 의견을 조속 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 공사시행

- 당초 공사에 설계변경으로 추진토록 하고, 최종단가 적용은 우리시 계약심사시 결정된 단가를 반영 적용

나. 설계변경시(우선공사 착수분 포함)  단가적용

- 기 계약공종의 계약물량은 계약단가 적용

- 증가된 물량 및 신규공종은 낙찰율 적용

다. 시행시기 : 시행협의와 별도로 시공가능 부분은 우선 추진.  끝

.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박천용		광역도로과장	진재섭		토목부장	01/15 노우성
협조자
시행	토목부-857	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2558	/전송	02-3708-2599	/	park8370@seoul.go.kr	/	대시민공개