문서번호	동남권공공개발추진단-3792
결재일자	2015.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호	행정2부시장 방침 제151호

						시 민
주무관	동남권공공개발추진반장		동남권공공개발추진단장		도시재생본부장		행정2부시장
김정아	김용학		권해윤		이제원		05/07 이건기
협 조
	문화체육관광본부장					이창학
	체육시설관리사업소장					이구석
	개발사업팀장					고현정
	주무관					우인식

잠실종합운동장 일대 도시재생 구상

국제공모 시행계획(안)

2015. 5

도 시 재 생 본 부

(동남권공공개발추진단)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□	기자현장설명회, 보도자료
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

잠실종합운동장 일대 도시재생 구상

국제공모 시행계획(안)

국제교류복합지구의 핵심공간인 잠실종합운동장 일대에 대해 국내․외 전문가를 대상으로 공모를 실시하여 창의적 아이디어를 발굴하고 사회적 공감대를 형성하고자 함

1		추진배경 및 현황

□ 추진배경

○ 잠실종합운동장 일대의 장소성과 잠재력을 재조명하고 국제교류복합지구에 부합하는 미래상을 새롭게 정립하는 창의적인 아이디어 발굴

○ 국제교류복합지구 조성사업에 대한 국내외 전문가들의 관심 제고 및 성공적 사업 추진기반 조성

□ 그 간 추진현황

○ 종합발전계획 발표(`14. 4.) 후 도시관리계획 수립 중(`14. 7.~)

○ 시민․전문가 의견 수렴계획 수립 후 공모, 자문회의 등 추진(`14.10.~)

- 천만상상오아시스(`14.11.~12.), 시민 아이디어 공모(`15. 1.~3.) 시행

- 시민 공모결과는 국제공모 기획 및 마스터플랜 수립에 반영

○ 국제공모 관련 전문위원단 구성 및 운영, 관리용역 시행(`15. 1.~ )

- 전문위원단 회의 6회 실시 및 외부전문가 자문회의 2회 실시

○ 수상자 인센티브 관련 유관부서 협의(`15. 4.14)

- 주경기장 리모델링 설계공모에 대한 지명초청권 부여 관련 협의

2		국제공모 시행계획

□ 국제공모 개요

○ 공 모 명 : 잠실종합운동장 일대 도시재생 구상 국제공모

○ 공모방식 : 기본구상 수준의 공개 국제공모(단일단계)

○ 공모범위 : 한강․탄천을 포함한 잠실종합운동장 일대 약 948,000㎡

- 필요 시 범위 확대, 코엑스․구 한전 부지 등 주변지역 연계방안 제안

○ 참가자격 : 도시, 건축, 조경, 부동산개발, 경영, 관광, 문화 등

관련 분야 국내․외 전문가

○ 주요 공모내용 : 토지이용, 건축 등 물리적 계획 및 프로그램 등 제안

- 문화․스포츠 산업의 새로운 흐름을 선도하는 기능 제안

- 주변지역과의 연계, 실현가능성 등을 고려한 도시 경쟁력 제고방안

- 토지이용, 건축, 보행, 교통, 공원 및 녹지, 경관 등 물리적 계획

○ 기본전제 및 필수 도입기능

- 올림픽대로, 탄천 변 동․서로 지하화, 동부간선도로 램프 및 탄천주차장 이전

- 주경기장 및 보조경기장(리모델링, 제1종 공인경기장), 야구장(25,000석), 다목적 실내체육관(12,000석), 수영장(1급 공인수영장), 전시․컨벤션 시설(15,000㎡ 이상)

□ 심사 및 시상계획

○ 심사위원 선정

- 역    할 : 국제교류복합지구 조성방향에 적합한 응모작품 평가․심사

- 선정방법 : 도시계획, 건축, 조경, 부동산개발 등 관련 분야 권위자 중 전문위원단의 추천을 통해 후보자 1~3순위 선정

- 선정결과 : 총 7인(국내 4, 국외 3)

‣ 구자훈(한양대 교수)	‣ Niall Kirkwood(하버드대 교수)

‣ 김영준(김영준도시건축 대표)	‣ Alejandro Zaera-Polo(AZPML 대표)

‣ 오동훈(서울시립대 교수)	‣ Roland Villinger(McKinsey & Company Senior Partner)

‣ 김남춘(단국대 교수)	‣ 예비심사위원 : 김갑성(연세대 교수)

○ 평가기준 : 창의성(40), 경제성(30), 공공성(15), 국제성(15)

- 개략적 기준은 공모지침에서 제시, 세부기준은 심사위원회에서 결정․평가

○ 시상내역 : 8개 작품 총 상금 4억5천만 원

- 우수작 3개 작품 각 1억 원, 가작 5개 작품 각 3천만 원

- 후속사업(주경기장 리모델링) 설계공모 시 지명초청권 부여

□ 국제공모 활성화방안

○ 추진방향 : 시기, 대상, 범위의 다각화를 통하여 홍보효과 제고

○ 사전(참가등록 전) : 공모 참가가능한 전문가 대상 홍보, 참여 유도

- 공모 공식홈페이지(http://www.jamsil-idea.org) 구축․운영, 홍보물 제작․배포

- 관련 분야 국내․외 전문 매체, 공모 전문 홈페이지 게재

- 기존 공모참가자, 각종 위원회 및 자문단 등 전문가 대상 메일링 실시

- 보도자료 작성, 언론 대상 현장설명회 개최(`15. 4.30.) 등

○ 사후(심사 후) : 일반시민 대상 공모결과 공유, 공감대 형성

- 시민 대상 온라인투표 실시 검토(서울시 엠보팅 활용, 시민공감상 시상 등)

- 시상식과 연계하여 당선작 설명회, 토론회 개최 검토

- 온․오프라인 및 찾아가는 전시회(송파구, 잠실종합운동장 등) 개최 검토 등

□ 공모결과 활용계획

○ 논의, 자문 등을 거쳐 국제교류복합지구 마스터플랜 수립에 반영

○ 공모결과 및 마스터플랜을 바탕으로 후속사업 추진 예정

3		행정사항 및 향후일정

□ 행정사항

○ 소요예산 : 시상내역 450백만원

- 예산과목 : 도시재생본부, 동남권공공개발추진단, 도시재생 및 공공개발, 국제교류복합공간 육성, 동남권 국제교류복합지구 조성계획 수립, 시설비(401-01)

○ 관련 부서 협조사항

- 공고 및 공고문 게재 : 정보공개정책과

- 서울시 홈페이지 배너 게시 : 정보화기획담당관

- SNS 등 활용 홍보 : 뉴미디어담당관

- 전광판 및 지하철 영상매체 홍보 : 시민소통담당관

- 작품접수, 보관, 심사 및 시상식 장소 협조 : 시민소통담당관, 총무과

□ 향후일정

○ 공고 및 참가등록 : `15. 5. 6. / `15. 5. 6.~ 6. 2.

○ 현장조사 및 설명회 : `15. 6.10.

○ 질의접수 및 응답 : `15. 6. 3.~ 6.12. / `15. 6.19.

○ 작품접수 : `15. 8.11.~ 8.12.

○ 작품심사 : `15. 9. 1.~ 9. 2.

○ 당선작발표 : `15. 9. 4.

○ 시상식 및 전시회 : `15. 9.16. / `15. 9.16.~ 9.25.

붙임 : 1. 공고문(안) 1부.

2. 공모지침(안) 1부.

3. 심사위원 약력 1부.  끝.