투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(도로시설과장)
(경유)
제목	예산 확보 요청

1. 도로시설과-20223(2014.11.19.)호 및 시설보수과-4392(2014.11.25.)호와 관련입니다.

2. 위 대호에 의거 『옥수, 금호터널 보도 차단벽 설치공사』를 장기계속공사로 시행중에 있으나, 2015년 예산 미확보로 공사 추진에 어려움이 있어 잔여예산 확보를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 예산 확보 요청내역

(단위:백만원)

구 분	예 산 액
	계	설계비	도급비	관급비	폐기물처리비 등
총 사 업 비	2,808	55	753	1,988	12
2014년 예산	1,550	55	373	1,116	6
예산 확보 요청액	1,258	-	380	872	6

○ 공사 진행 사항 및 문제점

- 2014년 예산(1차분)으로 옥수, 금호터널 상행선(약수역 방향) 공사중                    (공정률 50%)이며, 보도차단벽 공장 제작후 2015년 6월까지 설치를                     완료할 예정임

- 잔여 사업비 1,258백만원 미확보시 옥수, 금호터널 상행선(약수역 방향)

공사 완료후 타절 준공이 불가피하며, 타절 준공후 별도 공사로 발주시                    물가상승, 낙찰차액 발생 등으로 예산의 추가 소요가 예상됨

- 옥수, 금호터널 상행선(약수역 방향) 완료후 하행선(옥수역 방향) 공사                    지연시, 공사 미시행에 따른 주민들의 민원 발생이 예상됨

붙 임 : 2014년도 공사시행계획 및 예산확보 요청 공문 사본 1부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	이경수		시설보수과장	박춘배		성동도로사업소장	05/13 이종엽
협조자
시행	시설보수과-1719	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 성동구 자동차시장길 41(용답동)	/
전화	02-2210-1552	/전송	02-2210-1562	/	leesoo@seoul.go.kr	/	대시민공개