문서번호	시설과-3477
결재일자	2015.5.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
이동헌		남상국	05/13 이종한
협조

용산가족공원 재정비사업 폐기물 처리용역

설계변경사항 검토결과보고

2015. 5.

중부공원녹지사업소

시설과

용산가족공원 재정비사업 폐기물 처리용역

설계변경사항 검토결과보고

「용산가족공원 재정비사업 폐기물처리용역」과 관련하여 물량증가에 따른 설계변경사항을 아래와 같이 검토 보고드림.

□ 용역현황

❍ 사 업 명 : 용산가족공원 재정비사업 폐기물처리용역

❍ 용역기간 : 2014. 12. 18 ~ 2015. 5. 16

❍ 도 급 액 : 3,400,000원

❍ 도 급 자 : 서울환경 대표 양성희(운반), ㈜아이케이 대표 이상진(처리)

□ 설계변경사항

❍ 변경물량

구분	설계변경(안)	비고
폐기물 운반 및 처리	▶ 콘크리트 철거작업시 당초 설계물량보다 증가함(현장실정) -폐콘크리트 운반 : 47.98㎥ → 85㎥ -폐콘크리트 처리 : 110.35톤 → 195.50톤

❍ 변경금액

구 분		공 사 비(원)			비 고
		당 초	변 경	증 감
도급액	공급가액	3,090,909	5,460,000	증) 2,369,091
	부가가치세	309,091	546,000	증) 236,909
	계	3,400,000	6,006,000	증) 2,606,000

□ 보고자 의견

❍ 설계시 수량산출량에 비해 실제 작업시 폐콘리트 등 폐기물 발생물량이 증가한 사항으로 계근량에 맞춰 설계변경 처리하고자 하며,

❍ 추가 소요예산은 남산및산하공원시설물보수정비 시설비 중 ‘용산공원, 간데메공원, 중랑캠핑숲 시설물보수’의 예산잔액을 활용하고자 함.

- 예산과목 : 남산및산하공원시설물보수정비, 시설비(100-401-01)

붙임 1. 변경내역서 1부.

2. 현황사진 1부.  끝.