문서번호	토목부-10447
결재일자	2015.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
장기철		서관석	05/20 노우성
협조
	주무관		오열상

감리용역(전체3회, 1차3회) 설계변경 검토보고

(잠실역 버스환승센터 조성사업 감리용역)

2015. 5.

도시기반시설본부

(토 목 부)

감리용역(전체3회, 1차3회) 설계변경 검토 보고

(잠실역 버스환승센터 조성사업 감리용역)

「잠실역 버스환승센터 조성사업 전면책임감리용역」의 감리원 투입계획 변경에 따른 설계변경 검토보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 수성 제2015-1796호(2015. 5.15) : 설계변경 내역서(전체3회, 1차3회) 제출

Ⅱ		용역개요

○ 용 역 명 : 잠실역 버스환승센터 조성사업 전면책임감리용역

○ 계약금액 : 4,488,440천원 (1차 : 1,500,000천원)

○ 용역기간 : 2014. 5.26. ∼ 2016.11.25. (1차 : 2014. 5.26. ∼ 2015. 5. 8.)

○ 감 리 사 : ㈜수성엔지니어링 외 4

○ 시 공 사 : 롯데건설㈜

○ 시 행 사 : 롯데물산㈜ 외 2

Ⅲ		감리단 보고내용

○ 보조감리원 퇴사 및 교체로 인한 감리원 투입계획 변경

구 분	투입계획 변경 현황			비 고
	성 명	배치등급	투입일자
당 초	편 진 범	감 리 사	-	퇴사(2015. 4.17.)
당 초	장 민 수	감 리 사	-	퇴사(2015. 4.25.)
변 경	홍 재 문	감 리 사	2015. 05.06.

○ 설계변경 현황

구 분	용역기간			용역비(천원)
	당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
전체	2014. 5.26. ~2016.11.25.	2014. 5.26. ~2016.11.25.	-	4,630,240	4,630,240	0
1차	2014. 5.26. ~2015. 5.21.	2014. 5.26. ~2015. 5.28.	증 7일	1,500,000	1,500,000	0

Ⅳ		조치계획

○ 상주감리원 퇴사로 인해 감리원 투입계획 변경과 1차 용역기간 연장이 필요하여 설계변경코자 함.

붙 임 : 1. 변경내역서(1차) 1부.

2. 변경내역서(전체) 1부.  끝.