문서번호	도시철도설비부-5444
결재일자	2015.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	신호과장		도시철도설비부장		도시철도국장		도시기반시설본부장
협 조
	송변전과장
	시설전기과장
	차량과장
	설비계획과장
	정보통신과장

-

하남선 건설사업 관련

위탁요청사업 추진방안 검토 보고

2015.  5.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	도시철도공사
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

	하남선 건설사업 관련 위탁요청사업 추진방안 검토 보고

우리 본부에서 추진중인 하남선(5호선 연장)건설사업과 관련 도시철도

공사에서 요청한 위탁사업에 대한 추진방안 검토 내용을 아래와 같이 보고함

■ 근거 : 서울시 도시철도공사 국내사업처-302(2015.1.28.)「하남선(5호선 연장) 건설사업 관련 기존 전동차 개량 외 2건 사업 위탁요청」

위탁요청사업(3건) 개요

Ⅰ

□ 기존전동차 개량사업

- 요청 사유 : 운영기관 소유 및 운영 시설물로 사업효과 증대

□ 종합관제실 개수사업

- 요청 사유 : 운영기관 주관 추진하므로 편의성 증대

□ SE사업

- 요청 사유 : SE부문 해외사업 진출 필수실적 확보

추진경과

ⅡⅠ

1. 기존전동차 개량사업 외 2개 사업 위탁요청 : 2015.1.28.

(도시철도공사 → 도시기반시설본부 도시철도설비부)

2. 위탁요청사업 1차 검토 회의 : 2015.4.14.

1) 기존 전동차 개량사업

• 도시철도공사 : 전동차 성능 개선, 전동차 운용효율 극대화

• 도시기반시설본부 : 차상신호를 국산화 하는 방안을 검토 할 것

2) 종합관제실 개수사업

• 도시철도공사 : 망분리장치 도입 등을 통한 관제시스템 보안성 확보

• 도시기반시설본부 : 양 공사 및 관제 통합 등 상위계획을 포함한                              추진방안 재 검토

3) SE사업

• 도시철도공사 : 안전성, 가용성 확보위해 기존 운영사가 수행하는게 타당함

• 도시기반시설본부 : 사업의 효율성 등 재검토 필요

회의결과 : 건별 구체적인 업무범위, 효율성, 추진방법 등                      재 작성 후 2차 회의 실시

3. 위탁요청사업 2차 검토 회의 : 2015.4.27.

1) 기존전동차 개량사업

• 도시철도공사 : 신조차 구매사업에 포함 추진이 경제적으로 유리

• 도시기반시설본부 : 우리본부 신조차 구매사업에 포함 시행 검토

2) 종합관제실 개수사업

• 도시철도공사 : 열차관제사와 유지관리자 의견반영 시스템 효율성 증대

• 도시기반시설본부 : 기존 관제설비와 별도 공간에 신규설비로 설치

되므로 우리본부에서 주관 시행 검토

3) SE사업

• 도시철도공사 : 도철공 운영노하우 등을 활용해 최적의 시스템 구축 가능

• 도시기반시설본부 : SE업무는 건설부문에 속하지만 도철공의 업역                                     확장 및 해외 진출을 위해 실적을 확보하는 것                                     이므로 도철공에 위탁하는 방안 검토

회의결과 : 회의내용을 토대로 내부의견 조율하고 도시교통본부                     의견 수렴 후 위탁여부를 도철공에 통보 예정

위탁사업별 검토내용

ⅢⅡⅠ

□ 교통정책과 의견

- 교통본부는 도시철도 운영기관을 지원하는 업무특성 상 도시철도           공사가 원한다면 위탁을 지원하는 입장임(도시철도관리팀장)

□ 우리본부 의견

• 기존전동차 개량공사

- 우리본부에서 연장구간용 신규차량구매 사업에 포함하여            추진함이 타당

• 종합관제실 개수공사

- 기존 관제설비와 별도공간에 설치되어 5호선 열차운행과              간섭 없으므로 우리본부에서 주관 시행함이 타당

(경기도와 기술정책적 일관성 유지)

• SE 사업

- 도철공의 운영경험을 토대로 업역 확장 및 해외 진출을             위해 실적을 확보하는 것이므로 도철공에 위탁하는 것이 타당

검토결과

ⅣⅢⅡⅠ

□ 기존차량 개량공사 : 우리본부에서 시행

□ 종합관제실 개량공사 : 우리본부에서 시행

□ SE 사업 : 도시철도공사에 위탁

행정사항

ⅤⅣⅢⅡⅠ

□ 우리본부 검토결과를 도시철도공사에 통보.

□ 도시철도공사에 SE업무 관리계획서 제출 요청.  끝.