문서번호	토목부-11532
결재일자	2015.6.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	진재섭	06/04 代서관석

차량방호울타리 형식 변경 검토보고

(남부순환로 개봉역앞 구조개선공사)

2015. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

차량방호울타리 형식 변경 검토보고

(남부순환로(개봉역앞)구조개선공사)

북측도로 종점부 보도신설구간 차량방호울타리(SB4등급)에 대하여 실정보고 승인이 되었으나, 승인된 제품으로 설치시 최근 식재한 가로수에 저촉이 되어 동급 제품으로 형식변경을 위한 검토보고 임.

※ 실 시공물량으로 정산시행 보고(토목부-10360호<2015.5.20.>)

공사개요

○ 위    치 : 구로구 개봉동 234-1 ~ 198-1(개봉역 일대)

○ 사업규모 : 지하차도 설치 폭 4차로, 연장 736m

- 남·북측 측도설치 : 폭 2~3차로, 연장 2,280m

○ 사업기간 : 2007. 9. ~ 2015. 6.30.

○ 총사업비 : 58,597백만원

○ 시 공 사 : ㈜케이에스씨건설외 1사

○ 감 리 사 : ㈜동명기술공단외 1사

검 토

○ 실정 보고 승인된 차량방호울타리(SB4등급)는 최근 식재한 가로수에 저촉이 되어 설치가 불가함으로 동급 제품으로 형식변경이 필요함.

○ 형식변경에 따른 자재비 증가가 있으나, 시공사 귀책이므로 당초 실정보고 승인된 자재비 단가를 변동 없이 반영

○ 개봉 유수지 유입 하수BOX 스라브 연장 시공으로 인하여 설치된 옹벽구간은 차량방호울타리(SB4등급) 물량 축소(연장 20m)

- 차량방호울타리 형식변경 검토

위치	규 격		수 량		자재비(원/경간당)			자재비	비고
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	증·감
북측도로 STA1+070~ STA1+170	SB4등급	SB4등급	100m (33경간)	80m (27경간)	294,670	323,297	증)28,627	당초 자재비반영	옹벽 구간 20m 축소

공사비 변경

(단위 : 천원)

구 분	실정보고	변 경
모델명	S사 OG-SB4-1	S사 OGS-SB4-1
시공 이미지
규 격	W3000xH900mm[철재]	W3000xH900mm[철재]
차량충돌시험 유.무	- 시험유무 : 유(‘11.6.15일) - 충돌시험 수행기관:교통안전공단 - 시험등급 : SB4등급	- 시험유무 : 유(‘13.12.09일) - 충돌시험 수행기관: 교통안전공단 - 시험등급 : SB4등급
공사비	12,144,000원	9,933,000원

감리단 의견

○ 북측도로 종점부 보도신설구간 차량방호울타리(SB4등급) 후면이 가로수에 저촉이 되어 설치가 불가하여 충돌시험에 합격한 동급 제품으로 당초 실정보고와 자재비 단가 변경없이 형식 변경하여 설치 하는 것이 타당 하다고 판단되며,

○ 공사의 시급성을 감안하여 본부 승인 후 현장에 변경 시공 하고자 하며 설치수량 20m 감소로 감액되는 변경 공사비 2,211천원에 대하여는 추후 설계변경에 반영 하고자 함.

조치의견

○ 감리단에서 제출한 형식변경 실정보고에 대하여는 감리단 검토의견대로 승인하고자 하며, 감액되는 공사비(2.2백만원)는 추후 설계변경시 반영

붙 임 :  감리 검토의견서 1부.  끝.