보도신설부 차량방호울타리 형식 변경 검토 자료

▣노측용 가드레일 설치부(종점 : 1+070~1+170, L=100.0m ⇒ 변경시공:1+090~1+170, L=80.0m)

▣형식변경 사유 : 당초 설계적용 형식 설치를 위한 시공검토중 후면부 레일설치부와 가로수(B12) 저촉으로 레일설치가 불가한 실정에 따라 후면부 레일 미설치시 기준 등급(SB-4등급) 미달로 향후 안전사고 발생시 분쟁소지를 사전에 방지코자 동급제품중 후면부 레일미설치 제품으로 변경 시공코자 함.

구 분			SB-4등급 제품 비교		비고
평편도
형식별 비교 검토			실정보고 승인분 (주)쓰리에스(모델명:OG-SB4-1)	변경 검토 (주)쓰리에스(모델명:OGS-SB4-1)
시공단면 및 이미지
규격			규격 : W3000xH900mm[철재]	규격 : W3000xH900mm[철재]
차량충돌시험 유.무			▷시험유무 : 유(‘11.6.15일) ▷충돌시험 수행기관: 교통안전공단 ▷시험등급 : SB4등급	▷시험유무 : 유(‘13.12.09일) ▷충돌시험 수행기관: 교통안전공단 ▷시험등급 : SB4등급
공사비	조달가격		326,000원/경간당[현장하차도]	364,000원/경간당[현장하차도]	VAT포함
	현장 설치도	자재비	296,363원/경간당[조달단가]	330,909원/경간당[조달단가]	VAT제외
		설치비	59,227원/경간당[업체 설계단가]	59,227원/경간당[업체 설계단가]	VAT제외
		계	355,590원/경간당	390,136원/경간당
		협의율 (82.868%)	294,670원/경간당	323,297원/경간당 [ 증)28,627원 ]
	공사비 [L=100m]		공사비 : 9,724,110원 시공량 : 33경간	공사비 : 8,729,019원 시공량 : 27경간[시공량 조정]	VAT제외
현장 건의 안			▷기 보고(실정보고승인분)된 형식으로 현장 시공시 가로수와 저촉으로 설치가 불가한 실정에 따라 현장여건을 반영하여 동급제품으로 현장시공이 가능한 제품으로 변경 시공코자 하며. ▷공사비 반영시 당초 실정보고 승인단가를 적용하여 실 시공량에 의거 정산조치코자 함.