서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(KTX 수서역 주변 도로개선대책 타당성조사 및 기본계획)

우리과에서 시행중인 ‘KTX 수서역 등 기반시설 입지에 따른 도로개선대책 타당성조사 및 기본계획용역’에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : KTX 수서역 등 기반시설 입지에 따른 도로개선대책 타당성조사 및 기본계획용역

나. 계약자 : ㈜동일엔지니어링 외 1

다. 준공기한 연기내역

- 당 초 : 2015. 6. 16

- 변 경 : 2015. 9. 16

라. 귀책소재 : 서울특별시

마. 연기사유 : 『올림픽대로 개선 타당성조사 용역』과 과업구간이 중복되어 상호 연계 검토가 필요하여 과업기간 연장.

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 연기방침서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	도로계획과장
★주무관	신대식		간선도로계획팀장	오재영		도로계획과장	06/08 최동필
협조자
시행	도로계획과-7757	(		)	접수		(		)
우	100-101	서울시 중구 세종대로 110 서울특별시청 10층	/
전화	2133-8077	/전송	2133-0763	/	sds9561@seoul.go.kr	/	대시민공개