투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재(철근) 납품기한 연기 요청(서울과학관건립공사)

우리 본부에서 시행 중인 「서울과학관 건립공사」에 관급자재(철근)에 대한 납품기한을 아래와 같이 연기 요청 합니다.

가. 관급자재 납품기한 연기 내역

계약번호 (납품요구번호)	품명	납 품 기 한		비고
		변경 전	변경 후
00136110800 (12-14-1-27823-00)	철근	2015.05.31.	2015.12.31.
00136110700 (12-14-1-27824-00)	철근	2015.05.31.	2015.12.31.

나. 연기사유 : 관급자재 사용시기 조정으로 인한 납품기한 연기

붙 임 :  관급자재 납품기한 연기 요청 관련서류 1부.  끝.

	건축부장
전문관	이수호		환경시설과장	신명승		건축부장	06/15 김우성
협조자
시행	건축부-6771	(		)	접수		(		)
우	100-170	서울 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2647	/전송	02-3708-2659	/	shlee1984@seoul.go.kr	/	부분공개