수신  서부도로사업소장

참조  기전과장

제목  관급자재 제작승인 및 납품기간 연장요청

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 조달청 계약번호 12152097900『관급자재 구매설치(남산1호터널전력설비교체공사)』건과 관련입니다.

3. 위문서와 관련 수배전반 제작 승인도를 별첨과 같이 승인 요청하오니 검토하시여 승인하여 주시기 바랍니다.

4. 또한 조달청과 시담 및 계약 중 “변압기반 제작설치”가 추가 되어 절대 공기 부족으로 아래와 같이 납품 설치 기간을 연장하여 주시기 바랍니다.

가. 아      래

계약번호	당초	변경	비고
121*******00	2015.06.03 ~ 06.28	2015.06.03 ~ 07.15

별첨 : 제작 설치 승인도서 3부.  끝.

대 신 파 워 텍 (주)

대표이사 김 춘 원

시행 대신 제15-019호 (2015. 06. 12)             접수             (            )

487-910  경기도 포천시 신북면 청신로 2097길 85-28

전화 02-994-7878 전송 02-999-3004 담당자 김형태 차장  e-mail orionkht@naver.c