양화대교 구조개선공사

'13.  2.

	서울특별시 도시기반시설본부

양화대교 구조개선 공사 현황

추진목표

○ 한강의 경관과 어울리는 교량으로 성능과 디자인 개선

○ 서해로의 뱃길에 대비 장기적으로 선박의 운항 여건 조성

사업개요

○ 위    치 : 마포구 합정동 ~ 영등포구 당산동(선유도)

○ 규    모 : 기존교량철거 및 아치교량 설치(연장112m, 폭45.8m : 8차로)

○ 사업기간 : '10.02.22 ~ '13.2.28

사업기간 변경현황

구분

당초

변경

비고

전체

‘10.2.22~11.12.31

‘10.2.22~’13.2.28

14개월 연기

○ 연기사유

- 시의회(민주당) 당선자 측의 공사중단요구 : 84일

- 동절기(한파) 및 하절기(폭염및강우)      : 71일

- 추가과업(전망대 및 보도공간 조성)       : 61일

- 예산삭감에 따른 공사중단                : 208일

사업비 변경현황

구분	당초	변경	비고
도급비	36,760백만원	46,110백만원	9,350백만원 증액
○ 증액사유 - 교각충돌 완화시설 추가설치 및 하부공 변경 - 가설교량 공법(벤트) 변경 및 계류시설설치 등 - 우물통(P12.15)보강공법변경 및 거푸집 변경 - 교각 양생방법 및 공기연장에 따른 제작장 손율변경 - 물가변동, 적출잔교, 비점오염원, 가교해체(2차) 변경

	한강교량 항로현황

측량성과

교량별 주운수로 구간에 대한 순경간장 및 형하고는 다음과 같다.

<표 2.3-2> 교량별 순경간장 및 교량 slab높이

구 분	교량간 연장(m)	주운수로 순 경간장(m)	교량 slab높이(EL.m)	비 고
행주대교		101.0(하행선) 108.0(상행선)	16.25
방화대교	1,900	173.5	30.10
신공항철교	1,370	111.0	20.37
가양대교	2,270	172.0	25.70
성산대교	3,320	107.0	25.16
양화대교	1,510	35.0	16.47
당산철교	400	82.0	23.65
서강대교	1,540	54.0	19.40
마포대교	960	55.0	17.72
원효대교	1,000	89	21.45

출처 : “2009년 한강수로조사 보고서(서울특별시)”

	양화대교 하부보강(교각•우물통)

	시공순서도