문서번호	도로계획과-8623
결재일자	2015.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
전문관	도로정책팀장	도로계획과장
정용훈	이승석	전결 06/24 최동필

제2자유로 종점부 입체화 기본설계용역(1차) 설계변경(정산) 검토 보고

2015. 6.

도로계획과

제2자유로 종점부 입체화 기본설계용역(1차)

설계변경(정산) 검토 보고

□ 용역개요

○ 용역명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 기본설계

○ 위  치 : 월드컵로 3개 교차로(구룡, 월드컵3단지, 월드컵경기장 교차로)

○ 규 모 : 교차로 입체화

- 구룡사거리 : 고가차로 L=920m

- 월드컵아파트 3단지 앞 : 지하차도 L=775m

- 월드컵경기장 교차로 : 지하차도 L=490m

○ 계 약 자 : ㈜유신 외 2개사

○ 계약금액 : 1,106,580천원(1차 500,000천원)

○ 용역기간 : 2014.12.31. ~ 2015.12.30.
(1차 : 2014.12.31. ~ 2015.06.30.)

□ 보고내용

○ 설계변경

- 총괄 : 변경없음(1,106,580천원)

- 1차 : 당초 500,000천원 → 변경 499,800천원(감 200천원)

구 분			금 액	증 감
총 용 역 비		당 초	500,000,000원	감 200,000원
		변 경	499,800,000원
공급 가액	설 계 비 (측량, 지반, 교통, 경관 포함)	당 초	451,903,025원	-
		변 경	451,903,025원
손해배상공제료		당 초	2,006,075원	-
		변 경	2,006,075원
부가가치세		당 초	45,390,900원	-
		변 경	45,390,900원
설계자문비		당 초	700,000원	감 200,000원
		변 경	500,000원

- 사유 : 자문비 실비정산에 따른 용역비 감액

□ 향후계획

○ '15. 6월말 : 변경 계약 및 용역 준공

따로 붙임 : 1. 설계변경 요청공문 1부.

2. 설계변경(정산) 내역서 1부. 끝.