문서번호	건축부-7275
결재일자	2015.6.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
조민형		조영수	06/26 김우성
협 조
	경리과장			代김용범

『서울기록원 건립공사』 교통영향분석 및 개선대책 용역 준공기한 연장 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(건축부)

『서울기록원 건립공사』

교통영향분석 및 개선대책 용역기간 변경 검토 보고

「서울기록원 건립공사」 교통영향평가분석 및 개선대책 용역과 관련하여 서울시 교통영향분석∙개선대책 심의위원회 일정이 용역준공일 이후로 예정됨에 따라  원할한 업무 수행을 위하여 용역 기간 연장이 절대 필요하여 용역 기간 변경에 대한 검토 보고 임

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 서울기록원 건립공사 교통영향분석 및 개선대책 용역        ○ 위    치 : 은평구 녹번동 산1-61 외2(구 질병관리본부내)

○ 용    도 : 공공업무시설

○ 건립규모 : 지하2층/지상5층, 연면적15,610.0㎡

○ 용역금액 : 20,500천원

○ 용역기간 : 2015.04.03 ~ 2015.07.02

○ 용 역 자 : ㈜명인기술단

Ⅱ		추진경위

○ 2015.03.31 : 서울기록원 건립공사 교통영향분석∙개선대책 용역 계약

○ 2015.04.03 : 교통영향분석∙개선대책 용역 착수

○ 2015.04.23 : 용역 자문회의(건축)

○ 2015.05.11 : 시 교통정책과 용역 심의 상정

○ 2015.05.29 : 관련부서 및 심의위원 사전검토 의견 통보

○ 2015.06.01. ~ 06.19 : 사전검토 의견에 따른 실무 협의

○ 2015.07.02 : 교통영향분석∙개선대책 용역 준공일

○ 2015.07.13 : 시 교통영향분석∙개선대책 심의위원회 개최(예정)

Ⅲ		변경내용 검토

□ 용역기간 연장

○ 연장사유 : 시 교통영향분석∙개선대책 심의위원회 심의일정이 용역                     준공일 이후로 개최되어 절대공기 부족

- 시 교통영향분석∙개선대책 심의 위원회 사전검토 의견에 대해 관련부서 실무 협의 지연 및 심의 위원회 심의 일정이 용역 준공일 이후로 잡혀 용역 일정이 절대 부족하여 용역기간 연장 필요

○ 조정내용

구 분	변 경 전	변 경 후	증 감
용역기간	‘15.04.03 ~ ‘15.07.02	‘15.04.03 ~ ‘15.08.29	증58일

□ 연기사유 귀책소재  :  도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부  :  미부과

□ 처리의견

- 시 교통영향분석∙개선대책 심의 위원회 사전검토 의견에 대해 관련부서(은평구 도시과, ㈜동해기술단 등) 실무 협의 지연 및 심의 위원회 심의 일정이 용역 준공일 이후로 잡혀 용역기간이 절대적으로 부족하므로 용역기간 연장함이 타당함.

Ⅳ		향후추진계획

○ 2015.07.13 : 시 교통영향분석∙개선대책 심의위원회 심의 개최

○ 2015.07 : 심의 결과에 따른 조치

○ 2015.08 : 교통영향분석∙개선대책 용역 준공

따로붙임 : 용역자 계약변경(용역기간 연장) 요청 문서 1부. 끝.