투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	재사용플라자 건립공사 건설폐기물처리용역 계약변경(총차 및 1차) 의뢰

1. 건축부-7332호(2015.6.29.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인『재사용플라자 건립공사 건설폐기물 처리용역』에대하여 아래와 같이 계약변경(총차 및 1차)을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 재사용플라자 건립공사 건설폐기물 처리용역

나. 계약기간 : `15.2.24.~`16.11.30(총차) / `15.2.24~`15.10.31(1차)

다. 계약금액 : 금304,238,500원(1차:금267,888,000원)

라. 계 약 자 : ㈜백산이엔티건설 외 1개사

마. 계약변경 내용

구 분		변경 전	변경 후	비 고
계약금액	총 차	304,238,500원	644,688,500원	증) 340,450,000원
	1 차	267,888,000원	608,338,000원	증) 340,450,000원

바. 예산과목 : 조직)기후환경본부 자원순환과, 정책사업)효율적인 폐기물처리, 단위사업)생활폐기물 재활용 극대화, 세부사업)서울 재사용 플라자 조성, 통계목) 시설비

붙임   1. 계약변경 검토보고서 사본 1부.

2. 매립폐기물 처리방안 보고서 사본 1부.

3. 건설사업관리기술자 검토보고서 1부.

4. 내역서 1부.

5. 합의각서 1부.    끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김민호		환경시설과장	신명승		건축부장	07/03 안재혁
협조자	주무관	이석우		지방시설사무관대우	차무흥		계약2팀장	홍연화
시행	건축부-7553	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층 도시기반시설본부 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2646	/전송	02-3708-2659	/	protossx@seoul.go.kr	/	부분공개