투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	우이~신설 도시철도 1공구 건설공사 책임감리원
(경유)
제 목	상주감리원(건축분야) 배치계획 조정 승인

1. 평감(우이1)2014-72(2014.3.5)호와 관련입니다.

2. 귀 감리단에서 요청한 상주감리원(건축분야) 배치계획 조정에 대하여 아래와 같이 승인하오니, 공사장 안전관리 및 품질확보에 만전을 기하여 주시기 바라며,

3. 향후 전체 잔여 공정계획이 확정되면 추진일정에 따라 건축분야 상주감리원에 대하여 배치계획 및 투입시기를 재조정 승인 받으시기 바랍니다.

□ 건축분야 상주감리원 배치계획 조정내용

구 분	당 초	변 경
투입기간	`12.10.01 ～ `14.08.05	`12.10.01 ～ `13.03.19 `14.04.01 ～ `14.11.14

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박병만		공사지원과장	김창기		도시철도건축부장	03/07 代박범규
협조자
시행	도시철도건축부-1627	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 산5-85(삼일대로 231)	/	infra.seoul.go.lkr
전화	02-772-7349	/전송	02-772-7309	/		/	대시민공개