투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(발파암 사토처리 실정보고 승인)

1.업무지시현장 :  선사로~고덕지구간 도로확장공사 (주)한국건설관리공사, 선사로~고덕지구간 도로확장공사 주식회사 대저건설

2.작 성 일 자 : 2015-07-06 00:07:00

3.지 시 내 용

가. 선사고덕0420-247호(2015. 6.25) 및 토목부-13906호(2015. 7. 6)와 관련임.

나. “선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사”와 관련하여 고덕산 생태육교구간, 고덕동 660번지일대에서 발생된 발파암에 대하여 일부는 매각, 성토재로 활용 후 남은 발파암은 활용도가 낮은 황갈색, 부스러진 상태 등으로 매각 거부된 발파암에 대하여 문화재조사 지연 및 지장물 미철거 등으로 성토가 불가하여 현장에 방치시 흙깎기 작업이 어려운 현장 여건에 따라, 사토처리(광주시 퇴촌면, 하남 미사지구 등)하고자 실정보고 한 사항에 대하여 감리단 검토의견과 같이 사토장별 실 처리 물량으로 정산토록 승인하고 증액되는 공사비는 추후 설게변경심의위원회 심의 결과에 따라 설계변경에 반영하시기 바랍니다.  끝.

※ 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송 처리 됩니다.

주무관							이한규			광역도로과장					07/06 진재섭
협조자
시행			토목부-13943									(						)		접수											(						)
우	100-777					서울 중구 무교동 96(청계천로 8) 프리미어플레이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2556						/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개