문서번호	토목부-13906
결재일자	2015.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장

사토처리비 반영 검토보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

2015. 7.

도시기반시설본부

(토 목 부)

사토처리 반영 검토보고

- 선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사 -

발생암을 매각 처리코자 하였으나 황갈색이거나 작업과정에서 잘게 부스러진 암은 활용이 불가함을 이유로 반입을 거부하고, 문화재발굴 지연으로 현장 유용도 불가하여 사토장별 처리물량으로 비용을 정산하고자 검토 보고드림

공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 440-1 ~ 고덕동 165-11(아리수로)

○ 사업규모 : 아리수로 도로확장 3.7km, 폭 2차로 → 4 ~ 6차로

○ 사업기간 : 2009. 1. 6. ~ 2015.12.31.

○ 총사업비 : 146,077백만원 (도급액 : 35,444백만원)

○ 시 공 사 : ㈜대저건설외 1사

○ 감 리 사 : ㈜한국건설관리공사

현  황

○ 당초 설계에는 현장에서 발생되는 암(연암〜극경암)을 골재업체에 매각, 예산을 절감토록 되어 있어 매각코자 하였으나 인근 고덕시영아파트 재건축현장에서 발생되는 암의 양이 많고(약 70만 ㎥) 건설수요가 적어 입찰단가가 높아질 수밖에 없는 여건이었음.

○ 그 이유는 모암상태에서의 암질은 발파암(연암 〜 극경암)으로 판정되었으나 깍기작업 시 절리의 방향에 따라 잘게 부스러지거나 암편의 색상이 황갈색으로 상품가치가 없다는 이유(유용재료로 활용이 불가)로 반입 거부의사를 표명(확인서 참조)

○ 이에 이중 일부를 성토재로 활용하였으나, 성토 시기가 맞지 않아(문화재 시굴조사 미완료 및 지장물 미철거 등) 사토처리비 반영이 필요함.

→ 현장 발생암 매각관련 현안사항 보고[선사고덕 0420-631(2014.10.29.)]

○ 사토장별 처리 현황

(단위: ㎥)

사토장별	LH공사 (하남 미사지구)	광주시 퇴촌면	계	비 고
처리량	2,805	15,000	17,805

※ 광주시 퇴촌면 사토처리량은 예정물량으로 추후 실정산 예정임.

공사비 증·감

(단위 : 천원)

구 분	단위	당 초	변 경	증 · 감	비고
직접공사비	1식	- 8,903	427,408	436,311
제 경 비	1식	- 97	57,592	57,689
공사 원가	1식	- 9,000	485,000	494,000
부가가치세	1식	- 900	48,500	49,400
도급공사비	1식	- 9,900	533,500	543,400

감리단 검토의견

○ 인근 고덕시영아파트 재건축현장에서 발생되는 암의 양이 많고(약 70만 ㎥) 건설수요가 적어 입찰단가가 높아질 수밖에 없는 여건이었으며,

○ 문화재발굴조사 및 지장물 미철거 구간이 많아 성토재로 활용하는 것은 한계가 있었으며, 또한 사토처리를 못하고 현장에 쌓아 둘 경우, 현장의 흙깎기 작업구간이 없어 불가피하게 사토 처리할 수밖에 없었음.

○ 따라서 사토장별 실 처리한 물량으로 정산하는 것이 필요함.

※ 본 실정보고는 ‘공사계약 일반조건제6절 공사 설계의 변경 3. 현장상태에 따른 설계변경 및 5. 발주기관의 필요에 의한 설계변경’을 근거로 설계변경 하고자 하며, 실정보고 산출내역은 설계도서 작성 제반기준에 맞게 작성됨.

조치계획

○ 감리단 검토의견과 같이 사토장별 실 처리물량으로 정산토록 승인하고 증액되는 공사비(543,400천원)에 대하여는 추후 설계변경심의위원회 심의 결과에 따라 설계변경에 반영하고자 함.

붙 임 : 감리 검토의견서 1부.  끝.