문서번호	운영과-1032
결재일자	2014.3.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	구의아리수정수센터소장
유동구		이태일	03/10 오세영
협 조
	주무관			정희중

『배출수처리시설 운영관리용역』

설계변경에 따른 변경계약 실시

2014. 3.

구의아리수정수센터

(운 영 과)

『배출수처리시설 운영관리용역』

설계변경에 따른 변경계약 실시

구의아리수정수센터 배출수 처리시설 운영관리용역 설계변경에 따른 변경계약을시행하고자 보고드림.

계약현황

건   명 : 배출수처리시설 운영관리용역(구의아리수정수센터)

계 약 자 : 씨아이바이오텍(주) 대표 김상헌

용역기간 : 2013. 10. 01 ~ 2015. 09. 30

계약금액 : 금361,870,000원

구 분	용 역 기 간	계약금액(원)	비 고
1차년도	2013.10.01 ～ 2013.12.31	36,363,000	준공완료
2차년도	2014.01.01 ～ 2014.12.31	181,210,000
3차년도	2015.01.01 ～ 2015.09.30	144,297,000
총차계약	2013.10.01. ～ 2015.09.30	361,870,000

용역인원 근무현황

구 분
성 명	직 책	담 당 업 무
유 병 우	관리책임자	전 기
김 현 일	운영요원	기 계
최 승 엽	〃	환 경

변경 사유

재건설 공사일정 연기

- 2013년 8월 배출수처리시설 운영관리용역 발주 당시 제2정수장 준공예정일이    2014년 3월이었으나 공사일정이 연기되어 2014년 7월 부하 시운전 및 11월  준공 예정임.

- 제2정수장 준공으로 슬러지케익 생산 증가 등 배출수처리 업무량 증가에 따라      기존 용역직원 3명외에 추가로 1명을 2014년 4월 투입하기로 설계하였으나,

- 재건설공사일정 연기에 맞추어 투입시기를 연기하되, 강우가 집중되는         풍수기에 슬러지케익 생산량이 평상시보다 2∼5배 증가하여 배출수처리장      업무가 가장 많고, 재건설 공사 부하 시운전 실시로 배출수지 및 배슬러지지      운전조건이 변경되는 7월에 추가 1명을 투입하고자 함.

변경계약 내역

계약현황	용역기간	당 초	변 경	비 고
1차년도	2013.10.01. ～ 2013.12.31	36,363,000	36,363,000	변동없음
2차년도	2014.01.01. ～ 2014.12.31	181,210,000	170,040,000	감(11,170,000)
3차년도	2015.01.01. ～ 2015.09.30	144,297,000	144,297,000	변동없음
총차계약	2013.10.01. ～ 2015.09.30	361,870,000	350,700,000	감(11,170,000)

보고의견

위와 같이 재무과에 변경계약을 의뢰하고자 합니다.

붙임 1. 변경설계서 총차분, 2차분 각 1부.

2. 합의서 1부.  끝.