	주간 업무 현황 보고서(14.03.06)
	단계	실행 및 통제	프로세스명	보고관리	문서번호
	버전	v 1.0	사업명	서울광장 기록수집 및 콘텐츠 개발 사업	작성부서	정보공개정책과

▪ 사 업 명	: 서울광장 기록수집 및 콘텐츠 개발 사업
▪ 사 업 부 서	: 정보공개정책과
▪ 추 진 기 간	: 2013.12.31 ~ 2014.07.28

번호	작업구분명	사업기간	단계	진척률		비고
				계획	실적
1	사업관리	2013.12.31~2014.07.28		39.6%	39.6%
2	기록 수집	2013.12.31~2014.05.31		42.4%	42.4%
3	콘텐츠 개발	2013.12.31~2014.07.28		9.9%	9.9%
	계			27.7%	27.7%

주간 업무 현황 보고서

주간업무현황보고서

서울특별시                                                                       /2

진행단계	실행 및 통제						전체 진척률	27.7%
단위과제	전주실적(2014.02.24 ~ 2014.02.28)			금주실적(2014.03.03 ~ 2014.03.07)			차주계획(2014.03.10 ~ 2014.03.14)
	내 용		진척률	내 용		진척률	내 용		진척률
기록정보 서비스운영	<사업관리> 6차 주간회의 일시: 2014.02.27(목) 16시		35.2%	<사업관리> 7차 주간회의 일시: 2014.03.06(목) 14시		39.6%	<사업관리> 8차 주간회의 일시: 2014.03.13(목) 14시 사업홍보		42.0%
	<기록수집> 주제별 기록물 수집 관련단체 전화 접촉 이화 미디어 센터(24일) 전국농민회총연맹(25일) 한국농어민신문(25일) 한미FTA저지 범국민대책본부(24일) 문화연대(24일) 단체 방문 성공회대 민주자료관(26일) 성공회대 노동사아카이브(26일) 민주화실천가족운동협의회(28일) 기록수집 프렌드 아시아(24일) 평화와 통일을 여는 사람들(24일) 한미FTA저지 범국민대책본부(24일) 월드비전(26일): 다문화, 하이서울 페스티벌 도시연대(27일) TBWA KOREA(21일) 시정사진 DB 전수조사 목록 검수 조회건수 : 391,138건 선별건수 : 5,426건(1.4%)		37.5%	<기록수집> 주제별 기록물 수집 관련단체 전화 및 메일 접촉 문화연대(7일) 한미FTA저지 범국민대책본부(7일) 참여연대 TBWA KOREA(6일) 평화와 통일을 여는 사람들(4일) 단체 방문 및 기록수집 성공회대 민주자료관(3일, 기록수집) 성공회대 노동사아카이브(3일, 목록확보) 평화와 통일을 여는 사람들(4일, 기록수집) 2차 수집단계 조사 단체 사전 조사 민주화기녑사업회(소장목록 조사) 국가기록원(소장목록 조사) 기타단체 조사 기관 기록 사전 조사 서울시립대 서울학연구소 서울연구원 서울문화재단 서울역사박물관 수집기록 목록 정리 시정사진 관련정보 표준메타데이터에 매핑 1차 민간단체 수집 기록 정리 공유저작물 수집 한국저작권위원회, 공유마당 (http://gongu.copyright.or.kr) 조회 저작권 관련 자료 조사		42.4%	<기록수집> 2차 수집단계 조사 단체 사전 조사 민주화기녑사업회(소장목록 조사) 국가기록원(소장목록 조사) 보수단체(리드파일 작성) 수집기록 정리 디지털로 변환할 기록 정리 기록물에 대한 목록 입력 사전 작업 분류 및 정리 작업을 위한 기록목록 작성 공유저작물 수집 한국저작권위원회, 공유마당 (http://gongu.copyright.or.kr) 조회		48.0%
	<콘텐츠 개발> 웹 콘텐츠 뷰어 플랫폼 개발 샘플 1차 테스트 팩션 스토리텔링 1차 선별 보완 팩션 스토리텔링 작가 리서치		8.8%	<콘텐츠 개발> 웹 콘텐츠 뷰어 플랫폼 개발 샘플 1차 테스트 평가 사항 반영 진행 팩션 스토리텔링 1차 선별 보완 계속 각 매체별 작가에게 팩션 스토리텔링에 대한 브리핑(영상 감독, 일러스트 작가, 웹 개발팀) 팩션 스토리텔링 작가 리서치 계속 진행		9.9%	<콘텐츠 개발> 웹 콘텐츠 뷰어 플랫폼 개발 샘플 1차 테스트 평가 사항 반영 진행 팩션 스토리텔링 1차 선별 보완 계속 각 매체별 작가에게 팩션 스토리텔링에 대한 브리핑(영상 감독, 일러스트 작가, 웹 개발팀) 팩션 스토리텔링 작가 리서치 계속 진행		11.3%
미결업무 및 대책	내 용				대책 및 조치사항
협의사항
산출물/ 별첨사항	일련번호	내 용
	1	공유마당을 활용한 서울광장 기록 수집계획
	2	서울광장 기록수집 진행카드