문서번호	청계천박물관-288
결재일자	2015.7.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
★주무관		청계천박물관장		서울역사박물관장
박민아		한은희		07/27 강홍빈
협 조
	경영지원부장				박형중
	학예연구부장				박현욱
	총무과장				代김기용

청계천박물관 시민개방형 회의실 및 역사자료실 조성 계획

2015. 7.

서울역사박물관

(청계천박물관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

청계천박물관 시민개방형 회의실 및 역사자료실 조성 계획

청계천박물관 상설전시 리모델링 완료 및 재개관을 앞두고 1층 공간을 시민

개방형 회의실과 역사자료실로 조성하여 박물관 이용객의 편의를 증진하고,

시민과 공유하는 공간을 확보하여 공유도시 서울에 기여하고자 함

Ⅰ		추진배경

□ 추진근거

❍ 서울시 재무국 자산관리과에서 추진한 『시민들이 즐겨찾고 누릴 수 있는 건물·

공간 조성 ‘시유재산의 이용 활성화로 시민행복 증진 프로젝트’』(자산관리과

-12944, 2014.10.22.) 결과에 따른 청계천문화관 개선방안 근거

종전	개선방안
1층 북카페(56㎡)가 내부 주 동선에서 벗어나 있어 활용 저조	북카페를 시민개방형 오리엔테이션룸으로 개조하고, 내방 관람객 피로 해소를 위한 휴게공간으로 조성 (‘15. 5 시민개방)

□ 추진방향

❍ 시민 이용 활성화를 위한 회의실 공간 개방 및 활용도 제고

❍ 상설전시 리모델링 완료 후 재개관에 따른 시민 휴게공간 확보

❍ 청계천 관련자료 수집·열람·제공을 위한 역사자료실 설치로 개방공간 확대

Ⅱ		사업개요

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 청계천박물관 시민개방형 회의실 및 역사자료실 조성

❍ 사업기간 : 2015. 7. 27 ~ 8. 31

❍ 대상공간 : 1층 128.66㎡(회의실 44.78㎡, 역사자료실 83.88㎡)

❍ 사업내용

- 시민개방형 회의실 공간 조성

- 역사자료실·휴게공간 조성

- 서가 등 가구, 그래픽월, 사인물 등 제작·설치

❍ 소요예산 : 총 48,000천원

Ⅲ		세부 추진계획

□ 세부 추진내용

❍ 기존 북카페 관련 시설 철거 및 정리

❍ 바닥, 벽체, 전기·조명, 도장 등 환경 개선

❍ 시민개방용 회의실 조성 : 그래픽월, 회의테의블 등 집기 제작·설치

❍ 역사자료실·휴게공간 조성 : 공간분리용 홀딩도어, 서가 등 집기 제작·설치

❍ 공간별 안내사인물 디자인 제작·설치 등

□ 추진일정

❍ 공간 조성계획 수립 및 업체 선정 : 2015. 7. 20 ~ 8. 2

❍ 공간 조성, 서가 등 제작·설치 및 시공 : 2015. 8. 3 ~ 8. 21

❍ 자료 배치 등 공간 개방 준비 : 2015. 8. 22 ~ 8. 31

Ⅳ		소요예산

□ 총 소요예산 : 48,000천원

❍ 예산과목 : 청계천문화관운영,사무관리비(100-201-01)/시설비(100-401-01)

❍ 산출내역

구분	세부내역	예산액	비고
시민개방형 회의실	철거(벽체 및 바닥 철거 등)	2,000	시설비 (100-401-01)
	공간조성(벽체, 바닥, 전기·조명, 그래픽월 설치)	12,000
	서가, 회의용테이블 등 제작·설치	8,000
	소계 1	22,000
역사자료실 · 휴게공간	철거(벽체 및 외부 유리시트 철거 등)	2,000	사무관리비 (100-201-01)
	공간조성(벽체, 전시월, 홀딩도어, 파티션 설치)	15,000
	서가, 테이블 등 제작·설치	9,000
	소계 2	26,000
합계(소계 1+2)		48,000

(단위 : 천원)

□ 계약방법

❍ 계약방법 : 수의계약

❍ 계약근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조 제1항

제2조(대통령령 제25840호, 2015.1.1)

※ 여성 및 장애인기업의 경우 추정가격 5천만원 이하까지 1인견적 수의계약 가능

Ⅴ		행정사항

❍ 계약 체결 및 지출 : 총무과

Ⅵ		성과지표

❍ 관리역량지표 : 4. 전략계획 수립 및 집행, 성과관리지표 개발 관리

❍ 고유사업지표 : 11. 관람환경의 적정성. 끝.