문서번호	기전과-9396
결재일자	2015.7.29.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	기전과장	강서도로사업소장
하상철	한영호	박재경	07/29 代이은엽
협 조

2015년 한강교량 경관조명 유지보수공사(연간단가) 설계변경(1차) 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.07

강서도로사업소

기전과

- 2015년 한강교량 경관조명 유지보수공사(연간단가) -

설계변경(1차) 계획보고

2015년 한강교량 경관조명 유지보수공사(연간단가)에 대하여 작업 물량변경에 따른 설계변경(1차) 실시 계획을 아래와 같이 보고합니다.

공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2015년 한강교량 경관조명 유지보수공사(연간단가)

□ 공사개요

- 한강교량 경관조명 유지관리 1식

□ 도 급 자 : ****************

□ 계약금액 : 금30,576,800원

□ 공사기간 : 2015. 03. 01 ~ 2015. 12. 31

설계변경 금액 및 내용

□ 설계변경 사유

- 기존 설계 물량과 시공물량 의 변동(증,감) 발생

- 물량정산에 따른 물량변경 조정

□ 설계변경 금액

(단위 : 원)

공 종	금 액		증 . 감	비고
	당초	변경
총 공 사 비	30,576,800	30,576,800	0
도 급 비	30,576,800	30,576,800	0
관 급 비	－	－	－
이 전 비	－	－	－

□ 주요물량 변경내용

연번	공정	당초	변경	증∙감	비고
1	램프교체	65	96	증) 31	작업물량 반영(1차)
2	안정기교체	26	67	증) 41	작업물량 반영(1차)
3	등기구 세척	120	700	증) 580	작업물량 반영(1차)
4	차단기/전자접촉기 교체	23	0	감) 23	잔여물량 조정
5	PANEL설치 및 이설	3	0	감) 3	잔여물량 조정

조치 계획

□ 기존 설계물량과 시공물량 변동에 따라 물량 변경(조정)            반영하여 설계변경(1차)를 시행하여 한강교량 경관조명 성능유지

및 안정성 확보에 차질이 없도록 조치코자 함.

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 합의서 1부.  끝.