시민과 함께 하는 “서울브랜드” 아이디어 공모(7.20.- 9.1.)
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	서울시 예방적 유지보수사업 현장 적용성 평가 용역 준공기한 연기의뢰

1. 우리부서에서 시행중인『서울시 예방적 유지보수사업 현장 적용성 평가 용역』에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 개  요

- 용 역 명 : 서울시 예방적 유지보수사업 현장 적용성 평가 용역

- 계약업체 : ㈜로드코리아   정철기

- 계약금액 : 금19,090,000원

- 계 약 일 : 2015. 06. 19.

- 착 수 일 : 2015. 06. 19.

- 준공기한 : 2015. 08. 18.

나. 준공기한 변경현황

구 분	준 공 기 한		계약금액	비 고
	당 초	변 경
현 황	2015.6.19 ~ 8.18	2015.6.19 ~ 8.31	변경없음

다. 귀책사유 : 서울특별시

라. 지체상금 : 미부과

붙 임 1) 준공기한 연기요청서 1부.

2) 준공기한 검토 보고서 1부.

3) 준공기한 연기요청 1부. 끝.

	도로관리과장
주무관	이옥휘		도로포장안전팀장	임영철		도로관리과장	08/13 代최연우
협조자
시행	도로관리과-12638	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로8 프리미어플레이스 6층 도로관리과	/
전화	2133-8161	/전송	2133-0765	/	hwi0827@seoul.go.kr	/	대시민공개