문서번호	공원조성과-2994
결재일자	2014.3.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		공원개발팀장	공원조성과장
김광열		정일환	03/12 오순환
협조

「경의선숲길 공원조성공사(2단계) 건설폐기물처리용역」

용역기간 연장(1차) 검토보고

2014. 03

푸른도시국

(공원조성과)

「경의선숲길 공원조성공사 건설폐기물 처리용역」관련

용역기간 연장(1차) 검토보고

“경의선숲길 공원조성사업”에 따른 건설폐기물처리 용역기간 연장과

관련된 검토보고 사항임

용역개요

○ 용 역 명 : 경의선숲길 공원조성공사(2단계) 건설폐기물 처리용역

○ 용역위치 : 용산문화체육센타 ∼ 가좌역(홍제천)

※ 기 준공구간(17,400㎡, 연장760m) 제외

○ 계약물량 : 폐콘크리트 3,179톤, 폐아스콘 246톤, 혼합건설폐기물 353톤

○ 계약금액 : ###########

○ 용역업체 : ###########

관련근거 : 경의경춘(감) 제2014-47호(2014.03.10)

용역기간 연장 검토내용

○ 변경사항

구 분		당 초	변 경	비 고
용역기간	전체	2013.10.22.∼2015.12.31	변경없음
	##	######################	######################	######
용역금액	전체	###########	변경없음
	금회	###########	변경없음

○ 귀책사유 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 연장사유 : 본공사 공기연장 및 지장물 철거공사 지연에 따른 용역기간 연장

- 본공사 공기연장과 지장물(상수관로, 맨홀 등) 이설협의 등에 따라

철거공사가 지연되므로 폐기물용역도 연계하여 기간연장필요

○ 감리자의견 : 기간연장이 적정하다고 판단됨

조치의견

○ 감리자 의견대로 용역기간을 연장하고 후속 행정절차를 이행하고자 함

따로붙임 : 1. 감리(시공)사 공문 1부.

2. 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.