시민과 함께 하는 “서울브랜드” 아이디어 공모(7.20.- 9.1.)
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(정산) 시행

우리시에서 시행중인 ‘한강변 도시고속도로 진출․입램프 개선 기본계획’에 대하여 다음과 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 한강변 도시고속도로 진출․입램프 개선 기본계획

2. 회 계 명 : 일반회계

3. 계약기간 : 2014. 5. 28  ~ 2015. 8. 27

4. 계 약 자 : ㈜평화엔지니어링, ㈜다산이엔지

5. 변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
계약금액	343,880,000	278,000,000	감 65,880,000	일부 미추친과업에 대한 정산 및 자문비 실비 정산

6. 예산과목

- 도로건설, 간선도로망확충, 잠실대교 및 천호대교 남단 연결체계 개선, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

- 도로건설, 간선도로망확충, 서강대교 북단 진출입 램프 타당성조사 및 기본계획, 시설비(401-01)

따로 붙임 : 1. 설계변경(정산) 보고 1부.

2. 설계변경(정산) 내역서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

전문관	정용훈		도로정책팀장	이승석		도로계획과장	전결 08/20 최동필
협조자	계약1팀장	김점선
시행	도로계획과-11604	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 도로계획과	/
전화	02)2133-8065	/전송	02)2133-0763	/	hoon0916@seoul.go.kr	/	부분공개(5)