투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기요청(당산동~샛강생태공원간 보행육교설치공사)

1. 우리 본부에서 시행 중인“당산동~샛강생태공원간 보행육교설치공사”에 소요되는 관급자재에 대해 다음과 같이 납품기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기  바랍니다.

가. 공 사 명 : 당산동~샛강생태공원간 보행육교설치공사

나. 관급자재 납품기한 연기 현황

계약건명	품 명	수량	계약번호	납품기한 연기		비고
				당초	변경
당산동~샛강생태공원간 보행육교설치공사 강판구매	일반구조용 압연강판	288.329톤	2015080616100	2015.8.31.	2015.9.30.	㈜라현

다. 연기사유 : 제철소 생산 납기 일정(45일소요)에 따른 납품기한 연기.

붙임 :  남품연기 연장요청서1부.  끝.

	기반시설과장
주무관	최규석		기반시설과장	08/21 한흥태
협조자
시행	기반시설과-639	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0676	/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개